3		온누리 공주시민 정책 추진	이행단계
			추진중

신규여부	신규□ 계속■	예산구분	예산■ 비예산□
사업시기	단기□ 중기□ 장기■	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정□ 제도□ 없음■		626	200		426
연계여부	국정과제□ 도정과제□ 비해당■	완료시기	임기 내■ 임기 후□
이행단계	추진중■ 완료□ 완료(계속)□	이행률	40%

주관부서	부 서 명	실 장	고향사랑팀장	담당자
	미래전략실	김진용(☎2080)	류광현(☎2091)	김은진(☎8103)

Ⅰ	공약개요

□ 목적

❍ 온누리 공주시민 제도 운영 활성화를 통해 잠재적 시민 확보 장기 추진

❍ 新 5도2촌 정책과 온누리시민을 연계하는 등 지역경제 활성화 방안 마련

□ 현황

❍ 온누리공주 회원가입을 통한 공주시의 다양한 소식과 혜택을 제공하여 지속적 관계 유지

❍ 공주시 방문을 유도하여 관광, 축제, 특산물 판매 등 지역 경제 활성화 도모

- 온누리공주 홈페이지 : https://cyber.gongju.go.kr

- 가입자수 : 159,865명 (2023. 11. 8. 기준)

□ 목표

❍ 온누리공주 홈페이지 기능개선 추진 1식

❍ 온누리공주 홈페이지 고도화 구축 1식

❍ 온누리공주 X 공주페이 마일리지 연동 1식

❍ 온누리공주시민 공주시 여행 추진 연 1식

❍ 온누리공주시민제도 운영 및 홍보 연 1식

❍ 온누리공주시민 100만명 확보(임기내 50만명)

□ 기대효과

❍ 온누리 공주시민 제도 활성화를 통해 상생발전과 지역의 새로운 활력 창출

❍ 도-농 교류 촉진 등 각종 정보 교환 도모

Ⅱ	사업 계획

□ 공약사업 개요

❶ 온누리공주 홈페이지 기능개선 및 유지관리

❍ 사업위치 : 공주시 전산실(온누리공주 홈페이지)

❍ 사업기간 : 2022. 01. ~ 2026. 12.

❍ 총사업비 : 50백만원

❍ 사 업 량 : 온누리공주 홈페이지 기능개선 및 유지관리 1식

❍ 사업내용 : 온누리공주시민 확보를 위한 가입 경로 간소화, 기능 확대 등 온누리공주 시스템을 개선하고 운영비 납부 및 유지보수하여 시스템 사용자의 편리성 증진

❷ 온누리공주 홈페이지 고도화

❍ 사업위치 : 공주시

❍ 사업기간 : 2024. 01. ~ 12.

❍ 사 업 비 : 150백만원

❍ 사 업 량 : 온누리공주 홈페이지 고도화 1식

❍ 사업내용 : 우리시의 주요 정책을 접목한 콘텐츠를 구축하고 연계성을 강화하는 한편

온누리 공주 운영에 필요한 시스템 개선

❸ 온누리공주 X 공주페이 마일리지 연동

❍ 사업위치 : 공주시

❍ 사업기간 : 2024. 01. ~ 12.

❍ 사 업 비 : 50백만원

❍ 사 업 량 : 온누리공주 X 공주페이 마일리지 연동 1식

❍ 사업내용 : 지역화폐 사용자가 온누리 공주 마일리지를 전환하여 온누리 공주 회원

가입 유도 (마일리지 5,000점을 공주페이로 전환 사용 추진)

❹ 온누리공주시민 공주시 여행 추진

❍ 사업위치 : 공주시

❍ 사업기간 : 2022. 01. ~ 2026. 12.

❍ 사 업 비 : 85백만원

❍ 사 업 량 : 온누리공주시민 공주시 여행 연 1식

❍ 사업내용 : 온누리공주시민 대상으로 공주 10경 여행, 백제문화여행 등 다양한 여행 콘텐츠 개발하여 공주시 방문인구 증가, 자긍심 고취, 온누리 공주시민 확보

❺ 온누리공주시민제도 운영 및 홍보

❍ 사업위치 : 공주시

❍ 사업기간 : 2022. 01. ~ 2026. 12.

❍ 사 업 비 : 291백만원

❍ 사 업 량 : 온누리공주시민 운영 및 홍보 연 1식

❍ 사업내용 : 온누리공주시민제도 운영, 이벤트 추진, 온·오프라인 홍보물 제작 등으로 온누리공주시민 활성화에 기여

□ 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
온누리공주 홈페이지 기능개선 및 유지관리
온누리 공주 홈페이지 고도화
온누리 공주 X 공주페이 마일리지 연동
온누리공주시민 공주시 여행 추진
온누리공주시민제도 홍보 및 운영

□ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
총 계	626	42	114	290	90	90
온누리공주 홈페이지 기능개선 및 유지관리	50	6	26	6	6	6
온누리 공주 홈페이지 고도화	150	-	-	150	-	-
온누리 공주 X 공주페이 마일리지 연동	50	-	-	50	-	-
온누리공주시민 공주시 여행 추진	85	5	20	20	20	20
온누리공주시민제도 홍보 및 운영	291	31	68	64	64	64

Ⅲ	확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률				100%	100%	0%	0%	40%
온누리공주 홈페이지 개선 사업	식	목표	1		1			100%
		실적	1		1
온누리공주 홈페이지 고도화	식	목표	1			1		0%
		실적	0
온누리 공주 X 공주페이 마일리지 연동	식	목표	1			1		0%
		실적	0
온누리공주시민 공주시 여행 추진	회	목표	4	1	1	1	1	50%
		실적	2	1	1
온누리공주시민제도 운영 및 홍보	식	목표	4	1	1	1	1	50%
		실적	2	1	1
온누리시민 확보	만명	목표	50				50	-
		실적	-

Ⅳ	추진실적

□ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	626	356	144	42	42	33	114	114	111	290	200		90			90
국비	200	200								200	200
도비
시비	426	156	144	42	42	33	114	114	111	90			90			90
민자

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회⋅토론회	언론⋅방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
	3

□ 추진실적

❶ 2022년 지자체 인구감소 대응 우수사례 경진대회 우수상 수상

❍ 2022. 12. : 온누리공주시민제도가 인구감소 대응방안 우수사례 선정
(행정안전부 장관상 및 특별교부세 5억원 확보)

❍ 2023. 01. : 특별교부세 5억원 사업계획서 제출

❷ 온누리공주 홍보 및 광고

❍ 2022. 08. : 온누리공주시민제도 홍보동영상 4편 제작 및 유튜브 광고

❍ 2023. 03. : 리플릿, 전단지, X배너, 웹배너, 전광판 등 홍보물 7종 제작 및 배포

❍ 2023. 03. : 교통수단(버스, 택시 총60대) 온누리공주 홍보물 래핑 광고

❍ 2023. 04. : 대전․ 세종․ 충북․ 충남 아파트 엘리베이터 TV 광고 (97,142세대, 131단지)

택시	버스	아파트 엘리베이터 TV

❸ 온누리공주 홈페이지 기능개선 및 유지관리

❍ 2023. 01. : 2023년 온누리공주 홈페이지 콘텐츠 제작 및 유지관리 용역 계약 추진

❍ 2023. 04. : 온누리공주(모바일) 현장 카카오톡 간편회원가입 기능 준공
온누리공주 현장(모바일) 가입시간 단축(3분 → 30초)

온누리공주 카카오톡 간편가입	온누리공주 카카오톡 간편 로그인

❍ 2023. 04. : 온누리 공주 시민증 디자인 개편

	→

❹ 온누리공주 온라인 이벤트 추진

❍ 2023. 01. : 온누리공주시민 설맞이 통큰 이벤트 추진

❍ 2023. 01. : 온누리공주시민 공주시 고향사랑기부제 SNS 입소문 이벤트 추진

❍ 2023. 02. : 온누리공주시민 추천인왕 선발 이벤트 추진

❍ 2023. 04. : 온누리공주시민 석장리 구석기 축제 초성퀴즈 이벤트 추진

❍ 2023. 05. : 한화와 함께하는 2023 교향악축제 온누리공주시민 대상 공연관람료 30% 할인 이벤트 추진

❍ 2023. 06. : 온누리공주시민 공주시 방문후기 SNS 이벤트 추진

❍ 2023. 07. : 온누리공주시민 이용자 만족도 설문조사 이벤트 추진

❺ 온누리공주 공주역사문화여행 추진

❍ 2023. 03. : 온누리공주시민과 함께하는 공주역사문화여행 운영 용역 계약

❍ 2023. 05. : 온누리공주시민 석장리 구석기 공주문화여행 추진(21명 참여)

❍ 2023. 06. : 온누리공주시민 유구색동수국정원 꽃 축제 공주역사문화여행 추진(21명 참여)

❍ 2023. 10. : 온누리공주시민 백제문화여행 추진(46명 참여)

❻ 온누리공주 홍보부스 운영

❍ 2023. 03. : 공주대-학생-지역사회 연합 홍보제 홍보부스 운영(1일간, 77명 가입)

❍ 2023. 05. : 석장리 구석기 축제 공주문화여행 추진 및 홍보부스 운영(3일간, 480명 가입)

❍ 2023. 05. : 세종시 사회적경제 모두의 이응 행사 홍보부스 운영(3시간, 125명 가입)

❍ 2023. 05. : 국가민방위재난안전교육원 고급리더과정 교육생 대상 온누리공주 홍보

❍ 2023. 06. : 유구색동수국정원 꽃 축제 홍보부스 운영(3일간, 844명 가입)

❍ 2023. 08. : 대전 하나시티즌 브랜드데이 홍보부스 운영(3시간, 176명 가입)

❍ 2023. 08. : 온누리공주시민 유치 공산성 매표소 옆 홍보부스 운영(월 4회, 1040명 가입)

❍ 2023. 09. : 백제마라톤 온누리공주 홍보부스 운영 (2시간, 157명 가입)

❍ 2023. 10. : 온누리공주 2023 대백제전 홍보부스 운영 (17일간, 43,690명 가입)

❼ 온누리공주 가맹점 발굴

❍ 2023. 04. : 온누리공주 가맹점 모집 계획(안) 수립

❍ 2023. 05 ~ 08. : 온누리공주 가맹점 협의 (5개소), 가맹점 발굴 2개소(사계절썰매장, 고마열차)

❍ 2023. 09. : 온누리공주 가맹점 협약식 (힐스포레)

➑ 온누리공주 활성화 및 정보화전략계획(ISP) 용역 추진

❍ 2023. 07. : 온누리공주 활성화 마케팅 및 정보화전략 수립을 위한 용역 추진

❍ 2023. 07. : 온누리공주 활성화 마케팅 및 정보화전략 수립 용역 계약의뢰 및 과업 착수

❍ 2023. 09. : 유동인구 및 카드소비 데이터를 활용한 빅데이터 분석 방향 정립

❍ 2023. 10. : 온누리공주 혜택 마련을 위한 부서(민간포함) 인터뷰 추진

❍ 2023. 11. : 온누리공주 활성화 및 정보화전략계획(ISP) 용역 중간보고회 및 의견수렴

Ⅴ	향후 추진계획

❶ 온누리공주 홈페이지 고도화

❍ 2024.  1. : 사전협의, 보안성 검토, 일상감사, 계약심사 등 사전절차 이행

❍ 2024.  2. : 계약의뢰 및 입찰공고

❍ 2024.  3. : 제안성 평가, 협상 및 계약, 과업 착수

❷ 온누리공주 X 공주페이 마일리지 연동

❍ 2024.  1. : 사전협의, 보안성 검토, 일상감사, 계약심사 등 사전절차 이행

❍ 2024.  2. : 계약의뢰 및 입찰공고

❍ 2024.  3. : 협상 및 계약, 과업 착수

Ⅵ	자치법규(조례, 규칙, 훈령) 제정 및 개정 현황

《 자치법규명 》공주시 온누리시민제도 운영에 관한 조례

❍ 주요내용

- 2023. 06. : 공주시 온누리시민제도 운영에 관한 조례 일부개정