8		이인면 행정복지센터 신축	이행단계
			추진중

신규여부	신규■ 계속□	예산구분	예산■ 비예산□
사업시기	단기□ 중기■ 장기□	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정□ 제도□ 없음■		8,500			8,500
연계여부	국정과제□ 도정과제□ 비해당■	완료시기	임기 내■ 임기 후□
이행단계	추진중■ 완료□ 완료(계속)□	이행률	10%

주관부서	부 서 명	과 장	청사관리팀장	담당자
	회계과	오현규(☎8250)	김병현(☎8271)	안승태(☎8274)
협력부서	부 서 명	면 장	총무팀장	담당자
	이인면	안명(☎2731)	이윤희(☎2728)	정태영(☎2734)

Ⅰ	공약개요

□ 목적

❍ 이인면 지역발전과 주민복지향상을 도모하고 면민들을 위한 행정, 복지 등 복합 서비스 제공

□ 현황

❍ (준공년도) 1983년

❍ (위    치) 이인리 159-2번지   (규    모) 지상 2층, 2동

❍ (연 면 적) 791.27㎡           (주차면수) 22면

□ 목표

❍ 이인면 행정복지센터 건립

□ 기대효과

❍ 이인면 행정복지센터를 건립함으로써 안전성이 확보되고 효율적인 공간배치를 갖춘 양질의 행정서비스 및 주차공간을 제공하고 주민들의 삶의 질 제고

Ⅱ	사업 계획

□ 공약사업 개요

❶ 세부사업명

❍ 사업위치 : 이인면 이인리 208-3번지 일원

❍ 사업기간 : 2022년 ~ 2025년

❍ 사 업 비 : 8,500백만원(시 8,500백만원)

❍ 사업내용 : 이인면 행정복지센터 부지 결정 후 토지 및 지장물 매입, 기본구상 및 타당성 조사 용역, 지방재정투자심사, 공유재산 심의, 실시설계, 신축공사 등 이인면 행정복지센터 신축 1식

□ 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
기본구상 및 타당성 용역	━	━
투자심사 등 행정절차 이행	━	━
실시설계 공모 및 설계, BF인증	━	━
공사착공 및 준공

□ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
총 계	8,500	40	20	1000	7,440	-	-
이인면 행정복지센터 신축	8,500	40	20	1000	7,440	-	-

Ⅲ	확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%							10
기본구상 및 타당성조사 완료	건	목표	1		1			50
		실적
지방재정투자심사	건	목표	1		1
		실적
공유재산관리계획	건	목표	1		1
		실적
설계공모	건	목표	1			1
		실적
설계완료	건	목표	1				1
		실적
공사착공	건	목표	1				1
		실적

Ⅳ	추진실적

□ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	8,500			40	40	20	40	25		1,000			7,440
국비
도비
시비	8,500			40	40	20	40	25		1,000			7,440
민자

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회⋅토론회	언론⋅방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
2	-	-	-

□ 추진실적

❶ 이인면 행정복지센터 신축

❍ 2022. 03. : 정밀안전진단 용역 완료

❍ 2022. 10. : 기본구상 및 타당성조사 용역 발주

❍ 2023. 04. : 제1차 주민설명회 및 후보지 선정

❍ 2023. 08. : 행정복지센터 위치 선정 협의

❍ 2023. 09. : 후보지 감정평가 추진 및 토지매입 협의(금액상이에 따른 협의 결렬)

Ⅴ	향후 추진계획

❶ 이인면 행정복지센터 신축

❍ 2023. 11. : 제2차 주민설명회 및 신규 후보지 선정, 감정평가 및 토지매입 협의

❍ 2023. 12. : 공유재산 심의 및 관리계획 완료

❍ 2024. 01. : 기본구상 및 타당성 조사 완료

❍ 2024. 02. : 지방재정투자심사 완료

❍ 2024. 03. : 공공건축 및 건축심의, 부지매입 완료

❍ 2024. 05. : 실시설계 공모 완료

❍ 2024. 11. : 실시설계, BF인증, 도시계획시설 결정 변경 완료

❍ 2024. 12. : 공사 착공

❍ 2025. 12. : 준공