13		제민천 주변에 근대문화 힐링공간 조성	이행단계
			추진중

신규여부	신규□ 계속■	예산구분	예산■ 비예산□
사업시기	단기□ 중기■ 장기□	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정■ 제도□ 없음□		10,425	1,415	3,683	5,327
연계여부	국정과제□ 도정과제□ 비해당■	완료시기	임기 내■ 임기 후□
이행단계	추진중■ 완료□ 완료(계속)□	이행률	80.0%

주관부서	부 서 명	과 장	팀 장	담당자
	도시재생과	김종섭(☎8910)	도시재생운영팀 황현호(☎8683)	강전명(☎8122)
			도시재생기반팀 전용준(☎8616)	김보미(☎8659)
협력부서	부 서 명	과 장	팀 장	담당자
	문화체육과	김재철(☎8230)	문화시설팀 오종서(☎2586)	곽유희(☎2047)

Ⅰ	공약개요

□ 목적

❍ 제민천 주변 문화유산을 활용한 즐길거리 및 힐링공간 확충

□ 현황

❍ 위  치 : 제민천 일원(봉황교~ 교촌교)

❍ 주변시설

- 근대문화 시설 : 구)공주읍사무소, 공주제일교회 등

- 기타 휴게시설 : 공주하숙마을(2017년 운영개시, 3,596㎡)

□ 목표

❍ 포장마차촌 시범 운영(1회), 제민천 역사문화광장 조성, 제민천 활력거점 조성, 호서극장

시민플랫폼 조성

□ 기대효과

❍ 시민과 방문객에게 원도심에 대한 이미지 제고 및 지역명소로 활성화

Ⅱ	사업 계획

□ 공약사업 개요

❶ 제민천길 일원에 포장마차촌 한시 운영(도시재생과)

❍ 사업위치 : 제민천변 일원(교촌교~봉산교~반죽교)

❍ 사업기간 : 2022. 8. ~ 11. / 기간 중 시범운영 1회(10월 중)

❍ 사 업 비 : 25백만원(국 15, 도 3, 시 7)

❍ 사업내용 : 제민천 주변 상인들이 직접 참여하고 운영하는 포장마차촌 시범 운영

❷ 제민천 역사문화광장 조성사업(도시재생과)

❍ 사업위치 : 반죽동 221-1 일원(옛공주읍사무소 주변)

❍ 사업기간 : 2020. ~ 2022.

❍ 사 업 비 : 15억원(국 9, 도 1.8, 시 4.2)

❍ 사업내용 : 식재공사(소나무 외 14종), 시설공사(종형의자 외 8종), 광장조성(2,430㎡)

❸ 제민천 활력거점 조성사업(도시재생과)

❍ 사업위치 : 반죽동 245-1 일원

❍ 사업기간 : 2020. ~ 2022.

❍ 사 업 비 : 19억원(국 5, 시 14)

❍ 사업내용 : 제민천누리관(도시재생 체험관·홍보관·옥상쉼터 300㎡) 및 제민천 여행자 쉼터(95㎡), 공주문학사랑방(210㎡) 조성

❹ 호서극장 시민플랫폼 조성사업(문화체육과)

❍ 사업위치 : 중동 199번지

❍ 사업기간 : 2020. ~ 2025.

❍ 사 업 비 : 70억원(도 35, 시 35)

❍ 사업내용 : 문화복합공간 조성 1식(개축 709㎡)

□ 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
제민천길 일원에 포장마차촌 한시 운영	━	━
제민천 역사문화과장 조성사업
제민천 활력거점 조성사업
호서극장 시민플랫폼 조성(행정철차)
호서극장 시민플랫폼 조성(설계 및 개관)

□ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내						임기 후
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
총 계	10,425	4,500	2,825	0	3,100
제민천길 일원에 포장마차촌 한시 운영	25	0	25	0	0
제민천 역사문화과장 조성사업	1,500	500	1,000	0	0
제민천 활력거점 조성사업	1,900	1,500	400	0	0
호서극장 시민플랫폼 조성사업	7,000	2,500	1,400	0	3100

Ⅲ	확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%							80.0
제민천길 일원에 포장마차촌 한시 운영	횟수	목표	1	1				100
		실적	1	1
제민천 역사문화광장 조성 공정율	%	목표	100	100				100
		실적	100	100
제민천 활력거점 조성사업 공정율	%	목표	100	100				100
		실적	100	100
호서극장 시민플랫폼 조성사업 공정율	%	목표	100	10	30	70	100	20
		실적	20	10	20	-	-

Ⅳ	추진실적

□ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			기투자			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	10,425	7,325	5,605	4,500	4,500	3,774	2,825	2,825	1,447	0	0	384	3,100
국비	1,415	1,415	1,415	694	694	694	721	721	721	0	0	0	0
도비	3,683	2,133	1,273	1,310	1,310	947	823	823	134	0	0	192	1,550
시비	5,327	3,777	2,917	2,496	2,496	2133	1,281	1,281	592	0	0	192	1,550
민자

□ 시민참여 실적

간담회⋅토론회	언론⋅방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
1	1	1

□ 추진실적

❶ 제민천길 일원에 포장마차촌 한시 운영[도시재생과]

❍ 2022. 08. ~ 09. : 행사 운영을 위한 주민 의견 수렴 및 추진사항 회의(3회) 시행

❍ 2022. 10. : 추진계획 수립 및 포장마차촌 운영 참여자 모집

❍ 2022. 10. 22. : 포장마차촌 시범 운영 / 제민천 어울림 축제‘메아리’

❍ 2022. 11. : 행사 참여자 및 관련 전문가 의견 수렴

❍ 2022. 12. : 사업 결과 보고

❷ 제민천 역사문화광장 조성사업(도시재생과)

❍ 2021. 09. : 제민천 역사문화광장 조성사업 착공

❍ 2022. 10. : 전기공사 준공

❍ 2022. 12. : 제민천 역사문화광장 조성사업 준공

❸ 제민천 활력거점 조성사업(도시재생과)

❍ 2020. 06. : 복합문화공간 연출 및 컨텐츠 제작설치 착수

❍ 2020. 12. : 제민천 활력거점 조성사업 조경공사 완료

❍ 2022. 09. : 홍보관 컨텐츠 제작

❍ 2022. 12. : 제민천 활력거점 조성사업 준공

❹ 호서극장 시민플랫폼 조성사업(문화체육과)

❍ 2020. 07. : 충남 균형발전위원회 사업 확정

❍ 2021. 09. : 대상지 매입 및 소유권 이전 완료

❍ 2022. 02. : 지방재정투자 재심사 완료

❍ 2022. 09. : 충남 공공건축 심의 완료

❍ 2022. 12. : 건축 설계공모 공고(제안공모)

❍ 2023. 02. : 기본 및 실시설계 용역 착수(`23. 04. 중지)

❍ 2023. 04. : 주민설명회 개최

❍ 2023. 08. : 건축물 해체허가 및 해체공사 감리자 지정

❍ 2023. 10. : 개축 부분 철거공사 착공

❍ 2023. 12. : 철거공사 준공 및 존치 부분 구조검토, 문화재 지표조사 착수

Ⅴ	향후 추진계획

❹ 호서극장 시민플랫폼 조성사업(문화체육과)

❍ 2024. 상반기 : 기본 및 실시설계 완료

❍ 2025. 하반기 : 공사 준공 및 개관

□ 관련자료(위치도, 조감도)

1) 제민천 역사문화광장 조성사업, 제민천 활력거점 조성사업

위 치 도
조감도(제민천 역사문화광장 조성사업)	조감도(제민천 활력거점 조성사업)

2) 호서극장 시민플랫폼 조성사업

위 치 도

전경사진