16		공주시민을 위한 주거환경개선	이행단계
			추진중

신규여부	신규■ 계속□	예산구분	예산□ 비예산■
사업시기	단기□ 중기■ 장기□	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정□ 제도□ 없음■
연계여부	국정과제□ 도정과제□ 비해당■	완료시기	임기 내■ 임기 후□
이행단계	추진중■ 완료□ 완료(계속)□	이행률	20%

주관부서	부 서 명	과 장	주택관리팀장	담당자
	허가건축과	남윤선(☎8431)	이소라(☎8457)	박지인(☎8436)

Ⅰ	공약개요

□ 목적

❍ 강남지역의 주택공급으로 주거환경개선

□ 현황

❍ 주택건설사업계획승인 신청 현황

연번	명칭	대지위치	세대수	진행단계			현황
				승인전	승인	착공
1	-	웅진동 227 일원	322	✔			검토중 (접수 23.9.18.)
2	-	웅진동 662 일원	570	✔			검토중 (접수 23.4.7.)
3	유네스코빌리지	웅진동 653-5 일원	68			✔	공사 중 (공정율 80%)

□ 목표

❍ 웅진동 3개 단지 960세대 주택공급

□ 기대효과

❍ 양호한 주택의 공급(960세대)으로 주거환경개선

Ⅱ	사업 계획

□ 웅진동 공동주택건설

❍ 사업기간 :‘22 하반기 ~ ‘26 상반기

❍ 사 업 비 : 비소요

❍ 사업내용

연번	명칭	대지위치	추진계획
1	-	웅진동 227 일원	․ ‘24 상반기 주택건설사업계획승인 ․ ‘24 하반기 착공 및 분양승인 ․ ‘26 상반기 준공 및 입주(322세대)
2	-	웅진동 662 일원	․ ‘24 상반기 주택건설사업계획승인 ․ ‘24 하반기 착공 및 분양승인 ․ ‘26 상반기 준공 및 입주(570세대)
3	유네스코빌리지	웅진동 653-5 일원	․ ‘24상반기 준공 및 입주(68세대)

* 주택건설사업 추진 절차

사전심의 및 평가(경관, 문화재 등)→ 사업계획승인신청(사업시행자)→ 관련부서 및 기관 협의 → 사업계획승인 → 감리자 선정 → 착공 → 사용검사(도 품질검수 및 입주자 사전방문)

□ 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
웅진동 227, 662사업계획 승인	━	━
웅진동 227, 662 착공 및 분양	━	━	━	━
유네스코빌리지 착공	━	━
유네스코빌리지 공사 및 준공

□ 사업별 투자계획

※ 비예산 사업

Ⅲ	확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%	1/6						16.7
사업계획승인 및 착공	개소	목표	3	1	2
		실적	1	1
사용검사	개소	목표	3			1	2
		실적

Ⅳ	추진실적

□ 공약가계부

※ 비예산 사업

□ 시민참여 실적

□ 추진실적

❍ ’22년 9월 : 웅진동 유네스코 빌리지(68세대) 착공신고 완료

❍ ’23년 4월 : 웅진동 662번지 일원 사업계획승인 접수

❍ ’23년 9월 : 웅진동 227번지 일원 사업계획승인 접수

Ⅴ	향후 추진계획

❍ ’24년 상반기 웅진동 892세대 사업계획승인 및 분양(2개소)

❍ ’24년 상반기 유네스코빌리지 68세대 사용검사

❍ ’26년 상반기 웅진동 322세대 사용검사

❍ ’26년 상반기 웅진동 570세대 사용검사