17		유구천 생태수변공원 조성 및 주민친화형 편의시설 구축	이행단계
			추진중

신규여부	신규■ 계속□	예산구분	예산■ 비예산□
사업시기	단기■ 중기□ 장기□	사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정□ 제도□ 없음■		1,060			1,060
연계여부	국정과제□ 도정과제□ 비해당■	임기구분	임기 내■ 임기 후□
이행단계	완료(계속)□ 완료□ 추진중■	이행률	35%

주관부서	부서명(팀명)	과 장	팀 장	담당자
	건설과(하천관리팀)	김만수(☎8311)	윤희대(☎8662)	유재욱(☎8091)

Ⅰ	공약개요

■ 현황

❍ 유구천 자연재해 위험개선지구 정비사업(2014~2018)으로 개수완료 지역

■ 목적

❍ 지역주민 생활 편익 향상

❍ 하천 자원을 활용하여 여가를 즐길 수 있는 공간 조성

■ 목표

❍ 꽃길조성 1km 및 조명시설 설치

■ 기대효과

❍ 신풍 테마파크와 연계하여 관광 인프라를 구축하여 지역경제 활성화기반 마련

Ⅱ	사업 계획

□ 공약세부사업 개요

❶ 유구천 생태수변공원 조성 및 편익시설 구축

❍ 사업위치 : 신풍면 동원리(화장교 ~ 동막교) 일원 L=1㎞, A=1,000㎡

❍ 사업기간 : 2022. 9. ~ 2024. 6.

❍ 사 업 비 : 금1,060백만원(금일십억육천만원)

❍ 사업내용 : 꽃길 조성,  편의시설 설치(L=약 1㎞, 벤치의자 등)

□ 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
유구천 제방길 조성사업 실시설계용역	━	━
유구천 제방길 조성사업	━	━	━	━

□ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
총 계	1,060	60	1,000	0	0	0
유구천 제방길 조성사업 실시설계용역	60	60
유구천 제방길 조성사업	1,000		1,000	0

Ⅲ	공약 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률
사업 착공	식	목표			1
		실적
생태공원 조성완료	식	목표				1
		실적

Ⅳ	추진실적

□ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	1,060	60		60	60		1,000	1000	60
국비
도비
시비	1,060	60		60	60		1,000	1000	60
민자

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회⋅토론회	언론⋅방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
주민설명회 1회			현장 방문 1회

□ 추진실적

❶ 유구천 생태수변공원 조성 및 편익시설 구축사업

❍ 2022.  9. : 실시설계용역 발주

❍ 2022. 10. : 실시설계용역 착수

❍ 2022. 11. : 관련 주민과 현장 답사 실시

❍ 2023.  3 : 주민설명회 개최(1차), 선진지 견학

❍ 2023.  4. : 예산확보(사업비 1,000백만원 / 1, 2회 추경)

❍ 2023.  6. : 실시설계용역 완료

❍ 2023. 11. : 일상감사 및 계약심사 의뢰

Ⅴ	향후 추진계획

❍ 2023. 12. : 사업 착공

❍ 2024. 06. : 사업 준공