18		정안천 생태공원 조성 및 주민친화형 편의시설 구축	이행단계
			추진중

신규여부	신규■ 계속□	예산구분	예산■ 비예산□
사업시기	단기■ 중기□ 장기□	사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정□ 제도□ 없음■		6,000		500	5,500
연계여부	국정과제□ 도정과제□ 비해당■	임기구분	임기 내■ 임기 후□
이행단계	완료(계속)□ 완료□ 추진중■	이행률	30%

주관부서	부서명(팀명)	과 장	팀 장	담당자
	건설과(하천관리팀)	김만수(☎8311)	윤희대(☎8662)	이종민(☎8668)

Ⅰ	공약개요

■ 현황

❍ 좌안의 생태공원 대비 우안이 방치되어 도시경관 저해 등 도시 이미지 실추

❍ 주변 개발계획에 따른 하천수변 이용객 수요 증가, 공주IC교 및 시도20호 확장

⇨ 도심하천으로 접근성 우수, 주변 이용수요 확보로 관광명소로서의 잠재력 높음

■ 목적

❍ 미 조성된 정안천 우안 정비를 통해 균형 있고 조화로운 수변공원 조성

❍ 금강과 연결되는 주요 생태경관 축으로서 접근동선 확보로 관광활성화 기반 마련

■ 목표

❍ 자전거도로 및 산책로 2.8km

❍ 교량 3개소

■ 기대효과

❍ 주민친화형 편의시설 구축으로 시민 여가 공간 확대 및 도시 이미지 개선

❍ 여유와 낭만이 넘치는 아름답고 쾌적한 하천환경 조성

Ⅱ	사업 계획

□ 공약세부사업 개요

❶ 정안천 생태공원 조성 및 편의시설 구축사업

❍ 사업위치 : 정안천(금강합류부~동혈천 합류부) L=2.8km

❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 06.

❍ 사 업 비 : 금6,000백만원(금육십억원) / ※ 실시설계 결과에 따라 변동될 수도 있음

❍ 사업내용 : 호안정비 L=0.5km, 산책로 및 자전거 도로 L=2.8km, 교량 3개소, 초화류 식재

□ 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
실시설계 용역	━	━
정안천 생태공원 조성사업	━	━	━	━

□ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
총 계	6,000	2,200	1,000	2,800	0	0
정안천 생태공원조성사업 실시설계용역	2,000	2,000	0	0	0
정안천 생태공원 조성사업	4,000	200	1,000	2,800	0

Ⅲ	공약 확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률
사업착공	식	목표			1
		실적
생태공원 조성완료	식	목표					1
		실적

Ⅳ	추진실적

□ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	6,000	2,200	200	2,200	2,200	1,700	1,000	1,000		1,400			1,400
국비
도비	500	500		500	500
시비	5,500	1,700	200	1,700	1,700	1,700	1,000	1,000	500	1,400			1,400
민자

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회⋅토론회	언론⋅방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
			주민설명회 1회 현장 방문 1회

□ 추진실적

❶ 정안천 생태공원조성사업

❍ 2022.02~04. : 현장 방문·선진지견학·시정설명회(2월), 실시설계 용역 착수(4월)

❍ 2022.05. : 착수보고회 개최, 관련부서 협의(충남도-하천과)

❍ 2022.09. : 주민설명회 실시

❍ 2023.05. : 공법 심의

❍ 2023.07. : 문화재지표조사 완료

❍ 2023.08. : 사업계획 추가 검토(게이트볼장 진출입로 및 주차장)

❍ 2023. 12. 소규모환경영향평가 협의

❍ 2024. 01. 주민설명회(최종) 및 행정절차

Ⅴ	향후 추진계획

❍ 2024. 03. 소규모환경영향평가 완료 및 공사 착공

❍ 2025. 06. 공사 준공