24		입주기업 친화형 스마트 산업단지 조성	이행단계
			추진중

신규여부	신규■ 계속□	예산구분	예산■ 비예산□
사업시기	단기□ 중기□ 장기■	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정□ 제도■ 없음□		40			40
연계여부	국정과제□ 도정과제□ 비해당■	완료시기	임기 내■ 임기 후□
이행단계	추진중■ 완료□ 완료(계속)□	이행률	15

주관부서	부 서 명	과 장	기업유치팀장	담당자
	경제과	최병조(☎8280)	심효섭(☎8296)	신준섭(☎8286)

Ⅰ	공약개요

□ 목적

❍ 제조혁신으로 기업생산성을 제고하고, 창업과 신산업 시험을 자유롭게 할 수 있으며,
쾌적한 근로환경 및 정주환경을 갖춰 근로자 만족도를 제고하는 산업단지 조성

- 단순 제조공정을 벗어나 AI, 바이오, 빅데이터, 배터리, 모빌리티 위주의 부가가치가 높은 업종 배치

□ 현황

❍ 공주시 산업단지 현황

구분	산업단지	위치	조성면적 (천㎡)	사업비 (억원)	시행사	추진현황 (공정율)	준공인가 (예정)
계	7개 단지		3,303	6,958
1	남공주 일반산업단지	검상동 일원	732	1,243	남공주산단㈜	1공구 준공인가(‘23.5.) 공정율 90%	2025 12. (1공구 2023. 5.)
2	동현 일반산업단지	동현동 일원	300	766	동현산업단지㈜	공사착공(공정율 5%)	2023.12.
3	쌍신 일반산업단지	쌍신동 일원	227	485	㈜세종	보상협의(65%) (공정율 12%)	2025.12.
4	송선 일반산업단지	송선동	314	1,192	동공주산단개발(주)	보상협의 중, 미착공	2024.12.
5	신공주 일반산업단지	의당 가산리 일원	637	2,112	신공주산단개발(주)	산단인신청준비 중	2027.12.
6	유구자카드 일반산업단지	유구읍 일월	96	89	공주시	운영중	2008.07.
7	탄천 일반산업단지	탄천면 안영리 일원	997	1,071	충남개발공사	운영중	2007.07.

❍ 2023.  3. : 공주시 일반산업단지 타당성 용역 완료

□ 목표

❍ 민간주도의 산업단지개발에 대해 관련 행정절차 이행 등 적극적인 행정지원 및 검토

□ 기대효과

❍ 기업의 생산성을 높이고 신산업 창출지원을 통한 근로자 만족도 향상과
지역 주민과 상생 할 수 있는 산업단지 조성

Ⅱ	사업 계획

□ 공약사업 개요

❶ 입주기업 친화형 스마트 산업단지 조성을 위한 타당성 용역

❍ 용역위치 : 공주시 일원

❍ 용역기간 : 2022. 9. ~ 2023. 3.

❍ 용 역 비 : 40백만원(시비 100%)

❍ 용역내용 : 공주시 일원 산업단지 타당성 용역

❷ 입주기업 친화형 스마트 산업단지 조성

❍ 사업위치 : 공주시 유구읍, 탄천면 일원

❍ 사업기간 : 2023. ~ 2026.

❍ 사업내용(타당성 용역 결과)

구 분	강북지구	강남지구
위치/면적	유구읍 일원 / 727,912㎡	탄천면 일원 / 1,237,778㎡
추정사업비	1,084억원	1,899억원
유치업종	비금속 광물제품 등 8개 업종	화학물질 및 화학제품 등 9개 업종

❍ 시 행 자 : 민(관)간개발방식

□ 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
타당성 용역	━	━
지적계획 승인	━	━	━	━
실시계획 승인	━	━
보상 및 착공, 분양활동

※ 상기 일정 및 계획은 사업시행자 등 사정에 따라 변경될 수 있음

□ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
총 계	40	20	20
공주시 산업단지 타당성용역	40	20	20
스마트 산업단지 조성			민(관)간시행사업으로 추진

Ⅲ	확인지표 및 이행률

확인지표	단위	목표/실적		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%			100	100			15
산업단지타당성 용역 완료 (5%)	개소	목표	5	2.5	2.5			완료 (5)
		실적	5	2.5	2.5
산업단지 지정계획반영 (95%)	%	목표	95		10	30	55	10
		실적	10		10

※ 상기 지표는 2025년까지 공사착공 전 행정절차 이행단계 사항임

Ⅳ	추진실적

□ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	40	40	40	40	40	0	0	0	40
시비	40	40	40	40	40	0	0	0	40

※ 용역 외 상기 계획은 민간시행으로 인해 해당사항 없음

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회⋅토론회	언론⋅방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)

□ 추진실적

❶ 입주기업 친화형 스마트 산업단지 조성을 위한 타당성 용역

❍ 2022.  9. : 신규(스마트)일반산업단지 타당성 용역 착수

❍ 2022. 12. : 신규(스마트)일반산업단지 타당성 용역 중간보고회

❍ 2023.  3. : 신규(스마트)일반산업단지 용역 최종보고회 및 완료

❷ 입주기업 친화형 스마트 산업단지 조성

❍ 2023.  5. : 산업단지개발 및 기업유치전문기관 방문(서울시 산업단지개닷컴)

⇒ 천안 풍세·광덕 일원까지 산단개발 시작함에 공주시의 지가·지리·교통 여건 상 충분히 유치 가능

❍ 2023.  6. : 산업단지닷컴 고문(정운찬 前 총리) 및 대표 시장님 면담

⇒ 공주시에 산단 유치을 위해 적극 홍보 요청

❍ 2023.  8. : 신규 산업단지 투자유치 위한 사업자 면담(티에이치개발(주) 대표 황선영)

⇒ 용역 자료 검토 후 구체적인 투자계획 제안 등 재협의 희망

❍ 2023.  9. : 계룡건설산업(주) 신규 산단 예정지 타당성 검토 요청

⇒ 사업추진 타당성 결여 회신

Ⅴ	향후 추진계획

❍ 2023.  12. ~ : 산업단지개발 및 기업유치 전문기관 중점 방문 및 홍보활동 전개

ex) 충남개발공사, 계룡건설 등 건설사, 국내 기업유치전문기관 등

❍ 2025.  1. : 투자의향서 검토, 산업단지 지정계획 반영

❍ 2026.  5. : 산업단지 지정계획 승인 신청