27		장기농공단지 휴폐업 공장 리모델링 및 벤처창업 활성화	이행단계
			추진중

신규여부	신규■ 계속□	예산구분	예산■ 비예산□
사업시기	단기□ 중기□ 장기■	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정■ 제도□ 없음□		28,000	16,000		12,000
연계여부	국정과제□ 도정과제□ 비해당■	완료시기	임기 내□ 임기 후■
이행단계	추진중■ 완료□ 완료(계속)□	이행률	20%

주관부서	부 서 명	과 장	기업유치팀장 일자리육성팀장	담당자
	경제과	최병조(☎8280)	심효섭(☎8296) 이명희(☎8293)	최연아(☎8287) 방양춘((☎8288)

Ⅰ	공약개요

□ 목적

❍ 산단의 휴폐업 공장 등을 재개발하여 창업·중소기업에 저렴하게 임대공간을 제공함으로써 신성장산업 육성 및 산단 활성화에 기여

□ 현황

❍ ㈜한독옵텍(송선동 540-1)이 사실상 휴업 상태

□ 목표

❍ 송선동 540-1 부지 및 건물 매입

❍ 건물 철거 및 신축

❍ 임대 운영

□ 기대효과

❍ 신규 창업의 진입장벽을 낮추고 산업단지 활성화

Ⅱ	사업 계획

□ 공약사업 개요

❶ 사전 조사

❍ 사업위치 : 공주시 송선동 540-1

❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2028. 12.

❍ 사업내용 : 지식산업센터(일자리 창업복합센터) 건립

❷ 사업 부지 조성

❍ 사업위치 : 공주시 송선동 540-1, 부지면적 6,217㎡

❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.

❍ 사 업 비 : 4,500백만원 예상

❍ 사업내용 : 부지 및 건물 매입

❸ 지식산업센터(일자리 창업복합센터) 건물 신축

❍ 사업위치 : 공주시 송선동 540-1, 부지면적 6,217㎡

❍ 사업기간 : 2024. 1. ~

❍ 사 업 비 : 24,600백만원 예상

❍ 사업내용 : 건물 신축

❹ 지식산업센터(일자리 창업복합센터) 운영

❍ 사업위치 : 공주시 송선동 540-1

❍ 사업기간 : 준공 이후~

❍ 사업내용 : 신규 창업자 및 소기업인에게 공간을 저렴하게 임대

□ 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
현장답사 및 연계사업 검토
사업 부지 조성
임대 건물 신축

□ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
총 계	29,100
사업 부지 조성	4,500		4,500
임대 건물 신축	24,600			1,600	3,450	4,700	14,850

Ⅲ	확인지표 및 이행률

확인지표	단위	목표/실적		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%				90			9
휴폐업공장 활용사업	100	목표	100		10	30	60	9
		실적	9		9

Ⅳ	추진실적

□ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	29,100	4,500		1,000	1,000		3,500	3,500	4,500	1,600			3,450			19,550
국비	16,000									1,000			750			14,250
도비
시비	13,100	4,500		1,000	1,000		3,500	3,500	4,500	600			2,700			5,300
민자

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회⋅토론회	언론⋅방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)

□ 추진실적

❍ 2022. 12. : 타당성 연구용역 착수

❍ 2023.  3. : 지식산업센터 건립 공모사업 신청

❍ 2023.  5. : 지식산업센터 건립사업 타당성 심의 통과(중소벤처기업부)

❍ 2023.  6. : 공유재산 심의(사업부지 취득사항)

❍ 2023.  8. : 부지확보 추가예산 확보

❍ 2023. 11. : 지방재정투자심사(중앙심사) 통과

Ⅴ	향후 추진계획

❶ 공약사업 부지 확보

❍ 2023. 12. : 부지매입 완료

❷ 지식산업센터 건립

❍ 2024. ~ : 지식산업센터 신축