31		공동주택지 주차난 해소 사업	이행단계
			추진중

신규여부	신규■ 계속□	예산구분	예산■ 비예산□
사업시기	단기□ 중기□ 장기■	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정□ 제도□ 없음■		2,700			2,700
연계여부	국정과제□ 도정과제□ 비해당■	완료시기	임기 내■ 임기 후□
이행단계	추진중■ 완료□ 완료(계속)□	이행률	50%

주관부서	부 서 명	과 장	교통안전팀장	담당자
	교통과	김진택(☎8481)	김창윤(☎8501)	함충훈(☎8502)

Ⅰ	공약개요

□ 목적

❍ 공주시 공동주택지 내 인구밀집으로 주차난 해소를 위한 공영주차장 조성사업

□ 현황

❍ 공동주택지 밀집지역 내 공영주차장이 부족함

- 불법 주정차 증가로 단속을 강화하고 있으나 공영주차장이 적어 불편 호소

❍ 공동주택지 인근 공영주차장 조성 추진 및 완료

❶ 월송지구 임시공영주차장 조성공사 ☞ 준공 완료(A=1,271.4㎡/ 50면)

❷ 반죽 무령로 공영주차장 조성공사 ☞ 토지 및 건물 상속등기 절차로 인한 협의 지연

□ 목표

❍ 공영주차장 조성 2개소, 설치면수 75면

□ 기대효과

❍ 공동주택지 밀집지역 내 불법주정차를 공영주차장으로 유도하여 안전사고를 예방 하여 시민들의 삶의 질 향상

Ⅱ	사업 계획

□ 공약사업 개요

❶ 월송지구 임시주차장 조성사업

❍ 사업위치 : 월송동 629번지 일원

❍ 사업기간 : 2022. 9. ~ 2023. 6.

❍ 사 업 비 : 17.5억원(매입비 17 공사비 0.5)

❍ 사업내용 : 임시주차장 조성/ A=1,271.4㎡/ 50면

❷ 반죽 무령로 공영주차장 조성사업

❍ 사업위치 : 반죽동 94-4번지 외 1필지 일원

❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.

❍ 사 업 비 : 10억(보상비 7억, 공사비 3억)

❍ 사업내용 : 공영주차장 조성/ A=719.1㎡/ 25면

□ 사업별 추진일정

사업명		2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
월송지구	월송지구 임시주차장 조성사업	━	━
	보상 및 공사 추진
반죽동 무령로	반죽 무령로 공영주차장 조성사업 공유재산심의 및 협의
	보상 및 공사 추진	━	━

□ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
총 계	2,700	1,700	1,000
월송지구 임시주차장 조성사업	1,700	1,700	-	-	-	-
반죽 무령로 공영주차장 조성사업	1,000	-	1,000	-	-	-

Ⅲ	확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%							50
공동주택지 주차장 확보	면수	목표	75	0	75			66
		실적			50

Ⅳ	추진실적

□ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	2,700			1,700	1,700	1,700	1,000	1,500
국비
도비
시비	2,700			1,700	1,700	1,700	1,000	1,500
민자

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회⋅토론회	언론⋅방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)

□ 추진실적

❶ 월송지구 임시주차장 조성사업

❍ 2022. 7. : 월송지구 주차장 부지 관련 필지정보 등 협의 요청(공주시 → 한국토지주택공사)

❍ 2022. 7. : 필지정보 회신(한국토지주택공사 → 공주시)

❍ 2022. 9. : 토지매입 행정절차 추진 요청(공주시 → 한국토지주택공사)

❍ 2022. 11. : 토지매입 계약 완료 및 토지대금 지급(17억) /실시설계용역 발주

❍ 2023. 1. : 공사발주

❍ 2023. 3. : 공사중지(경작자로 인한 공사중지)

❍ 2023. 5. : 공사중지 해제

❍ 2023. 6. : 준공

❷ 반죽 무령로 공영주차장 조성사업

❍ 2022. 9. : 공유재산 심의안건 제출(회계과)

❍ 2023. 2. : 사업계획 변경에 따른 공유재산 심의 부의안건 제출(회계과)

❍ 2023. 4. : 편입대상지 보상금 사정결의

❍ 2023. 5. : 보상협의 통보

Ⅴ	향후 추진계획

❶ 월송지구 임시주차장 조성사업

❍ 향후 임시공영주차장 이용률 및 수요에 따라 주차타워 건립 예정

❷ 반죽 무령로 공영주차장 조성사업

❍ 2023. 8. ~ 12. : 토지보상협의(토지 및 건축물 상속에 따른 협의 지연)