33		전국제일 공주밤 명품화 사업	이행단계
			추진중

신규여부	신규□ 계속■	예산구분	예산■ 비예산□
사업시기	단기□ 중기■ 장기□	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정■ 제도□ 없음□		3,844	710	860	1,324	950
연계여부	국정과제□ 도정과제□ 비해당■	완료시기	임기 내■ 임기 후□
이행단계	추진중■ 완료□ 완료(계속)□	이행률	29%

주관부서	부 서 명	과 장	임산소득팀장	담당자
			류기석(☎8423)	박채윤(☎8426) 황보민(☎8687)
	산림공원과	우공식(☎8401)	밤연구팀장	담당자
			허진이(☎8239)	김효식(☎8847) 이다혜(☎2157)

Ⅰ	공약개요

□ 목적

❍ 공주밤의 고품질화로 재배농가 소득 증대 도모 및 경쟁력 강화

❍ 공주시에서 생산되고 품질이 우수한 알밤과 밤 가공상품에 「공주알밤 공동브랜드」를 적용하고 품질관리로 공주알밤의 경쟁력 강화

□ 현황

❍ 22년 산림소득분야 지원사업 추진

- 밤 생산기반 예산 지원(8개사업, 760백만원, 478ha)

- 비료 지원 사업(1회 추경, 150백만원, 시비 100%) 추가 지원

❍ 공주밤, 정안밤 등이 지리적표시 단체표장으로 등록되어 있으나 해당 단체 구성원만 사용할 수 있으며, 공주시 전체 밤산업 차원의 공동브랜드는 없는 상황

□ 목표

❍ 품종별 수확관리 및 생산자 실명제 도입, ‘23년 산림소득분야 지원사업 예산 확대 편성

❍ 공주알밤 공동브랜드 디자인(BI) 개발, 운영조례 제정, 특허청 출원․등록, 전담인력 배치(브랜드 운영 및 품질관리)

□ 기대효과

❍ 밤 생산기반 취약 부분 보조사업 확대 지원으로 품질 개선 및 효율성 향상

❍ 공주알밤 공동브랜드를 통한 적극적 마케팅과 품질관리로 밤산업 활성화에 기여

Ⅱ	사업 계획

□ 공약사업 개요

❶ 공주밤 품질개선

❍ 사업위치 : 공주시 일원

❍ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2026. 12.

❍ 사 업 비

- 보조사업 : 500백만원(국·도·시 + 자부담) * 매년 사업으로 매년 사업비 확보

- 연구용역 : 150백만원(품종개발 기반 150백만원)

- 재배교육 : 10백만원(년 2회 5년간)

❍ 사업내용

- 공주밤 품질개선을 위한 생산기반 확충(유기질비료, 밤토양개량제 지원 등)

- 공주지역 고유의 공주밤 품종개발을 위한 기반 마련(연구용역)

- 전문가를 초빙하여 밤재배 임업인들 교육 실시

※ 품종별 수확관리 : 2023년 수매처별로 품종별 수확량 조사 후 정책 등에 반영 예정

❷ 공주알밤 공동브랜드 개발 및 운영

❍ 사업위치 : 공주시 일원

❍ 사업기간 : 2022. 10월 ~ 2024년(계속)

❍ 사 업 비 : 494백만원 *브랜드 홍보, 지원(포장재) 사업(150백만원)은 매년 사업비 확보

❍ 사업내용

- 공동브랜드 디자인(BI) 개발

- 특허청에 공동브랜드 상표 출원․등록

- 공동브랜드 운영 조례 ․ 시행규칙 제정

- 공동브랜드 운영 및 품질관리 전담인력(공무원) 배치 (*행정지원과 인사팀 협조)

- 공동브랜드 운영(알밤가공상품 및 원물)에 순차적 적용 및 품질관리

□ 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
공주밤 품질개선	━
연구용역(밤 품종개발 기반)
BI개발, 상표등록, 조례제정, 전담인력 배치	━	━	━
공동브랜드 운영	━	━

□ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
총 계	3,844	522	672	850	900	900
공주밤 품질개선	3,200	500	600	650	700	750
연구용역(밤 품종개발 기반)	150		50	50	50
공주알밤공동브랜드 개발 및 운영	494	22	22	150	150	150

Ⅲ	확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%							29%
친환경임산물 재배관리	ha	목표	1,460	270	340	400	450	50%
		실적	920	280	640
밤 생산기반조성 (노령목·수확망)	명	목표	295	55	70	80	90	50%
		실적	268	58	210
밤재배 교육	회	목표	6		2	2	2	33%
		실적	2		2
연구용역(밤 품종개발 기반)	식	목표	1				1	0%
		실적
공동브랜드 BI 개발	식	목표	1		1			100%
		실적	1		1
공동브랜드 상표 출원․등록	식	목표	1			1		0%
		실적
공동브랜드 운영조례 및 시행규칙 제정	식	목표	1		1			0%
		실적
공동브랜드 운영	식	목표	1			1		0%
		실적

Ⅳ	추진실적

□ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	3,844	569	525	522	569	525	672	760	670	850			900			900
국비	710	113	113	110	113	113	135	180	180	145			155			165
도비	860	147	147	140	147	147	165	165	150	175			185			195
시비	1,324	159	115	150	159	115	225	225	150	318			333			298
민자	950	150	150	122	150	150	147	190	190	212			227			242

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회⋅토론회	언론⋅방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
1		1

❍ 공주알밤 공동브랜드 개발 관련 설문조사

- 조사일시 : 2023 .1. 19.(목) 13:30 ~ 15:00 / 장소 : 농업회관 대강당

- 조사대상 : 임업인, 임업관련 단체 및 법인, 산림분야 종사자 등 180명

- 조사내용 : 공동브랜드 품질관리, 신청대상, 참여자 지원사업, 건의사항 등

❍ 공주밤 품질인증체계 구축을 위한 관련 기관․단체 연석회의(1차)

- 회의일시 : 2023. 8. 28.(월) 10:00 ~ 11:30 / 장소 : 시청 집현실

- 참석대상 : 산림조합, 정안․사곡농협, 생산․가공․유통 단체 및 법인 등 12명

- 회의내용 : 도입배경, 타 지자체 현황, 밤 품질인증제 주요 논의사항 등

□ 추진실적

❶ 공주밤 품질개선

❍ 친환경임산물 재배관리(유기질비료, 밤 토양개량제)

- 2022. 1. ~ 12. : 보조사업 완료 및 지급(1.1억, 280ha)

- 2023. 11. : 보조사업 완료 및 지급(2.5억, 640ha)

❍ 생산기반 조성(밤 노령목 관리, 밤 수확망)

- 2022. 1. ~ 12. : 보조사업 완료 및 지급(3.9억, 58명)

- 2023. 11. : 보조사업 완료 및 지급(9.1억, 210명)

❷ 공주알밤 공동브랜드 개발 및 운영

❍ 공주알밤 공동브랜드 개발 관련 설문조사 : 2023. 1월

❍ 공주알밤 공동브랜드 디자인 개발용역 착수 : 2023. 2월

❍ 공주알밤 공동브랜드 디자인 초안에 대한 선호도 조사 : 2023. 6~7월

❍ 공주밤 품질인증체계 구축 용역 착수 : 2023. 8월

❍ 공동브랜드 디자인(BI) 개발 완료 : 2023. 11월

Ⅴ	향후 추진계획

❶ 공주밤 품질개선

❍ 2023. 5월 ~ 12월 : 유기질비료 외 24개 지원사업 완료 및 보조금 지급 *매년 지속적인 사업

❍ 2023. 10월 ~ 2025. 12월 : 공주지역 고유의 공주밤 품종개발을 위한 기반 마련 연구용역 완료

- 2026. 1월 ~ : 공주밤 품종개발 착수

❍ 2023. ~ 2025. : 년 2회 밤재배에 관한 교육 실시

❷ 공주알밤 공동브랜드 개발 및 운영

❍ 2024. 1월 ~ 3월 : 공동브랜드 운영 조례 ․ 시행규칙 제정

❍ 2024. 1월 ~ 2024. 12월 : 특허청에 공동브랜드 상표 출원․등록

❍ 2024. 7월 : 공동브랜드 운영 및 품질관리 전담인력(공무원) 배치 (*행정지원과 인사팀 협조)

❍ 2025. 1월 ~ : 특허청 등록 후, 공동브랜드 운영(알밤 및 가공상품에 순차 적용, 품질관리)