35		스마트 원예 활성화	이행단계
			추 진 중

신규여부	신규□ 계속■	예산구분	예산■ 비예산□
사업시기	단기□ 중기■ 장기□	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정■ 제도□ 없음□		24,064	622	7,907	9,530	6,005
연계여부	국정과제□ 도정과제□ 비해당■	완료시기	임기 내■ 임기 후□
이행단계	추진중■ 완료□ 완료(계속)□	이행률	37%

주관부서	부서명	과 장	원예특작팀장	담당자
	농업정책과	이철원(☎3410)	안영희(☎3431)	장정민(☎3433)
협력부서	부서명	과 장	역량개발팀장	담당자
	농촌진흥과	오병규(☎3510)	임재철(☎3516)	유재은(☎3518)
	부서명	과 장	소득작물팀장	담당자
	기술보급과	김희영(☎3540)	유병관(☎8950)	김수정(☎8951)

Ⅰ	공약개요

□ 목적

❍ ICT 시설‧장비 보급을 통해 농작물 품질 및 생산성 향상으로 농가 소득 증대

❍ 농작물의 최적화된 생육조건 제공하고 고품질의 농작물 생산

□ 현황(‘22년기준 지원내역)

❍ 지역특화단지 육성 109농가, 40ha

❍ 생산시설 보완 53농가, 17.7ha

❍ ICT 융복합 확산 6농가, 3ha

□ 목표

❍ 시설원예 임대형 스마트팜 조성 2.5ha

❍ 매년 스마트팜 및 현대화시설 확대 26.5ha

□ 기대효과

❍ 시간적·공간적 제약 탈피로 여유시간 향상 및 삶의 질 개선, 우수 신규 인력의 농촌 유입 가능성 증대

❍ 노동·에너지 등 투입 요소의 최적 사용을 통해 농업의 경쟁력을 높이고 미래성장 산업 육성

Ⅱ	사업 계획

□ 공약사업 개요

❍ 사업위치 : 공주시 일원

❍ 사업기간 : 2022. 2. ~ 2026년(계속)

구분	추진 내용	총사업비 (백만원)	주요 내용	비고
계		24,065
임대형 스마트팜	부지 매입비	1,347	부지매입 및 대부 2.4ha
	시설원예 임대형 스마트팜 단지 조성사업	10,000	스마트 원예단지 조성 3.3ha
지역특화단지 육성	지역특화단지 육성 시설하우스 지원사업	4,800	노후 온실 개축 및 시설 개선
생산시설 보완	원예특용작물 생산시설보완	1,250	양액재배시설 등 생산시설 현대화
	농업에너지 이용 효율화 지원	1,115	에너지절감시설 설치 지원
	시설원예 현대화	295	관수관비, 환경관리 등 생산시설 현대화
ICT 융복합 확산	ICT 융복합 확산사업	1,133	스마트팜 시설 지원
	청년농 맞춤형 스마트팜 지원	1,200	스마트팜 신축 지원 (만 18~39세 청년농 대상)
	중소원예농가(가족농) 스마트팜 보급지원	2,925	비닐온실 신축 + ICT융복합시설 + 양액재배시설

□ 사업별 추진일정

구분	세부계획	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
임대형 스마트팜	공모신청 및 부지매입
	투자심사
	설계 및 조성 공사
	청년농 선발 및 운영
그 외 사업	공모(공고) 및 심의
	교부결정
	현장점검 및 정산

□ 사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
총 계	24,065	2,304	8,950.5	7,603.5	2,603.5	2,603.5
임대형 스마트팜	11,347	-	6,347	5,000	-	-
지역특화단지 육성	4,800	960	960	960	960	960
생산시설 보완	2,660	532	532	532	532	532
ICT 융복합 확산	5,258	812	1,111.5	1,111.5	1,111.5	1,111.5

Ⅲ	확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률								37%
내년도 예비사업자 모집	회	목표	4	1	1	1	1	25
		실적	2	1
임대형 스마트팜 준공	식	목표				1		30
		실적
지역특화단지 육성	ha	목표	40	10	10	10	10	59
		실적	15	15	8.7	-	-
생산시설 보완사업	ha	목표	60	15	15	15	15	42.6
		실적	16	16	9.6	-	-
ICT 융복합 확산사업	ha	목표	7.5	1.5	2	2	2	29
		실적	1.3	1.3	0.9	-	-

Ⅳ	추진실적

□ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	24,064	24,064	14,605	2,303.4	2,303.4	2,183	8,950.4	15,897	12,422	7,603.4			2,603.4			2,603.4
국비	622	622	225	124.4	124.4	116	124.4	119	109	124.4			124.4			124.4
도비	7,907	7,907	7,162	171	171	160	3,634	7,263	7,002	3,634			234			234
시비	9,530	9,530	5,610	879	879	815	3,973	6,754	4,795	2,626			1,026			1,026
민자	6,005	6,005	1,608	1,129	1,129	1,092	1,219	1,761	516	1,219			1,219			1,219

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회⋅토론회	언론⋅방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
			민간 전문가 자문 2회

❍ 2021. 08. 18. : 스마트팜 ICT융복합 확산사업 컨설팅 실시 / 농림수산식품교육문화정보원 주관

❍ 2021. 12. 30. : 시설원예 스마트팜 사업만족도 설문조사

❍ 2022. 04. 21. : ICT 융복합 지원사업 대상자 선정심의‧자문 / 원예‧식품산업 분과위원회

□ 추진실적

❶ 시설원예 임대형 스마트팜 단지 조성사업

❍ 2022. 11. 29. : 공모 선정

❍ 2022. 12. 14. : 대상토지 감정평가

❍ 2023. 04. 07. : 한국농어촌공사 공주지사 위(수)탁 협약

❍ 2023. 04. 13. : 재정투자심사 의뢰

❍ 2023. 04. 19. : 토지매입완료, 문화재 지표조사

❍ 2023. 05. 26. : 지방재정 대규모 투자 심사 조건부 승인

❍ 2023. 06. 15. : 실시설계 및 소규모 환경영향평가 착수

❷ 지역특화단지 육성

❍ 2022. 07. ~ 08. : 지역특화단지 육성 시설하우스 지원사업 교부결정(109농가, 40ha)

❍ 2022. 09. : 2023년 지역특화단지 육성 시설하우스 지원사업 수요조사

❍ 2022. 10. ~ 12. : 완료 농가 현장 점검 및 정산

❍ 2023. 04. ~ 07. : 지역특화단지 육성 시설하우스 지원사업 교부결정(78농가, 29ha)

❸ 생산시설 보완

❍ 2022. 04. 21. : 2022년 시설원예 현대화 사업 교부결정(5농가, 1.6ha)

❍ 2022. 05. 02. : 2022년 농업에너지이용 효율화 지원사업 교부결정(8농가, 4.6ha)

❍ 2022. 07. ~ 08. : 2022년 원예특용작물 생산시설 보완사업 교부결정(40농가, 11.5ha)

❍ 2022. 09. : 2023년 원예특용작물 생산시설 보완사업 수요조사

❍ 2022. 09. : 2023년 농업에너지 이용 효율화, 시설원예 현대화 사업 예비사업자 선정

❍ 2022. 10. ~ 12. : 완료 농가 현장 점검 및 정산

❍ 2023. 03. 15. : 2023년 시설원예 현대화 품질개선사업 교부결정(6농가, 2.6ha)

❍ 2023. 03. ~ 08. : 2023년 농업에너지이용 효율화 지원사업 교부결정(7농가, 3.8ha)

❍ 2023. 4. 19. :　2023년 원예특용작물 생산시설 보완사업 교부결정(8농가, 2.4ha)

❹ ICT 융복합 확산

❍ 2022. 05. 10. : 2022년 ICT융복합 스마트팜 시설보급 교부결정(2농가, 1.3ha)

❍ 2022. 05. 23. : 2022년 중소원예농가(가족농)스마트팜 보급지원사업 교부결정(3농가, 0.7ha)

❍ 2022. 07. 28. : 2022년 스마트폰 자동제어시스템 구축사업 교부결정(1농가, 1ha)

❍ 2022. 09. : 2023년 ICT융복합 확산사업 사전컨설팅 및 예비사업자 선정

❍ 2022. 10. : 완료 농가 현장 점검 및 정산

❍ 2023. 06. : 중소원예농가(가족농) 스마트팜 보급지원사업 교부결정 (2농가, 0.6ha)

❍ 2023. 06. : 스마트팜 ICT융복합확산사업 교부결정(2농가, 0.9ha)