38		지역 농산물 유통기반 확충	이행단계
			추진중

신규여부	신규■ 계속□	예산구분	예산■ 비예산□
사업시기	단기□ 중기■ 장기□	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정■ 제도□ 없음□		2,820	854	774	1,192
연계여부	국정과제□ 도정과제□ 비해당■	완료시기	임기 내□ 임기 후■
이행단계	추진중■ 완료□ 완료(계속)□	이행률	37%

주관부서	부 서 명	과 장	푸드플랜팀장	담당자
	농식품유통과	오찬근(☎3430)	김병재(☎3451)	김중권(☎3452)

Ⅰ	공약개요

□ 목적

❍ 공주형 로컬푸드 유통체계 구축

- 로컬푸드 인증제 운영, 기획생산 작부체계 수립, 권역별 농산물 물류 시스템 등 농산물 유통기반 확충하여 로컬푸드 순환 구조 확립

❍ 제1호 공주 로컬푸드 직영 직매장 건립

- 공주시 먹거리 순환체계 완성을 위한 농업인 참여 자립형 직영 매장 건립

□ 현황

❍ 농업인의 소득 향상 및 도시민의 신선한 지역 식재료 공급 확대를 위한 지역 농산물 유통기반 확충이 민선 8기 시장 공약 사업으로 선정

❍ 대도시의 제휴 푸드 공급을 위한 농산물 관리 역량 강화 필요

- 대도시 등 수요지는 철저하게 관리되고 안정적으로 공급될 수 있는 공급처를 필요로하고 있어, 농식품 생산․유통에 대한 농업인 및 유통인의 성숙된 역량 요구

□ 목표

❍ 공주푸드 인증제 운영(시행규칙 제정 1건, 디자인 개발 1식)

❍ 공주 로컬푸드 통합교육 정례화

❍ 공주푸드 참여자 조직화(작부계획 수립) 및 물류 시스템 구축(1개 권역)

❍ 공주푸드 대도시 매장 진출(입점)(1개소)

❍ 직영 로컬푸드 직매장 건립(1개소)

□ 기대효과

❍ 시민에게 안전하고 건강한 지역먹거리 보장

❍ 농업인의 안정적 일자리, 소득창출로 지역 활성화 기여

Ⅱ	사업 계획

□ 공약사업 개요

❶ 공주푸드 인증제 도입(디자인, 제도)

❍ 사업기간 : 2022.09월 ~ 2023. 12월

❍ 사 업 비 : 47백만원(국 23.5 시 23.5)

❍ 사업내용 : 공주푸드 인증제 도입을 위한 디자인 및 제도 개발

❷ 공주 로컬푸드 통합교육

❍ 사업기간 : 2023. 1월 ~ 2026. 12월

❍ 사 업 비 : 50백만원(국 25 시 25)

❍ 사업내용 : 공주 로컬푸드 참여자 안전성 관리 및 상품화 교육 실시

❸ 참여자 조직화 및 물류시스템 구축

❍ 사업기간 : 2023. 7월 ~ 2026. 12월

❍ 사 업 비 : 60백만원(시 60)

❍ 사업내용 : 작부계획 수립 농가 조직화 및 권역별 순회 수집 등 물류 시스템 구축

❹ 대도시(대전, 세종) 매장 진출

❍ 사업기간 : 2024. 7월 ~ 2026. 12월

❍ 사 업 비 : 90백만원(국 45 시 45)

❍ 사업내용 : 공주푸드 인증 농산물 대도시 입점 지원(안전성 관리, 상품화 및 물류 지원)

❺ 공주시 직영 로컬푸드 직매장 건립

❍ 사업기간 : 2022. 12월 ~ 2026. 12월

❍ 사 업 비 : 2,600백만원(국 780 도 780 시 1,040)

❍ 사업위치 : 공주시 관내

❍ 사업내용 : 공주시 직영 직매장 건립 1개소

□ 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
공주푸드 인증제 도입	━	━
공주 로컬푸드 통합교육	━	━
참여자 조직화 및 물류 시스템 구축	━	━
대도시(대전, 세종) 매장 진출
로컬푸드 직매장 부지확정 및 행정절차
설계, 국비확보 및 착공

□ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
총 계	2,820	10	30	80	360	2,340
공주푸드 인증제 도입	20	-	20
공주 로컬푸드 통합교육	50	10	10	10	10	10
참여자 조직화 및 물류시스템 구축	60	-		20	20	20
대도시 매장 진출	90	-		30	30	30
공주시 직영 로컬푸드 직매장 건립	2,600	-	-	20	300	2,280

Ⅲ	확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%	26/26		11	26			37
공주푸드 규칙 제정	식	목표	1	1				100
		실적	0		1
공주푸드 응용 디자인 개발	식	목표	1		1			100
		실적	0		1
로컬푸드 통합교육	회	목표	20	2	6	6	6	30
		실적	4	2	4
농가 조직화	개소	목표	1			1
		실적	0
물류시스템 구축	권역	목표	1				1
		실적	0
대도시 매장 진출	개소	목표	1			1		100
		실적	0		1
직영 직매장 건립	식	목표	1				1
		실적	0

Ⅳ	추진실적

□ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	2,820	10	10	10	10	10	30	30		80			360			2,340
국비	854	5	5	5	5	5	15	15		20			110			704
도비	774												90			684
시비	1,192	5	5	5	5	5	15	15		60			160			952
민자

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회⋅토론회	언론⋅방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
	2		1

❍ 2022. 9. 8. : 공주푸드 지원 심의위원회 및 공주푸드 인증 최종 용역보고회 개최

❍ 2022.12.20. : 2023년도 하반기 공주 로컬푸드 인증제도 시행 홍보 (언론보도)

❍ 2023. 3.14. : 2023년도 제1회 로컬푸드 자체인증 통합교육 시행 홍보(언론보도)

□ 추진실적

❶ 공주푸드 인증제 도입(디자인, 제도)

❍ 2022. 9. 8. : 인증제 도입을 위한 심의위원회 개최 및 제도개발 최종 용역보고회 개최

❍ 2023.  1월 : 공주푸드 인증제 도입 디자인 개발 용역 발주

❍ 2023. 5. 9. : 공주푸드 인증제 도입 브랜드 BI 디자인 개발 완료

❍ 2023. 5.22. : 「공주푸드 이용 촉진 및 공공급식 지원에 관한 조례」에 공주푸드 인증제 도입 절차 시행규칙에 의거 시행되도록 조례 일부 개정안 공포

❍ 2023. 5.25. : 공주시 로컬푸드 인증제도 운영 방침결정(시행)

❍ 2023. 7. 1. : 공주시 로컬푸드 자체인증 디자인 개발 완료 및 제도 시행

❷ 공주 로컬푸드 통합교육

❍ 2022. 5. 17. ~ 12. 8. : 공주 로컬푸드 통합교육(총 312명-신규 :179명, 보수: 133명)

❍ 2022. 3. 14.         : 공주 로컬푸드 인증 사전 교육(145명 교육 수료)

❍ 2022. 5. 09.         : 공주 로컬푸드 인증 사전 교육(49명 교육 수료)

❍ 2022. 7. 11.         : 공주 로컬푸드 인증 통합 교육(35명 교육 수료)

❍ 2023. 9. 12.         : 공주 로컬푸드 인증 통합 교육(45명 교육 수료)

❸ 대도시 매장 진출

❍ 2023. 11. 10.         : 대전 롯데백화점 공주시 로컬푸드 직매장 개장

□ 추진 사진

공주시 로컬푸드 제민천점	대전롯데백화점 공주시 매장

Ⅴ	향후 추진계획

❶ 공주 로컬푸드 통합교육

❍ 2023. 11. 14. : ‘23 로컬푸드 통합교육 최종회차 운영

❷ 농가조직화 및 물류시스템 구축

❍ 2023. 11. 15 : 공주시 로컬푸드통합지원센터 운영조직안 보고회 추진