43		청소년 진로교육센터 조성	이행단계
			추진중

신규여부	신규■ 계속□	예산구분	예산■ 비예산□
사업시기	단기□ 중기■ 장기□	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정□ 제도□ 없음■		4,200		2,100	2,100
연계여부	국정과제□ 도정과제□ 비해당■	완료시기	임기 내■ 임기 후□
이행단계	추진중■ 완료□ 완료(계속)□	이행률	30%

주관부서	부 서 명	과 장	청소년팀장	담당자
	평생교육과	조선기(☎8370)	문창희(☎2176)	문창희(☎2176)
협력부서	부 서 명	과 장	교육정책팀장	담당자
	평생교육과	조선기(☎8370)	박우선(☎8371)	이소민(☎8472)

Ⅰ	공약개요

□ 목적

❍ 청소년들의 진로 진학 관련 체험공간 마련을 위한 별도 직업센터 조성

□ 현황

❍ 공주시 복합커뮤니티센터* 건립사업의 세부시설로 진로교육센터 포함됨

<공주시 복합커뮤니티센터 개요>

- 위  치 : 공주시 신관동 571-2

- 사업량 : 연면적 7,722㎡(지하1층, 지상5층)

사업예산 : 226억원(국22, 도88, 시116)

세부시설 : 생활문화센터, 국민체육센터, 작은도서관, 진로교육센터, 평생학습관, 청소년 수련관

□ 목표

❍ 청소년 진로교육센터 건립

□ 기대효과

❍ 청소년들에게 향후 진로 결정에 도움을 줄 수 있는 다양한 진로체험 및 교육 프로그램 제공을 통해 진로, 직업에 대한 가치관 정립에 기여

Ⅱ	사업 계획

□ 공약사업 개요

❶ 청소년진로교육센터 조성

❍ 사업위치 : 공주시 신관동 571-2

❍ 사업기간 : 2020 ~ 2024

❍ 사 업 비 : 4,200백만원

❍ 사업내용 : 청소년 진로교육센터 건립 1식

□ 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
실시설계	━
착공 및 공사	━	━	━	━

□ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
총 계	4,200	100	2,100	2,000	0	0
진로교육센터 건립 사업	4,200	100	2,100	2,000	0	0

Ⅲ	확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%				5			20
진로교육센터 건립	식	목표	1			1		20
		실적

Ⅳ	추진실적

□ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	4,200	100	100	100	100	100	2,100	2,100	2,100	2,000
국비
도비	2,100	50	50	50	50	50	1,050	1,050	1,050	1,000
시비	2,100	50	50	50	50	50	1,050	1,050	1,050	1,000
민자

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회⋅토론회	언론⋅방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)

□ 추진실적

❶ 진로교육센터 건립 사업

❍ 2022. 09. : 기존 건물 철거 및 토목공사 착수

❍ 2022. 10. : 기존 건물 철거 완료

❍ 2023. 01. : 실시설계 완료

❍ 2023. 09. : 건축 공사 착공(공정률 16%)

Ⅴ	향후 추진계획

❶ 진로교육센터 건립 사업

❍ 2024. 5. ~ 10 : 민간위탁 및 보조사업자 공모 등 세부 운영 방법 검토

❍ 2024. 10. : 준공

□ 관련자료

위 치 도

조 감 도