48		국내 최초 여성독립운동기념관 건립	이행단계
			추진중

신규여부	신규■ 계속□	예산구분	예산■ 비예산□
사업시기	단기□ 중기□ 장기■	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비
정부지원	재정■ 제도□ 없음□		23,400	23,400	0	0
연계여부	국정과제□ 도정과제□ 비해당■	완료시기	임기 내■ 임기 후□
이행단계	추진중■ 완료□ 완료(계속)□	이행률	25%

주관부서	부 서 명	과 장	복지정책팀장	담당자
	복지정책과	장병덕(☎8140)	배종로(☎8139)	정용재(☎8123)

Ⅰ	공약개요

□ 목적

❍ 한국여성독립운동가의 독립운동 역사를 확인할 수 있는 공간 조성과 함께 주변지역을      근대 문화관광 테마 공간으로 조성

□ 현황

❍ 3·1운동 100주년 이후 여성독립운동가 관심은 고조되었으나, 국민적 관심을 해소할      기념관 부족

❍ 국내 최초 한국여성독립운동기념관 건립의 상징성 타이틀로 주변지역을 묶는 테마      관광으로의 공간 조성 필요

□ 목표

❍ 여성독립운동기념관 건립

(타당성 연구용역 완료 1건, 부지확보, 건축 설계 완료 1식, 추진위원단 15명 이내)

□ 기대효과

❍ 여성독립운동에 대한 국민적 관심 제고와 주변지역을 근대문화 테마관광지로 조성하여      관광객 방문 증가 기대

Ⅱ	사업 계획

□ 공약사업 개요

❶ 공주여성독립운동기념관 건립

❍ 사업위치 : 공주영명학교 부지 협의(공주시 중학동 산1번지)

❍ 사업기간 : 2022. 10 ~ 2026. 12. 31.

❍ 사 업 비 : 약234억(국비 100%)

❍ 사업내용 : 공주여성독립운동기념관 건립

□ 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
타당성 및 독립운동가 발굴 용역 조사	━	━
부지선정	━	━	━	━
국비확보 및 추진위 구성	━	━
건축 실시 설계
기념관 착공

□ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
총 계	23,548	44	104	1,700	21,700	0
타당성 및 독립운동가 발굴 용역 조사	44	44	0	0	0	0
도시관리계획 변경 용역	104	0	104	0	0	0
건축 실시 설계	1,700	0	0	1,700	0
기념관 착공	21,700	0	0	0	21,700	0

Ⅲ	확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%
타당성 용역 조사	건	목표	1		1			100
		실적	1		1
부지선정	건	목표			1			협의중
		실적			1
추진위원회 구성	건	목표				1		추진중
		실적				1
건축 실시 설계	건	목표					1
		실적					1

Ⅳ	추진실적

□ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	23,548	44			44			104	104	23,400
국비	23,400									23,400
도비	0									0
시비	148	44			44			104	104	0

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회⋅토론회	언론⋅방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
3	2

□ 추진실적

❶ 타당성 및 여성독립운동가 발굴 연구용역 예산 확보

❍ 2022. 09. : 한국여성독립운동기념관 건립 타당성 연구용역 발주 / 23.1.16. 용역보고

❍ 2022. 11. : 여성독립운동가 발굴 연구용역 발주 (공주·충청지역) / 23.3.31. 완료

- 용역 발굴결과 57명(공주 53명, 충청 4명) 국가보훈처 서훈 신청 완료(23. 6.)

❍ 2023. 02. : 국가보훈처, 충남도청, 정진석 의원 방문 사업설명 및 협조 요청

❍ 2023. 04. : 한국여성독립운동기념관 건립을 위한 국회토론회 개최(4. 14.)

- 국가보훈처, 충남도청 후원명칭 사용승인 요청 및 토론회 개최 알림

❍ 2023. 04. : 건립부지 도시관리계획 결정 변경 용역비 확보 : 1억 4백만원(1회추경)

❍ 2023. 04. : 영명재단 부지 기부채납 협의(도교육청 승인 절차 진행중)

❍ 2023. 08. : 언론홍보(8.14KBS보도)

❍ 2023. 09. : 한국여성독립운동기념관 사업계획 수립(안) 제출(9.19. / 국가보훈부)

❍ 2023. 11. : 한국여성독립운동기념관 도시관리계획 결정(변경)용역 시행계획 수립

❍ 2023. 11. : 한국여성독립운동기념관 부지확보를 위한 업무협약 추진계획 수립

Ⅴ	향후 추진계획

❶ 부지 기부채납 체결

❍ 2023. 11. : 영명학교 재단 소유 건립예정 부지 확보를 위한 업무 협약

❍ 2023. 11. : 도시관리계획 결정 변경 용역 및 영향성 검토 용역 추진

❍ 2023. 11.~2024.1. : 기념관 건립 기본계획 연구용역 시행

(당위성·시행 구체화, 운영방식, 규모, 추진로드맵 제시 등)

❷ 추진위원단 구성

❍ 2023. 12. : 보훈관련 전문가, 독립유공자 후손 등 추진위원단 구성

❸ 한국여성독립운동가 발굴 연구용역 지속 추진

❍ 2024. ~ 2025. : 여성독립운동가 발굴 연구용역(공주·충청지역 외 전국지역)

❹ 국가보훈부 국비 확보 및 사업시행 건의

❍ 2024. 01. : 기념관 건립 기본계획 용역 완료

❍ 2024. 01.∼ 4. 국가보훈부 사업시행 및 2025년 국비 확보 건의

Ⅵ	자치법규(조례, 규칙, 훈령) 제정 및 개정 현황

《 자치법규명 》(가칭) 한국여성독립운동기념관 운영에 관한 조례 제정 계획