49		시민소통공유센터(자원봉사회관) 조성	이행단계
			추진중

신규여부	신규■ 계속□	예산구분	예산■ 비예산□
사업시기	단기□ 중기■ 장기□	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정□ 제도□ 없음■		2,632			2,632
연계여부	국정과제□ 도정과제□ 비해당■	완료시기	임기 내■ 임기 후□
이행단계	추진중■ 완료□ 완료(계속)□	이행률	70%

주관부서	부 서 명	과 장	복지정책팀장	담당자
	복지정책과	장병덕(☎8140)	배종로(☎8139)	이진규(☎8124)
협력부서	부 서 명	실 장	예산팀장	담당자
	기획감사실	오원록(☎2020)	양현목(☎2026)	김승환(☎2029)
협력부서	부 서 명	과 장	재산관리팀장	담당자
	회계과	오현규(☎8250)	우제훈(☎8267)	송유정(☎8268)

Ⅰ	개요

□ 목적

❍ 자원봉사센터 전용 공간 마련으로 센터 기능 강화 및 자원봉사자 교육·회의·활동 지원

❍ 반찬나눔, 김장봉사 등 관련 자원봉사 활동 준비를 위한 공유주방 부재로 자원봉사

활동에 필요

❍ 자원봉사센터와 시민회관을 포괄하는 시민소통 공유 공간 활용

□ 현황

❍ 소재지 : 공주시 봉황로 10(봉황동, 1층 / 구 복지사무소 건물)

❍ 면  적 : 139.76㎡(부대시설 : 사무실 1실, 회의실 1실)

❍ 자원봉사 단체 : 166개

□ 목표

❍ 시민소통 공유센터(자원봉사회관) 조성(지상 2층)

(1층 : 공유주방, 휴게실, 세탁실 등 / 2층 : 공유사무실, 프로그램실, 대회의실 등

옥상 : 창고 및 휴게공간)

□ 기대효과

❍ 분산된 자원봉사관리 통합조정으로 효율적인 시민 참여형 자원봉사 센터 운영 및

행복 공동체 실현

❍ 자원봉사자들의 자유로운 활동을 위한 공간으로 시민복지 플랫폼 역할 수행

❍ 여러 단체들이 입주 할 수 있는 공간 마련

Ⅱ	사업 계획

□ 공약사업 개요

❶ 시민소통 공유센터 건립

❍ 사업위치 : 공주시 반죽동 238-2 (KT&G 공주지사)

❍ 사업기간 : 2022. 11. ∼ 2024. 1.

❍ 사 업 비 : 약2,632백만원 : 사업비 전액 확보(시비100%)

❍ 사업내용 : 시민소통 공유센터 건립(지상 2층)

□ 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
시민소통 공유센터 용역	━	━
시민소통 공유센터 부지매입	━	━	━	━
시민소통 공유센터 건립 (신축 또는 리모델링)	━	━

□ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
총 계	2,632		2,160	450
시민소통 공유센터 용역	22
시민소통 공유센터 부지 및 건물 매입	2,160		2,160
시민소통 공유센터 건립 (리모델링)	450			450

Ⅲ	확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%							70
시민소통공유센터건립	개소	목표	1			1		70
		실적

Ⅳ	추진실적

□ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	2,632	22		22	22		2,610	2,610	2,160			450
국비
도비
시비	2,632	22		22	22		2,610	2,610	2,160			450
민자

□ 추진실적

❍ 2023. 3. : 지방재정투자심사 조건부 승인

❍ 2023. 4. : 공유재산 관리계획 및 사업비 추가경정예산 의결

❍ 2023. 5. : KT&G 공주지사 매입 계약체결

❍ 2023. 5. : 대금 지급 및 등기이전 완료

❍ 2023. 5. : 리모델링공사 실시설계용역 계약 및 착수

❍ 2023. 10. : 실시설계 완료 및 입찰공고

❍ 2023. 11. : 공사업체 발주 및 착공

Ⅴ	향후 추진계획

❶ 자원봉사회관 리모델링

❍ 2023. 11. ~ 2024. 1. : 준공 및 개관