54		공공형 어린이놀이공간 조성·운영	이행단계
			추진중

신규여부	신규■ 계속□	예산구분	예산■ 비예산□
사업시기	단기■ 중기□ 장기□	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정□ 제도□ 없음■		120			120
연계여부	국정과제□ 도정과제□ 비해당■	완료시기	임기 내■ 임기 후□
이행단계	추진중■ 완료□ 완료(계속)□	이행률	70%

주관부서	부 서 명	과 장	아동친화드림팀장
	여성가족과	이재겸(☎8240)	윤석례(☎8746)

Ⅰ	공약개요

□ 목적

❍ 신규인구가 유입되는 월송동 주변 지역에 공공형 실내 어린이 놀이공간 조성 및 운영

□ 현황

❍ 실내 어린이놀이공간 조성을 위한 강북생활문화센터 2층으로 장소 확정(2023.4.24.)

❍ 월송동 행정복지센터 2층 내 『행복북카페』 공간 활용

- 현재 강북문화생활센터 내 행복북카페(2020.12. 준공 / 167㎡)로 활용 중

- 근거리(150m)에 ‘기적의 도서관’이 있어 북카페 이용률 저조

□ 목표

❍ 월송동 공공형 실내 어린이놀이공간 조성(1개소)

□ 기대효과

❍ 월송동 지역에 대단위 아파트가 조성되며 인구가 지속 유입됨에 따라 실내놀이터 조성       등을 통한 아동 놀권리 보장

❍ 미세먼지 등 환경적 요인으로 인해 외부활동 제한 시 실내에서 안전하게 놀 수 있는 장소      제공 가능

Ⅱ	사업 계획

□ 공약사업 개요

❶ 어린이 놀이공간 조성

❍ 사업위치 : 월송동현로 51, 강북생활문화센터 2층(행복북카페 장소)

❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

❍ 사 업 비 : 120백만원(시비 100%)

❍ 사업내용 : 실내 어린이놀이공간 조성 1식

- 실내놀이터 리모델링(바닥재, 유아용 화장실 등)

- 놀이시설 물품 제작

□ 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
실내어린이공간 조성	━	━

□ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
총 계	120		120
월송동 실내어린이공간 조성	120		120

Ⅲ	확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%							70
월송동 실내어린이공간 조성	1개소	목표	1		1			70
		실적

Ⅳ	추진실적

□ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	120						120	120
국비
도비
시비	120						120	120
민자

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회⋅토론회	언론⋅방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)

□ 추진실적

❶ 세부사업명

❍ 2022. 9. : 행복북카페 이용률 조사(9~10월)

❍ 2023. 4. 24. : 장소선정을 위한 강북생활문화센터 운영위원회 심의‧의결

❍ 2023. 4. 25. : 공공형 어린이놀이공간 조성·운영계획 수립

❍ 2023. 5. 8. : 공공형 어린이놀이공간 조성사업 공사감독 공무원 지정

❍ 2023. 7. 10. : 실시설계 착수

❍ 2023. 9. 7. : 실시설계 완료

❍ 2023. 10. 17. : 공사 착공

Ⅴ	향후 추진계획

❶ 월송동 실내어린이놀이공간 조성

❍ 2023.  11. ~ 12. : 실내놀이공간 1개소 준공

❍ 2023. 12. : 어린이놀이공간 설치신고

Ⅵ	자치법규(조례, 규칙, 훈령) 제정 및 개정 현황

《 자치법규명 》공주시 어린이놀이터(어린이놀이시설) 등 조성 및 관리에 관한 조례 제1조(2018.12.07.)

❍ 주요내용 : 어린이의 꿈과 상상력을 키울수 있는 놀이터 조성을 위한 근거 마련