60		유구읍 직물폐공장을 활용한 문화예술공간 조성	이행단계
			추진중

신규여부	신규■ 계속□	예산구분	예산■ 비예산□
사업시기	단기□ 중기■ 장기□	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정□ 제도□ 없음■		10,000	4,000		6,000
연계여부	국정과제□ 도정과제□ 비해당■	완료시기	임기 내■ 임기 후□
이행단계	추진중■ 완료□ 완료(계속)□	이행률	17%

주관부서	부 서 명	과 장	문화시설팀장	담당자
	문화체육과	김재철(☎8230)	강문규(☎2586)	성연정(☎2057)

Ⅰ	공약개요

□ 목적

❍ 폐산업시설의 복합문화예술 공간 재생을 통한 새로운 관광자원 조성 및 문화향유 증진

□ 현황

❍ 추진배경

- 유구읍 일원 직물 폐공장 약 28개소(2022. 12. 기준)

- 유구읍에 연간 6만여 명이 방문하고 있으나 수국 축제 기간에 집중되어 지속적으로

관광객 유입할 수 있는 관광자원 개발 필요

❍ 사업대상지 : 유구읍 녹천리 26-8번지 외 3필지

❍ 예상사업비* : 100억원(토지매입비 포함)

❍ 사업내용* : 복합문화예술공간, 전시실, 창작공방, 카페 등

* 타당성 조사 및 실시설계 결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

□ 목표

❍ 유구읍 직물 폐공장을 활용한 문화예술공간 조성 1식

□ 기대효과

❍ 직물 폐공장을 새로운 관광자원으로 개발하고 유구색동수국축제 등 지역축제와 연계함으로써 지역재생 및 지역경제 활성화 도모

Ⅱ	사업 계획

□ 공약사업 개요

❶ 유구읍 직물 폐공장 활용방안 구상 및 타당성 용역

❍ 사업위치 : 유구읍 일원

❍ 추진기간 : 2022년 11월 ~ 2023년 6월

❍ 추진예산 : 50백만원

❍ 내    용 : 사업대상지 선정, 사업규모 및 적정사업비 산출, 기본계획(안) 수립 등

❷ 사업대상지 매입 협의 등

❍ 추진기간 : 2023년 6월 ~ 2024년 2월

❍ 추진예산 : 2,046백만원

❍ 추진내용 : 사업대상지 매입 추진, 공유재산 심의 및 건축물 정밀안전진단 등

❸ 기본 및 실시설계용역 등

❍ 추진기간 : 2024년 2월 ~ 2024년 12월

❍ 추진예산 : 1,060백만원

❍ 추진내용 : 공공건축 기획용역, 기본 및 실시설계용역, 각종 건축 인허가 이행

❹ 문화예술공간 조성 공사 추진

❍ 추진기간 : 2025년 1월 ~ 2026년 6월

❍ 추진예산 : 6,844백만원

❍ 추진내용 : 문화예술공간조성 공사 착공 및 준공

□ 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
활용방안 구상 및 타당성 용역, 기본계획 수립
사업대상지 매입 협의 등
기본 및 실시설계용역 등
문화예술공간 조성

□ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
총 계	10,000		96	3,060	6,844
활용방안 구상 및 타당성 용역, 기본계획 수립	50		50
사업대상지 매입 협의 등	2,046		46	2,000
기본 및 실시설계용역 등	1,060			1,060
문화예술공간 조성 공사	6,844				6,844

Ⅲ	확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%			-	60			17
활용방안 구상 및 타당성 용역, 기본계획 수립	식	목표	1		1			75
		실적
사업대상지 매입협의 등	식	목표	1		1			20
		실적
기본 및 실시설계용역	식	목표	1			1
		실적
문화예술공간 조성 공사	식	목표	1				1
		실적

Ⅳ	추진실적

□ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	10,000	96	22	50	50		46	46	25	3,060			4,844			2,000
국비	4,000												2,000			2,000
도비
시비	6,000	96	22	50	50		46	46	25	3,060			2,844
민자

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회⋅토론회	언론⋅방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
1	-	-	-

❍ 2023.  3. : 직물 폐공장 활용방안 구상 및 타당성 조사 용역 주민설명회 개최

❍ 2023. 10. : 직물 폐공장 문화예술공간조성 추진위원회 1차 회의

□ 추진실적

❍ 2022. 11. : 활용방안 구상 및 타당성 조사 연구용역 착수

❍ 2022.  5. : 활용방안 구상 및 타당성 조사 용역 중간보고회 개최, 사업대상지 선정

❍ 2023.  6. : 기본계획(안) 수립

❍ 2023.  7. : 대상지 매입을 위한 토지소유자 면담 실시

❍ 2023.  8. : 공유재산심의 이행

❍ 2023. 10. : 유구읍 직물폐공장 문화예술공간 조성 추진위원회 구성, 사업대상지 감정평가

Ⅴ	향후 추진계획

❍ 2023. 11. ~ 2024.  2. : 사업대상지 매입 추진 및 건축물 정밀안전진단

❍ 2024.  2. ~ 2024. 12. : 공공건축기획용역, 기본 및 실시설계 용역, 각종 건축 인허가 이행

❍ 2025.  1. ~ 2026.  6. : 문화예술공간조성 공사 착공 및 준공