61		시민친화형 금강신관공원 조성사업	이행단계
			추진중

신규여부	신규■ 계속□	예산구분	예산■ 비예산□
사업시기	단기□ 중기■ 장기□	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정■ 제도□ 없음□		22,020	11,000		11,020
연계여부	국정과제□ 도정과제□ 비해당■	완료시기	임기 내□ 임기 후■
이행단계	추진중■ 완료□ 완료(계속)□	이행률	11%

주관부서	부 서 명	과 장	체육시설팀 장	담당자
	문화체육과	김재철(☎8230)	윤승석(☎2537)	최선관(☎2592)
협력부서	부 서 명	과 장	하천관리팀 장	담당자
	건설과	김만수(☎8311)	윤희대(☎8604 )	이종민(☎8668)

Ⅰ	공약개요

□ 목적

❍ 금강 신관공원 일원의 하천부지를 활용하여 문화ㆍ체육시설 조성으로 시민 여가공간 마련

□ 현황

❍ 사업구간

- 금강(신관공원,쌍신공원) 일원 : L=1.7km (폭원 80~95m)

❍ 사업계획

- 체육시설 확충 [물놀이장 조성, 기존 체육시설(축구장, 야구장 등) 재배치]

- 관광 및 편의시설 확충 [수변광장(음악분수),둔덕놀이터 조성]

❍ 예상사업비 : 220.2억원 (국비 110, 시비 110.2)

* 타당성 조사 및 실시설계결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

□ 목표

❍ 광장(음악분수) 1개소, 물놀이장 1개소, 둔덕놀이터 1개소

❍ 기존 체육시설 및 주차장 정비 1식

□ 기대효과

❍ 신관공원 일원에 시민친화적 문화ㆍ체육시설 조성사업을 통한 시민 여가활동 지원과 관광객 유치로 지역경제 활성화 기대와 명품관광도시 이미지 고취

Ⅱ	사업 계획

□ 공약사업 개요

❶ 신관공원 주요 사업계획

❍ 신관수변광장 : 6,500㎡ / 음악분수(D50m) 1개소

❍ 백제물빛놀이터 : 7,000㎡

❍ 둔덕놀이터 조성 : 1,000㎡ / 사면 산책로 12,500㎡

❍ 주차장 확장/보수 : 14,000㎡

❍ 기체육시설(축구장,족구장,야구장 등) 정비 : 26,400㎡

❷ 쌍신공원 주요 사업계획

❍ 쌍신축구장 인조잔디 설치 : 105mx68m, 2개소

＊ 건설과에서 추진 중인 환경부 공모사업(금강 공주지구 지역맞춤형 통합하천사업) 으로 선정되어 타당성 조사 및 기본계획 수립 단계부터 통합 추진

□ 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
기본구상 수립	━	━
사업 타당성 조사 및 기본계획 수립	━	━	━	━
설계 및 공사 추진	━	━

□ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
총 계	22,020	20	152	7,848	8,000	6,000
기본구상 수립	20	20
사업 타당성 조사 및 기본계획 수립	152		152
설계 및 공사 추진	21,848			7,848	8,000	6,000

※ 사업별 추진일정 및 투자계획은 환경부 사업추진일정에 따라 변경 가능

Ⅲ	확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%			100				10
기본구상 수립 용역 착수	건	목표	1	1
		실적		1
사업 타당성 조사 및 기본계획 수립	건	목표	1		1
		실적
설계 및 공사 추진	공정율(%)	목표	100			35	65
		실적

Ⅳ	추진실적

□ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	22,020	20	20	20	20	20	152	152	152	7,848			8,000			6,000
국비	11,000									4,,000			4,000			3,000
도비
시비	11,020	172	20	20	20	20	152	152		3,848			4,000			3,000
민자

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회⋅토론회	언론⋅방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
-	-	-	-

❍ 2023~2024년 타당성 조사 및 설계 시 설문조사, 주민설명회 등 시민참여 방안 마련 추진

□ 추진실적

❍ 2022. 10. : 금강신관공원 조성사업 기본구상 수립 용역 착수

❍ 2022. 12. : 환경부 공모사업 전국 46개소 중 선도사업 대상지(22개소) 선정(건설과)

❍ 2023.  1. : 지역맞춤형 통합하천사업 계획에 신관공원 조성사업 기본구상안 반영

❍ 2023.  3. : 지역맞춤형 통합하천사업 기본구상(안) 관련 부서 협의(건설과)

❍ 2023.  6. : 지역맞춤형 통합하천사업 타당성조사 및 기본계획 수립용역 발주(건설과)

＊ 용역개요 : 금강~정안천(L=14.5km) / 152백만원

❍ 2023.  9. : 금강신관공원 조성사업 기본구상 수립 용역 완료

Ⅴ	향후 추진계획

❍ 2024.  4. : 지역맞춤형 통합하천사업 타당성조사 및 기본계획 수립용역 완료(건설과)

＊ 공약사업 추진부서 변경 (문화체육과→건설과)

❍ 2024.  5. : 실시설계 용역 예산 확보 및 설계 추진

❍ 2025.  4. : 기본 및 실시설계 용역 완료

❍ 2025.  6. : 지역맞춤형 통합하천사업 착공

❍ 2026. 12. : 지역맞춤형 통합하천사업 준공