63		공주의 정체성을 살리는 백제문화촌 조성	이행단계
			준비중

신규여부	신규■ 계속□	예산구분	예산■ 비예산□
사업시기	단기□ 중기□ 장기■	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정■ 제도□ 없음□		200,000	35,000	10,500	24,500	130,000
연계여부	국정과제■ 도정과제■ 비해당□	완료시기	임기 내□ 임기 후■
이행단계	추진중■ 완료□ 완료(계속)□	이행률	10%

주관부서	부 서 명	과 장	백제문화촌팀장	담당자
	관광과	소찬섭(☎8070)	김병각(☎8096)	이상민(☎2622)

Ⅰ	공약개요

□ 목적

❍ 백제문화 콘텐츠를 주제로 하는 관광특구 백제문화촌을 조성하여 공주만의 정체성을       드러내는 관광산업 전개

❍ 공주‧부여‧청양을 세종시 문화적 배후도시로 조성 및 역사문화 관광거점으로 육성

(대통령‧충청남도지사 공약사항과 연계하여 진행)

□ 현황

❍ ‘백제문화권 관광거점 조성 기본구상 연구용역’에 대한 방향 설정 및 논의 중(道,

충남연구원, 공주시, 부여군, 청양군), 공주시 별도 기본구상 준공(‘23. 8.)

❍ ’백제문화 복합단지 등 조성 기본구상 수립 중간보고회(1차, 23. 9.)

❍ ’제2단계 제2기 균형발전사업 도제안사업 개발계획수립용역 착수(23. 9.)

❍ ‘백제문화 복합단지 등 조성 기본구상 수립 중간보고회(2차, 23. 11.)

□ 목표

❍ 백제문화촌 조성 1식

※ 기본구상 연구용역 완료 후 사업계획 수립 단계에서 구체적 목표 설정 가능

□ 기대효과

❍ 공주시만의 매력적이고 특색있는 관광명소 조성으로 관광 및 지역경제 활성화

Ⅱ	사업 계획

□ 공약사업 개요

❍ 사업위치 : 공산성 ~ 공주 무령왕릉과 왕릉원 ~ 공주 문화관광지 일원

❍ 사업기간 : 2023년 ~ 2030년

❍ 사 업 비 : 2,000억원 *민자 포함 추정사업비

백제문화촌 선도사업(백제마을村) 총사업비 400억(도비200, 시비200)

❍ 사업내용 : 백제문화 체험마을, 백제문화스타케이션, 한옥콘도, 음식체험지구육성 등   □ 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
연구용역 시행	━	━
사업확정, 조성사업 추진	━	━	━	━

□ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
총 계
백제문화촌 선도사업(백제마을)	40,000			3,000	18,500	18,500

※ 현재 기본구상 연구용역에 대한 방향 설정 논의 중(道 , 충남연구원, 공주, 부여, 청양)

선도사업으로 선정한 백제마을을 충청남도 지역균형발전사업 도제안 사업으로 접수예정

※ 충청남도 용역 중간보고(9,11월), 완료보고(12월)

Ⅲ	확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%							5
기본구상 연구용역 완료	건	목표	1					1
		실적			1
조성사업 추진	%	목표	30			10	20
		실적

Ⅳ	추진실적

□ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	40,000									3,000			18,500			18,500
국비
도비	20,000									1,500			9,250			9,250
시비	20,000									1,500			9,250			9,250
민자

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회⋅토론회	언론⋅방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
	2	충남연구원 설문 1	도의회,시의회 발언 시의회 결의안 채택

□ 추진실적

❍ 2022. 7. 14. : 백제문화권 관광거점 조성 관계자 회의(충남연구원)

❍ 2022. 8. 24. : 백제문화 복합단지 및 백제문화 체험마을 조성사업 기본 구상 회의(충남연구원)

❍ 2022. 10. : 백제문화권 관광거점 조성 기본구상 용역 착수(공주시)

❍ 2022. 11. : 현장조사 및 사업방향 구상

❍ 2022. 11. : 백제문화권 관광거점 조성 기본구상 착수보고(공주시)

❍ 2022. 12. : 백제문화권 관광거점 조성 타당성 조사 및 기본계획 착수보고(충남연구원)

❍ 2022. 12. : 백제문화권 관광거점 시군별 사업제안 제출

❍ 2023. 1. : 백제문화권 관광거점 조성 기본구상 용역 진행

❍ 2023. 2. : ‘24년 우선 추진 핵심사업 발굴 및 전문가 자문(충청남도)

❍ 2023. 3. : ‘24년 우선 추진 핵심사업에 대한 국비 지원 건의(충청남도→문체부)

❍ 2023. 5. : 백제문화권 관광거점 조성 타당성 조사 및 기본계획 용역중지(충청남도)→12월 준공예정

❍ 2023. 5. : 도지사 정책현장 방문 주요사항에 대한 회의

❍ 2023. 7. : 한옥경관 형성과 사업예산 확보방안 대안 회의

❍ 2023. 9. : 백제문화권 관광거점 조성 타당성 조사 및 기본계획 중간보고회(1차)

❍ 2023. 9. : 충청남도 균형발전사업 2단계 2기 사업으로의 추진 검토

❍ 2023. 9. : 제2단계 제2기 지역균형발전사업 도제안사업 개발계획 수립용역 착수

❍ 2023. 11. : 백제문화권 관광거점 조성 타당성 조사 및 기본계획 중간보고회(2차)

❍ 2023. 12. : 충청남도 용역 결과에 따른 사업계획 확정 예정

※ 5월 충남도→문체부 방문(의견 - 지방이양사업으로 추진, 국비 예산확보 어려움)

- 1차 공주,부여,청양 백제문화권관광거점조성사업 설계비 25억 예산 반영 건의

- 2차 부여,청양을 제외한 “공주 백제문화촌 조성사업” 설계비 15억 예산 반영 건의

Ⅴ	향후 추진계획

❍ 2024. 2~3. : 제2단계 제2기 지역균형발전사업 도제안사업 개발계획 수립용역 준공

❍ 2024. 2~3. : 제2단계 제2기 지역균형발전사업 도제안사업 접수 예정

❍ 2030. 12. : 백제문화촌 조성사업 추진 및 완료 예정