64		폐금광을 활용한 관광자원 개발	이행단계
			추진중

신규여부	신규■ 계속□	예산구분	예산■ 비예산□
사업시기	단기□ 중기■ 장기□	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정■ 제도□ 없음□		5,000		2,500	2,500
연계여부	국정과제□ 도정과제■ 비해당□	완료시기	임기 내□ 임기 후■
이행단계	추진중□ 완료□ 완료(계속)□	이행률	10%

주관부서	부 서 명	과 장	관광개발 팀 장	담당자
	관광과	소찬섭(☎8070)	신동석(☎8083)	조성희(☎8088)

Ⅰ	공약개요

□ 목적

❍ 공주시 탄천면 남산광산 등 폐금광 6개소가 위치함에 따라, 우선순위 선정하여   관광개발을 통해 지역 발전에 이바지하고자 함

❍ 폐금광을 관광자원으로 개발하여 탄천의 제2의 도약을 위함 발판으로 삼고자 함

□ 현황

❍ 총 6개의 광산은 탄천면 일대에 퍼져있으며, 주로 남산리에 밀집
주변으로 부여 유적지, 계룡저수지, 계룡산, 갑사와 인접해있는 입지

❍ 지역경제 및 수요를 위한 관광상품의 부재로 지역 관광활성화가 어려운 상황

□ 목표

❍ 폐금광 6개소(공주, 남산, 봉화, 석일, 승치, 이인) 중 1개소를 선정하여 정비 및

관광자원 개발
❍ 폐금광 지하관광코스 3개소, 폐광 체험프로그램 운영

□ 기대효과

❍ 폐금광 관광시설 조성에 따른 공주시의 부족한 체험공간 및 힐링공간 구축으로
새로운 관광거점 역할수행과 이에 따른 지역 경제활성화

Ⅱ	사업 계획

□ 공약사업 개요 : 1개 분야 3개 사업 (사업비: 50억)

❶ 폐금광 마인갤러리 조성

❍ 사업위치 : 공주시 탄천면 일원

❍ 사업기간 : 2023 ~ 2026

❍ 사업내용 : 미디어아트 관람 갤러리 1개소
지하갱도 상영관, 공연장 운영, VR 및 타임캡슐관 운영

❷ 탄천면 지역 특산품 개발 및 활용

❍ 사업위치 : 공주시 탄천면 일원

❍ 사업기간 : 2023 ~ 2026

❍ 사업내용 : 알밤와인보관 와인동굴 운영, 알밤와인 제작 및 시음체험 프로그램 운영

❸ 진입부 금광마을 체험 프로그램 운영

❍ 사업위치 : 공주시 탄천면 일원

❍ 사업기간 : 2023 ~ 2026

❍ 사업내용 : 금광마을 체험 프로그램 운영

□ 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
타당성검토 및 기본구상 용역
설명회, 공모
실시설계
공사착수

□ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
총 계	5,000	-	100	400	1,500	3,000
폐금광을 활용한 관광자원개발	5,000	-	100	400	1,500	3,000

Ⅲ	확인지표 및 이행률

확인지표	단위	목표/실적		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%							10
타당성 및 기본구상용역	-	목표	1		1			60
		실적
주민 설명회 및 공모	-	목표	1			1
		실적
기본설계 및 실시설계	-	목표	1			1
		실적
폐금광 마인갤러리 조성	개소	목표	1				1
		실적
탄천면 지역 특산품 개발 및 활용	개소	목표	1				1
		실적
진입부 금광마을 체험 프로그램 운영	개소	목표	1				1
		실적

Ⅳ	추진실적

□ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	5,000						100			400			1,500			3,000
국비
도비	2,500						50			200			750			1,500
시비	2,500						50			200			750			1,500
민자

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회⋅토론회	언론⋅방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
2

□ 추진실적

❍ 2021. 08. 27. : 페금광 관광자원화 방안을 위한 마을발전토론회

❍ 2023. 05. 02. : 페금광 관광자원화 방안을 위한 주민설명회

❍ 2023. 06.     : 주민참여예산 신청(지역주민)

□ 관련자료

위 치 도
갱도활용 미디어아트 (태백 통리탄탄파크)	와인보관창고 (광양와인동굴)
VR체험관 (광명동굴)

Ⅴ	문제점 및 해결방안

□ 문제점

❍ 탄천면 폐금광 관광자원화 사업 타당성 및 기본구상 용역 결과

구 분	합계 (100)	경제성 (20)	개발용이성 (30)	접근성 (25)	공공성 (10)	환경성 (15)	비고
점안골광산	37	6	11	11	5	4
사장골광산	33	2	11	11	5	4
안경골광산	33	2	11	11	5	4
밭골광산	46	6	11	11	5	13

- 경제성, 개발용이성, 접근성, 공공성, 환경성 5개의 범주, 11개 지표 값으로 평가하여 60점 이상을 개발대상지로 선정하는 것이 합리적

- 평가결과 4개의 대상지 모두 60점 미만으로 개발에 적당하지 않은 것으로 평가점수가 저조

□ 해결방안

주민편의시설 및 기반시설 추진	→	탄광시설 콘텐츠로 한 먹거리 및 체험 연계	→	관광자원화 개발
(1단계)		(2단계)		(3단계)
주민자발적 참여가 가장 중요(평가점수 향상 방법) 주민참여예산 활용 도로포장 등 기반시설 조성 필요		마을기업이나 주민협동조합 등 주민이 주체 되는 관광시스템 점진적 도입		관광인프라가 개선된 결과 토대로 본격적인 사업 추진 (관광자원개발 공모 추진)

※ 탄천면만의 특성을 살린 지속가능한 관광컨텐츠 도입하기 위해 사전 주민참여 사업 활성화 및 관광인프라 개선 필요

□ 검토의견

❍ 탄천면 단계별 기반시설 확보 후 관광자원개발 공모 사업 추진 재검토

→ 2023. 05. 02.(화) 주민설명회 협의 완료

□ 향후 추진계획

❍ 지역주민이 참여 예산 등을 활용하여 소규모 기반시설 마련

❍ 용역결과를 토대로 평가를 높일 수 있는 방안을 마련하여 점수 향상 노력

❍ 관광산업 기본 인프라가 개선되면 공모사업 추진