65		홍길동 테마길 등 힐링공간 조성	이행단계
			추진중

신규여부	신규■ 계속□	예산구분	예산■ 비예산□
사업시기	단기□ 중기■ 장기□	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정■ 제도□ 없음□		5,000		2,500	2,500
연계여부	국정과제□ 도정과제■ 비해당□	완료시기	임기 내□ 임기 후■
이행단계	추진중■ 완료□ 완료(계속)□	이행률	10%

주관부서	부 서 명	과 장	관광개발팀장	담당자
	관광과	소찬섭(☎8070)	신동석(☎8083)	조성희(☎8088)

Ⅰ	공약개요

□ 목적

❍ 한천저수지 주변 지역은 관광자원개발에 대한 의견이 많은 곳으로 해당권역의 관광활성화를 위해 주민의견 등을 반영하여 지역경제 활성화를 도모하고자 함

❍ 공주의 자연자원인 무성산내 역사문화자원을 활용한 관광개발 계획을 통하여 한천저수지와 무성산권역을 연계한 하나의 관광개발 루트로 수립하고자 함

□ 현황

❍ 한천저수지는 과거 낚시터로 이용되었으며, 주변으로 주거지 및 산림, 농경지가
분포하고 있음

❍ 무성산은 홍길동설화가 전해지는 공주시의 대표 등산로로 꾸준한 이용객들이 방문하고 있지만 관광시설의 부재로 지역관광 활성화에 어려움을 겪고 있음

□ 목표

❍ 홍길동 자연체험마을 조성 1식

□ 기대효과

❍ 무성산과 연접한 한천리마을에 홍길동 자연체험마을을 조성하여 지역관광 및 경제활성화 기대

❍ 공주에 산재된 자연 및 문화자원의 연계를 통해 시너지 효과 창출

Ⅱ	사업 계획

□ 공약사업 개요 : 1개분야 1개사업

❶ 홍길동 테마길 등 힐링공간 조성

❍ 사업위치 : 공주시 우성면 한천리 산67 일원

❍ 사업기간 : 2024 ~ 2025

❍ 사 업 비 : 5,000백만원 (도 2,500, 시 2,500)

❍ 사업내용

- 무성산의 자연을 담은 광장 및 쉼터 조성

: 포켓쉼터 조성, 중앙광장, 기념품샵, 생태주차장

- 홍길동 휴(休) 공간 조성

: 길동 전망대, 휴게쉼터, 잔디마당, 야생초화원

- 홍길동 체험 및 테마길 조성

: 길동 용사체험시설, 숲속힐링숲(피톤치드), 숲속야영장

- 생태체험 및 마을축제 운영

: 숲속 야외공연장, 바람언덕, 생태놀이터, 홍길동 지역 마을축제

□ 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
한천저수지 관광자원개발 타당성 및 기본구상용역
사업공모
실시설계
착공 및 준공

□ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
총 계	5,000			400	4,600
홍길동 테마길 등 힐링공간 조성	5,000			400	4,600

Ⅲ	확인지표 및 이행률

확인지표	단위	목표/실적		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%							37.5
타당성 및 기본구상용역	-	목표	1		1			50
		실적
사업 공모 신청	-	목표	1		1			100
		실적	1		1
기본설계 및 실시설계	-	목표	1			1
		실적
홍길동 테마길 등 힐링공간 조성	개소	목표	1				1
		실적

Ⅳ	추진실적

□ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	5000						100			400			4,600
국비
도비	2500						50			200			2,300
시비	2500						50			200			2,300
민자

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회⋅토론회	언론⋅방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
2

□ 추진현황

❍ 2022. 8. 10. : 한천저수지 관광자원개발 타당성 및 기본구상 용역 주민설명회

❍ 2023. 4. 27. : 충남도지사 공주시 방문 시민과의 대화

❍ 2023. 5. 22. : 전문가 자문 의뢰(충남연구원) 및 관광수급 분석 완료

❍ 2023. 5. 25. : 우성면 한천리 지역주민 사업선정 건의 요구 제출

❍ 2023. 5. 31. : 충청남도 관광자원개발 공모 신청

❍ 2023. 7. 14. : 충청남도 관광자원개발 공모 취하

Ⅴ	문제점 및 해결방안

□ 문제점

❍ 관광자원 개발 사업 보조금 관리지침 제4조(보조사업 예산계상 검토 및 현장실사 등) 제1항1호라목 및 관광자원 개발사업 가이드라인에 의거 사업신청 전 사업부지의 확보(매수)가 필요

⇒ 부지 미확보 사업은 선정대상에서 제외 / 3필지 9,521㎡ 매수 불가

❍ 사업대상지 토지 현황

토 지 소 재 지		지 적 (㎡)	사 용 면 적 (㎡)	지 목	비 고
읍·면·리	번지
우성면 한천리	산21-1	2,678	2,678	임야	매수 불가
〃	산21-3	893	893	임야	“
〃	산22-1	5,950	5,950	임야	“

※ 공모사업 선정 후 사업내용 및 사업대상지 변경이 불가함

□ 해결방안

❍ 향후 한국농어촌공사와 협의를 통해 농업보호구역 해제 및 토지매수 검토

❍ 관광자원 개발사업 가이드라인을 준수하여 사업발굴 및 부지확보 등 재검토 필요

□ 향후 추진계획

❍ 금번 ’24년 충청남도 관광자원개발사업 공모 1차 선정 취하하였나, 사업발굴 및 부지확보 노력으로 사업 공모 재추진

※ 참고자료