66		유구천변 색동수국정원 활성화	이행단계
			추진중

신규여부	신규□ 계속■	예산구분	예산■ 비예산□
사업시기	단기□ 중기□ 장기■	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정■ 제도□ 없음□		2,521		985.5	1,535.5
연계여부	국정과제□ 도정과제□ 비해당■	완료시기	임기 내■ 임기 후□
이행단계	추진중■ 완료□ 완료(계속)□	이행률	57%

주관부서	부 서 명	과 장	관광정책팀장	담당자
	관광과	소찬섭(☎8070)	배경식(☎8066)	조정미(☎8086)
			축제팀장	담당자
			이경진(☎8110)	차태진(☎8111)
협력부서	부 서 명	읍 장	산업개발팀장	담당자
	유구읍	박종석(☎2701)	백용해(☎2721)	김성중(☎2722)

Ⅰ	공약개요

□ 목적

❍ 유구 색동수국정원을 중심으로 한 유구읍의 차별화된 관광 프로그램 마련

□ 현황

❍ 유구 색동수국정원 조성사업 : H/W사업 일부 준공 및 토지매입 완료

❍ 유구읍 관광종합개발계획 수립 : 용역 완료

❍ 유구색동수국정원 꽃축제 : 2023. 6. 23. ~ 6. 25. / 13만명 관람객 유치

□ 목표

❍ 유구 색동수국정원 조성사업 1식(경관 개선, 시설물 설치, 공동체 가꾸기 등) / 유구읍      관광종합개발계획 수립 1식 / 유구색동수국정원 꽃 축제 매년 개최

□ 기대효과

❍ 관광객 유치 확대 및 지역경제 활성화

Ⅱ	사업 계획

□ 공약사업 개요

❶ 유구 색동수국정원 조성사업

❍ 사업위치 : 유구읍 소재지 일원

❍ 사업기간 : 2022년 ~ 2024년

❍ 사 업 비 : 1,971백만원(도비 985.5, 시비 985.5)

❍ 사업내용 : 색동수국정원 진입경관 개선, 색동둘레길 조성 등 경관개선 / 주차장, 색동                   문화체험공간 등 시설물 조성 / 수국상품 개발 및 제작, 체험 프로그램 개발                   및 운영 등 역량 강화

❷ 유구읍 관광종합개발계획 수립

❍ 사업위치 : 유구읍

❍ 사업기간 : 2022. 6. ~ 2023. 1.

❍ 사 업 비 : 40백만원(시비)

❍ 사업내용 : 유구읍의 관광산업·환경·여건 등을 분석하여 미래형 관광 개발 전략 수립,                   유구천 재해위험지구 지정으로 인한 유구 색동수국정원 이전 적정 대상지                   선정 및 이전 효과성 분석

❸ 유구색동수국정원 꽃 축제

❍ 사업위치 : 유구색동수국정원

❍ 사업기간 : 매년 6월(개화시기)

❍ 사 업 비 : 240백만원(시비)

❍ 사업내용 : 공식행사, 체험, 포토존 설치 및 경관조성, 농특산물판매, 공연 등

□ 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
유구 색동수국정원 용역
유구 색동수국정원 조성사업
유구읍 관광종합개발계획 수립	━	━
유구색동수국정원 꽃 축제

□ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
총 계	2,521	1,174	1,082	265
유구 색동수국정원 조성사업	1,971	864	842	265
유구읍 관광종합개발계획 수립	40	40
유구색동수국정원 꽃 축제	510	270	240	270

Ⅲ	확인지표 및 이행률

확인지표	단위	목표/실적		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%							57
유구 색동수국정원 조성	%	목표	100	10	60	90	100	51
		실적	51	8	51
유구읍 관광종합개발계획 수립	건	목표	1		1			100
		실적	1		1
유구색동수국정원 꽃 축제 방문객수	명	목표	290천명	60천명	70천명	75천명	80천명	20
		실적	190천명	60천명	130천명

Ⅳ	추진실적

□ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	2,521	2,521	1,382	1,174	1,174	1,042	1,347	1,347	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국비	-			-	-		-
도비	985.5	985.5	552	432	432	382	553.5	553.5	170
시비	1535.5	1,535.5	830	742	742	660	793.5	793.5	170
민자	-			-	-		-

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회⋅토론회	언론⋅방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)

□ 추진실적

❶ 유구 색동수국정원 조성사업

❍ 2021.  9. : 유구천 자연재해 위험지구 지정

❍ 2022.  5. : 기본설계 변경 및 균형발전사업 변경심의 완료

❍ 2022.  8. : 경관개선사업 세부설계용역 제안서평가 완료

❍ 2022.  9. : 경관개선사업 세부설계용역 착수

❍ 2022. 12. : 경관개선사업 세부설계용역 완료 및 경관개선사업 발주

❍ 2023.  3. : 경관개선사업 일부(색동둘레길 조성사업 토목공사) 완료

❍ 2023.  4. : 시설물조성사업 대상토지 매입 완료

❍ 2023.  6. : 경관개선사업 및 시설물 조성사업 일부(주차장 조성공사) 완료

역량강화사업 발주

❷ 유구읍 관광종합개발계획 수립

❍ 2022.  6. : 용역 시행

❍ 2023.  1. : 용역 완료

❸ 유구색동수국정원 꽃 축제

❍ 2023. 4. 12. ~ 5. 3. : 제2회 공주 유구색동수국정원 꽃 축제 행사대행용역 입찰공고

❍ 2023. 5. 10. : 제2회 공주 유규색동수국정원 꽃 축제 행사대행용역 제안서평가

❍ 2023. 6. 23. ~ 25. : 제2회 유구색동수국정원 꽃 축제 개최(13만명 관람객 유치)

Ⅴ	향후 추진계획

❶ 유구 색동수국정원 조성사업

❍ 2023. 12. : H/W사업완료

❍ 2024.  7. : S/W사업완료

□ 관련자료(위치도, 조감도 등 필요시 작성)