70		불교 유산의 가치 재조명과 활용	이행단계
			추 진 중

신규여부	신규■ 계속□	예산구분	예산■ 비예산□
사업시기	단기□ 중기■ 장기□	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정■ 제도□ 없음□		3,200	960	480	1,120	640
연계여부	국정과제□ 도정과제□ 비해당■	완료시기	임기 내■ 임기 후□
이행단계	추진중■ 완료□ 완료(계속)□	이행률	50%

주관부서	부 서 명	과 장	문화재보수팀장	담당자
	문화재과	조병철(☎8201)	윤태원(☎8223)	이정욱(☎8224)

Ⅰ	공약개요

□ 목적

❍ 마곡사를 불교문화를 체험하고 힐링과 마음의 쉼 공간으로 조성하는 등 공주 맞춤형 특화 불교 유산 관광상품 개발로 지역관광 경쟁력 제고

□ 현황

❍ 심리적 안정과 평안을 찾고자 하는 관광객들을 위한 명상 시설 등 필요

- 2022년 종교문화시설 건립사업 국비보조금 예산 확보

□ 목표

❍ 공주 마곡사 수련체험관 건립(교육체험관, 수행자 숙소, 식당 등)

□ 기대효과

❍ 방문객들이 명상을 통한 심리적 안정과 평안을 찾고 관광자원과 연계한 전통문화 계승발전에 활용

❍ 수련체험관 운영을 통한 전통문화 계승발전에 기여, 전통적인 건축물로 계획하여 지역 문화유산의 문화적 위상 확립

Ⅱ	사업 계획

□ 공약사업 개요

❍ 사업위치 : 공주시 사곡면 운암리 산77-3번지 일원

❍ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2024. 12.

❍ 사 업 비 : 3,200백만원(국 960, 도 480, 시 1,120, 자부담 640)

❍ 사업내용 : 마곡사 수련체험관 건립(교육체험관, 수행자 숙소, 식당 등)

□ 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
공주 마곡사 수련체험관 건립

□ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
총 계	3,200	333	2,867
공주 마곡사 수련체험관 건립	3,200	333	2,867

Ⅲ	확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%							50
공주 마곡사 수련체험관 건립 설계용역	식	목표	1	1				100
		실적	1		1
공주 마곡사 수련체험관 건립	식	목표	1			1
		실적

Ⅳ	추진실적

□ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	3,200	3,200		333	333	230	2,867	2,867
국비	960	960		100	100	69	860	860
도비	480	480		50	50	34.5	430	430
시비	1,120	1,120		116.5	116.5	80.5	1,003.5	1,003.5
민자	640	640		66.5	66.5	46	573.5	573.5

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회⋅토론회	언론⋅방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)

□ 추진실적

❍ 2021. 12. : 2022년 종교문화시설 건립사업 국비보조금 예산 확정 통지

❍ 2022.  3. : 보조금 교부 결정

❍ 2022.  4. : 종교문화시설 건립사업 실시설계용역 착수

❍ 2023. 10. : 실시설계용역 완료, 종교문화시설 건립사업 착공

Ⅴ	향후 추진계획

❍ 2024.  3. : 종교문화시설 건립사업 준공

❍ 2024. 12. : 사업 정산 및 완료 보고