73		은개골 역사공원 활성화를 위한 탐방로 조성	이행단계
			추진중

신규여부	신규■ 계속□	예산구분	예산■ 비예산□
사업시기	단기■ 중기□ 장기□	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정■ 제도□ 없음□		320	224	48	48
연계여부	국정과제□ 도정과제□ 비해당■	완료시기	임기 내■ 임기 후□
이행단계	추진중■ 완료□ 완료(계속)□	이행률	30%

주관부서	부 서 명	과 장	백제왕도팀장	담당자
	문화재과	조병철(☎8201)	고정우(☎8381)	김영환(☎8348)

Ⅰ	공약개요

□ 목적

❍ 은개골 주변(은개골～금강빌라) 탐방로 조성을 통한 은개골 역사공원 활성화 및

관광 자원화

□ 현황

❍ (공산성～은개골 탐방로) 2022년 상반기에 정비 완료

- 은개골～금강빌라 구간은 옥녀봉성 토지매입 미완료로 탐방로 정비 미착수

❍ (2023년 백제역사유적지구 보존관리사업) 옥녀봉성 탐방로 정비 예산(3억원) 확보

- 문화재청 국고보조사업 지침 상 총사업비 3억 이상일 경우 선(先) 설계비, 후(後) 시공비 지원으로 되어 있어 2022년에 2023년 설계비 확보 후 2023년 9월에 2024년 시공비 확보

□ 목표

❍ 탐방로 조성 1식

□ 기대효과

❍ 읍면동 시민과의 대화 시 마다 옥룡동 주민들이 지속적으로 요청하고 있는 사항으로 탐방로 조성을 통한 관광 자원화 및 지역 주민들의 산책로로 활용함으로써 건강증진 등 삶의 질 향상

Ⅱ	사업 계획

□ 공약사업 개요

❍ 사업위치 : 공주시 옥룡동 산1-1번지 일원

❍ 사업기간 : 2023 ~ 2024

❍ 사 업 비 : 320백만원(국 224, 도 48, 시 48)

❍ 사업내용 : 탐방로 조성 1식

□ 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
공산성(옥녀봉성) 탐방로 정비사업 실시설계	━	━
공산성(옥녀봉성) 탐방로 정비사업 (공사)	━	━	━	━

□ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
총 계	320		20	300
공산성(옥녀봉성) 탐방로 정비	320		20	300

Ⅲ	확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%							30
탐방로 조성 설계 및 시공	개소	목표	2		1	1		30
		실적

Ⅳ	추진실적

□ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	320	320					20	20		280	300
국비	224	224					14	14		196	210
도비	48	48					3	3		42	45
시비	48	48					3	3		42	45
민자

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회⋅토론회	언론⋅방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)

❍ 2023.  6. : 탐방로 조성 제안자 및 지역주민 의견 수렴

□ 추진실적

❶ 공산성(옥녀봉성) 탐방로 정비

❍ 2022.  4. : 2023년 백제역사유적지구 보존관리사업 예산(300백만원) 신청

❍ 2022. 10. : 사전설계비(20백만원) 가내시 확정

❍ 2023.  3. : 옥녀봉성 미보상 잔여지 토지매입 완료

❍ 2023.  4. : 기본 및 실시설계 용역 착수

- 설계용역비 20백만원(23년도 본예산)

❍ 2023.  4. : 2024년 백제역사유적지구 보존관리사업(옥녀봉성 탐방로 정비) 예산 신청

※ 문화재청 국고보조사업 지침상 총사업비 3억원 이상일 경우 선(先) 설계비, 후(後) 시공비 지원으로 되어 있어 2023년에 설계비, 2024년에 시공비 예산편성 예정

❍ 2023.  7. : 기본 및 실시설계(안) 수립

❍ 2023.  8. : 기본 및 실시설계 용역 문화재 전문위원 자문회의

❍ 2023.  9. : 2024년 문화유산 보수정비(백제역사유적지구 유적관리) 예산안 사전통지

- 공사비 300백만원 확보(2024년 본예산 반영 예정)

❍ 2023. 11. : 기본 및 실시설계 용역 준공

Ⅴ	향후 추진계획

❍ 2024.  1. ~ 6. : 옥녀봉성 등산(탐방)로 정비사업 공사 추진