74		금강 국가정원(어천죽당지구) 조성	이행단계
			준비중

신규여부	신규■ 계속□	예산구분	예산■ 비예산□
사업시기	단기□ 중기□ 장기■	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정■ 제도□ 없음□		35,000	16,000	4,100	14,900
연계여부	국정과제□ 도정과제■ 비해당□	완료시기	임기 내□ 임기 후■
이행단계	추진중■ 완료□ 완료(계속)□	이행률	10%

주관부서	부 서 명	과 장	국가정원조성TF팀장	담당자
	산림공원과	우공식(☎8401)	김정호(☎8046)	김나현(☎8557)
협력부서	부 서 명	과 장	하천관리팀장	담당자
	건설과	김만수(☎8311)	윤희대(☎8604)	이종민(☎8668)

Ⅰ	공약개요

□ 목적

❍ 유네스코 세계문화유산과 함께 공주를 대표하는 랜드마크로써 경쟁력 있는 수상 관광자원 조성 필요

□ 현황

❍ ‘21. 11. : 금강 하류 하천기본계획 수립 내 친수거점지구 지정 협의

❍ ‘22.  1.  : 금강 국가정원 공동조성 기본구상 용역(공주·부여·청양 3개 지구) 시행 및 완료

❍ ‘22.  3. : 국토교통부「해안 및 내륙권 발전사업」 사업계획(예산신청) 제출

❍ ‘22.  6. : 죽당․어천 대지예술공원 조성사업 타당성 평가 및 기본계획 수립 용역 실시(~‘23. 6.)

□ 목표

❍ 주제별 정원 5개소, 관리사무실, 주차장, 화장실 조성

□ 기대효과

❍ 금강자원을 기반으로 백제문화를 담은 국가정원 조성을 통해 충남 동남부권역 새로운 관광자원 개발하여 지역경제 활성화 기여

Ⅱ	사업 계획

□ 공약사업 개요

❶ 죽당·어천 대지예술공원 조성

❍ 사업위치 : 공주시 우성면 죽당리~어천리 일원

❍ 사업기간 : 2023년 ~ 2025년

❍ 사 업 비 : 32,000백만원(국 16,000백만원, 지방비 16,000백만원)

❍ 사업내용 : 주제별 공원 5개, 관리사무실, 화장실 등 기반시설

❷ 죽당·어천 지방정원 조성

❍ 사업위치 : 공주시 우성면 죽당리~어천리 일원

❍ 사업기간 : 2024년 ~ 2026년

❍ 사 업 비 : 3,000백만원(도 900백만원, 시 2,100백만원)

❍ 사업내용 : 정원, 체험시설 조성

□ 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
대지예술공원 조성 적격성심사, 설계	━	━
공원조성 사업 시행	━	━	━	━
지방정원 예정지 등록, 설계	━	━
지방정원 사업시행

□ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
총 계	35,000		2,000	15,180	16,410	1,410
죽당·어천 대지예술공원 조성	32,000	-	2,000	15,000	15,000	-
죽당·어천 지방정원 조성	3,000	-	-	180	1,410	1,410

Ⅲ	확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%							5
적격성심사 및 지방정원 예정지 등록	%	목표	100		100			20
		실적	20		20
실시설계	%	목표	100			100
		실적
주제별 정원, 기반시설 조성	건	목표	1				1
		실적

Ⅳ	추진실적

□ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	35,000						2,000			15,180			16,410			1,410
국비	16,000						1,000			7,500			7,500			-
도비	4,100						200			1,554			1,923			423
시비	14,900						800			6,126			6,987			987
민자

□ 추진실적

❍ 2023. 01. : 금강 하류 하천기본계획 고시(친수지구 지정완료)

❍ 2023. 04. : 2024년도 국토부 죽당리 대지예술공원 조성사업 예산 신청

❍ 2023. 05.

- 정원 조성 예정지 지정을 위한 주민의견 청취

- 『금강(어천~죽당지구) 정원 조성사업』 재정투자심사(중앙) 의뢰

❍ 2023. 06. : 지방정원 조성사업 사업 신청(충청남도)

❍ 2023. 08. : 재정투자심사(중앙) 완료(조건부 승인)

❍ 2023. 12. : 2024년도 국토부 죽당리 대지예술공원 조성사업 예산 반영

Ⅴ	향후 추진계획

❶ 죽당·어천 대지예술공원 조성

❍ 2024. 02. : 실시설계 추진

❍ 2025. 01. ~ 2026. 12. : 조성사업 추진

❷ 죽당·어천 지방정원 조성

❍ 2024. 06. ~ 08. : 지방정원 조성사업 선정(충청남도)

❍ 2025. 01. ~ 2026. 12. : 조성사업 추진

□ 관련자료

위 치 도