75		숲자원을 활용하여 트리클라이밍 등 산림레포츠 코스 조성	이행단계
			추진중

신규여부	신규■ 계속□	예산구분	예산■ 비예산□
사업시기	단기□ 중기■ 장기□	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정□ 제도□ 없음■		1,050		550	500
연계여부	국정과제□ 도정과제□ 비해당■	완료시기	임기 내■ 임기 후□
이행단계	추진중■ 완료□ 완료(계속)□	이행률	30%

주관부서	부 서 명	시설관리사업소장	휴양마을팀장	담당자
	시설관리사업소	전병윤(☎2210)	정은숙(☎2571)	이태영(☎2572)

Ⅰ	공약개요

□ 목적

❍ 관광트랜드 변화에 따른 특성화된 산림연계 프로그램 개발 필요

❍ 숲자원을 활용하여 트리클라이밍과 같은 산림레포츠 코스 조성

□ 현황

❍ 주미산 자연휴양림 지정(산림문화‧휴양에 관한 법률)

- 지 정 일 : 2019. 9. 17.

- 지정면적 : 518,270㎡

❍ 조성 시설물 : 숲속의 집, 산림문화휴양관, 목재문화체험관, 야영장, 자생식물원 등

□ 목표

❍ 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 최종보고회 1회

❍ 산림레포츠 시설공사 1식

□ 기대효과

❍ 숲자원을 활용한 산림레포츠 개발로 관광자원 활성화

❍ 방문객 증가에 따른 지역경제 활성화 도모

Ⅱ	사업 계획

□ 공약사업 개요

❶ 세부사업명 : 주미산 산림레포츠 조성사업

❍ 사업위치 : 공주시 금학동 산57 일원

❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.

❍ 사 업 비 : 1,050백만원(도550 시500)

❍ 사업내용 : 트리클라이밍 시설 확대, 짚라인 등

※ 공약사업 완료 후 지속적으로 산림복합체험장, 트리탑 등 산림레포츠 조성사업(140억)은          추가로 추진계획임.

□ 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
타당성 조사 및 기본계획 수립 용역
행정절차 이행
산림레포츠 시설공사

□ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
총 계	1,050		200	850
타당성 조사 및 기본계획 수립 용역	200	-	200	-
산림레포츠 시설공사	850	-		850

Ⅲ	확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%
타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 완료	1회	목표	1		1			20%
		실적
산림레포츠 시설조성	1식	목표	1			1
		실적

Ⅳ	추진실적

□ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	1,050							200		850
국비
도비	550									550
시비	500							200		300
민자

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회⋅토론회	언론⋅방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)

□ 추진실적

❍ 2023. 4. : 벤치마킹 및 사례조사(속리산 산림레포츠, 태조산 산림레포츠)

❍ 2023. 3.

- 벤치마킹 및 사례조사 (용화산 자연휴양림 산림복합문화센터)

- 산림레포츠 시설 조성비 지원 관련 충남도 산림자원과 방문 협의

❍ 2023. 4. : 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역비 추가 확보(1차 추경)

(5천만원→ 2억원, 케이블카 조성사업 관련 용역과 연계 추진)

❍ 2023. 5. : 타당성 조사 및 기본계획 수립용역 일상감사, 계약심사 및 용역 계약의뢰(회계과)

❍ 2023. 6. : 산림레포츠 타당성 조사 및 기본계획 수립용역 착공

❍ 2023. 8. : 道 산림자원과 방문(‘24년 산림레포츠 도비 반영 적극요청)

❍ 2023. 8. : 산림레포츠 타당성 조사 및 기본계획 수립용역 착수보고회 추진

❍ 2023. 9. : 벤치마킹 및 사례조사(평택 부락산, 동두천 놀자숲 산림레포츠)

❍ 2023. 10. : 道 산림자원과 공문 수령(’24년 도 예산 반영 알림)※도비 49억

❍ 2023.  6. ~ 2023. 12. : 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 추진

Ⅴ	향후 추진계획

❶ 세부사업명 : 주미산 산림레포츠 조성사업

❍ 2024.  1. ~ 2024.  3. : 행정절차 이행 및 실시설계 완료

❍ 2024.  6. ~ 2024. 12. : 산림레포츠 시설공사 추진 및 완료