76		금학생태공원과 환경성 건강센터를 활용한 헬스투어 코스 개발	이행단계
			추진중

신규여부	신규■ 계속□	예산구분	예산■ 비예산□
사업시기	단기■ 중기□ 장기□	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정□ 제도□ 없음■		300			300
연계여부	국정과제□ 도정과제□ 비해당■	완료시기	임기 내■ 임기 후□
이행단계	추진중■ 완료□ 완료(계속)□	이행률	55%

주관부서	부 서 명	시설관리사업소장	휴양마을팀장	담당자
	시설관리사업소	전병윤(☎2210)	정은숙(☎2571) 윤정희(☎8778)	공형빈(☎2575) 김동영(☎8607)
협력부서	부 서 명	과 장	문화재보수팀	담당자
	문화재과	조병철(☎8201)	윤태원(☎8223)	이정욱(☎8224)

Ⅰ	공약개요

□ 목적

❍ 금학생태공원과 주변 연계자원을 활용한 건강투어 코스 개발

□ 현황

❍ 금학생태공원(공주시 미래유산)

- 지 정 일 : 2022. 7. 1.

- 지정면적 : 22,904㎡

- 시설물 현황 : 둘레길, 취수탑, 저수지, 야외무대, 공중화장실, 주차장, 수영장 등

❍ 환경성건강센터

- 지 정 일 : 2018. 3. 23.

- 연 면 적 : 2,371.15㎡(1층, 3동)

- 시설물 현황 : 본관(교육관), 별관(체험관), 체류형 치유실(숙소동)

❍ 인근 문화재 자원 등

- 우금치전적, 주미사지, 봉화대 등

□ 목표

❍ 헬스투어 코스 조성 1식

□ 기대효과

❍ 헬스투어 코스 개발로 시민들에게 건강한 여가 공간 제공 및 삶의 질 향상

❍ 주변 문화재 자원 등을 활용한 코스 개발로 교육자원으로 활용

Ⅱ	사업 계획

□ 공약사업 개요

❶ 세부사업명 : 금학생태공원 헬스투어 코스 조성

❍ 사업위치 : 공주시 금학동 산37-1 일원

❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.

❍ 사 업 비 : 300백만원(시300)

❍ 사업내용 : 수원지길(2km), 치유의 숲(3.4km), 환경성건강센터, 우금치전적 등 산재되어                   있는 친환경 자원 및 시설 등을 연계하여 안내판·운동기구 설치, 체험프로그램                   연계, 족욕체험, 건강측정기구 활용 등을 통해 통합된 헬스투어코스 개발

□ 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
금학생태공원 헬스투어코스 조성 기본 및 실시설계
행정절차 이행
시설공사 및 완료

□ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
총 계	300		300
기본 및 실시설계	30	-	30	-
헬스투어 시설공사	270	-	270	-

Ⅲ	확인지표 및 이행률

확인지표	단위	실적/목표		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%							55
기본 및 실시설계	1식	목표	1		1			100
		실적			1
헬스투어 시설조성	1식	목표	1		1			10
		실적

Ⅳ	추진실적

□ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	300						300	300
국비
도비
시비	300						300	300
민자

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회⋅토론회	언론⋅방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
			2

❍ 2023. 3. 16. : 헬스투어코스 조성 실시설계 관련 회의(금학통장협의회장 참석)

❍ 2023. 5. 30. : 헬스투어코스 조성 실시설계 2차 회의(금학통장협의회장 참석)

□ 추진실적

❍ 2023. 3. : 기본 및 실시설계용역 착수

❍ 2023. 4. : 현장조사 및 사례조사

❍ 2023. 9. : 코스 조성 검토 및 설계 완료

❍ 2023. 10. : 공사발주

❍ 2023. 11. ~ 12. : 헬스투어 시설공사 착공 및 준공

Ⅴ	향후 추진계획

❶ 세부사업명 : 금학생태공원 헬스투어 코스 조성

❍ 2024. 1. ~ 12. :

- 환경성건강센터 홈페이지, SNS 및 관내 기관·단체 등 온‧오프라인 매체를 활용하여   다각적인 홍보 실시

- 가족, 직원 대상으로 체험할 수 있도록 치유의 숲 프로그램 활성화