8-7. 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 공주시에서 추진한 청사신축현황은 다음과 같습니다.

청사신축 사업명	총사업비 (백만원)	사업기간	용도 (본청, 의회, 기타)
시청사 증축 공사	9,640	2013. 5.3 ~ 2015. 9. 10(2년 4개월)	본청, 의회

▸ 대상사업 : ‘15년 준공된 사업

(시청사 증축 사업)

회계과, 박지규,041-840-8271

1. 일반현황

구   분

내  용

비  고

일반

현황

○ 소 재 지

공주시 봉황로 1

○ 인구 수

착공일

준공일

118,236명(2013. 12월 기준)

111,734명(2015. 9월 기준)

○ 공무원 수

착공일

준공일

정원/현원

998명/  993명

998명/ 912 명

○ 재정자립도

착공일(2013.5.3.)

준공일(2015.9.10.)

14%

13.6%

사업

개요

○ 기존청사

용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
합계		25,823	16,222	13,079
본청	1991.5.4		13,965	11,642	지하1/ 지상2~4
의회	1991.5.4		2,257	1,437

○ 청사증축 필요성

별관을 본청으로 통합하여 행정업무 효율증대 및 민원편의 제공

○ 사업기간

착공 당시

2013 ~ 2014(1 년)

준공

2013 ~ 2015(2 년)

○ 사업수행방식

경쟁입찰

○ 추정(예정)가격

8,659,641,000

계약금액

6,977,410,410

낙찰율

86.2%

○ 청사규모

용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
합계		25,823	16,222	14,556
본청	2016.2.24		13,965	12,973	지하1/ 지상2~4	별관1·2동포함
의회	2016.2.24		2,257	1,583		별관2동포함

소  요

예산액

○ 사업비 조달 현황(단위:억원)

구분	합계	국비	시도비	시군구비	지방채
합계	96.4			96.4
Y-3 이전	20			20
Y-2	40.9			40.9
Y-1	25			25
준공연도(Y)	10.5			10.5

○ 세부 내역별 사업비(단위:천원)

구분

연도별 사업비

비고

Y-3 이전

Y-2

Y-1

준공연도(Y)

1) 토지매입비

기존 시청부지 내 증축

2) 설계비

170,492

3) 감리비

251,106

4) 공사비

4,500,000

4,523,404

도급+관급

5) 기타부대비

194,998

교통영향평가 및 에너지효율등급 등

추진

일정

구   분

년월

결과

관련기관

비고

중기재정계획

2012. 10

승인

자체

타당성 조사

투자심사

2012. 11

조건부

충남도

재원확보대책마련

공유재산관리계획

2007. 05

승인

시의회

설계

2013. 03

완료

해원건축사사무소

설계도서 납품완료

착공

2013. 5

완료

㈜활림건설 등

준공

2015. 9

완료

자체

2. 공종별 공사비 현황

(단위:원, %)

공 종		점유율	사업공사비	비고
합계	금액		8,957,045,210
	원/㎡	1,773,164/㎡
	비율	100
건 축· 기 계	금액		6,506,568,820
	원/㎡	1,285,629/㎡
	비율	72.6
전 기	금액		1,287,614,180
	원/㎡	254,419
	비율	14.4
통 신	금액		941,772,210
	원/㎡	186,084
	비율	10.5
소 방	금액		221,090,000
	원/㎡	43,685
	비율	2.5