9

주요 투자사업 추진현황

9-1. 투자심사 대상사업

우리 시에서 ‘15년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2014년까지 집행사업비	2015년 소요사업비	2016년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
시청사 제2주차장 조성사업	3,800	2,800	60	940	2016	2014	40
유구읍 각흘고개 생태통로 조성	2,538	0	66	2,472	2017	2015	2.6
금학생태힐링지구 관광자원화사업	2,500	0	0	2,500	2007	2015	10
보건소 이전신축공사	9,771	992	3,534	5,245	2016.12	2013	40
농업회관신축	5,384	3,000	2,000	384	2016	2013	100

‣ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2015년에 추진한 사업

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

시청사 제2주차장 조성사업

담당자

회계과 어윤호(☎840-8271)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시청사 증축으로 인한 주차시설 감소로 남쪽에 제2주차장을 설치하여

시청을 찾는 시민의 불편해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 4. ~ 2016. 12.

○ 위 치 : 공주시 봉황동 372-2번지외 15필지

○ 규 모 : 대지면적 7,881㎡, 총 220면 지상 자주식 주차장

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,800	2,800	60	940	-
국 비
시 도 비
시군구비	3,800	2,800	60	940	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 토지매입 및 지장물 보상 완료(2015.11.)

○ 도시계획시설 변경 공람·공고(2016. 4.)

○ 시의회 의견청취 및 관계법 협의완료(2016. 7.)

□ 향후계획

○ 시 도시계획위원회 심의(2016. 8)

○ 도시계획실시계획인가 신청(2016. 9)

○ 공사발주 및 준공(2016. 10 ~ 12)

사업명

유구읍 각흘고개 생태통로 조성

담당자

환경자원과 장시영(☎840-8581)

□ 사업목적 및 필요성

○ 야생동물의 로드킬이 빈번한 지역에 이동통로를 설치하여 교통사고 예방       및 단절된 생태계 복원을 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 5. ~ 2017. 8.

○ 위 치 : 공주시 유구읍 문금리 산292-12번지 일원

○ 규 모 : 생태통로(L50m * W30m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,538백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,538		66	2,472
국 비	1,777		66	1,711
시 도 비	381			381
시군구비	380			380
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2014. 3. 사업대상지조사 및 국고보조사업 신청

○ 2014. 12. 사업대상지 확정

○ 2015. 5. 설계용역 발주

○ 2015. 12. 설계용역 완료 및 비관리청 공사시행 허가 신청

○ 2016.  7. 허가사항 협의 진행중(4회)

□ 향후계획

○ 2016. 09 : 일상감사, 계약심사 및 공사계약

○ 2017. 07 : 공사완료(예정)

사업명

금학생태힐링지구 관광자원화사업

담당자

환경자원과 고영석

(☎840-8537)

□ 사업목적 및 필요성

○ 금학생태문화 힐링지구 시설과 연계하여 이용할 수 있도록 함으로써 지역

경제 활성화는 물론 시민과 관광객이 함께 어우러지는 화합의 장으로 활용

○ 시민들의 여가선용을 위한 물놀이 시설을 설치하여 시민 편익증진 및 삶의 질       향상과 더불어 활기차고 건전한 여가문화를 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1 ~ 2017. 12

○ 위 치 : 공주시 금학동 111-1번지 일원

○ 규 모 : 어린이물놀이시설 1식, 눈썰매장 1식, 초화원 1식, 가로등 1식 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,500			1,200	1,300
국 비	1,000			600	400
시 도 비	750			300	450
시군구비	750			300	450
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(기본 및 실시설계 , 진도 : 10%)

○ 2015. 6 : 투.융자심사 완료

○ 2016. 5 : 기본 및 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2016. 10 : 기본 및 실시설계 완료

○ 2016. 10 ~ 11 : 행정절차 이행

○ 2016. 12 : 사업착공

○ 2017. 12 : 사업완공

사업명

보건소 신축공사

담당자

보건과 정윤수(☎840-8752)

□ 사업목적 및 필요성

○ 건물 노후화 및 공간협소로 인한 불편 해소로 농어촌의료서비스 강화

○ 노인과 취약계층이 많은 강남지역으로 이전에 따른 공동화 방지

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ～ 2016.(3년간)

○ 위 치 : 공주시 봉황로 125. (교동 120번지 일원)

○ 규 모 :  연면적 5,664.43㎡(건축면적 1,817.34㎡, 지하 1층, 지상 2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,771백만원(국비 3,017, 도비 755, 시비 5,999)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	9,771	992	3,534	5,245	0
국 비	3,017	727	2,290	0	0
시 도 비	755	182	573	0	0
시군구비	5,999	83	671	5,245	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  40%)

○ 2014.  6월 : 대행사업 협약체결 (공주시 → 충청남도개발공사)

○ 2015. 11월 : 건설공사 계약 및 착공 (시공사 대일종합건설㈜)

○ 2016.  2월 : 철거공사 및 토공사 완료

○ 2016.  3월 : 파일공사 완료 및 골조공사 착수

○ 2016.  8월 : 골조공사 완료 및 내부 습식 공사

□ 향후계획

○ 2016년 12월 준공예정

사업명

공주시 농업회관 신축

담당자

농촌진흥과 정훈섭(행8842)

□ 사업목적 및 필요성

○ 양질의 교육서비스 제공으로 전문농업인 지도자 양성 및 과학영농기술

교육을 통한 농업인의 실질소득 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2016. (3년간)

○ 위 치 : 공주시 우성면 내산목천길 52-15(농업기술센터 내)

○ 규 모 : 2,170㎡ / 지상 2층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  5,384백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	5,384	3,000	2,000	384
국 비	2,270	1,270	1,000	384
시 도 비
시군구비	3,114	1,730	1,000	384
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○ 건출물 완공 (2016. 5.)

○ 하자 점검 및 기능보완 추진

□ 향후계획

○ 집기, 비품 및 시설장비 설치(2016. 7.)

○ 개관 및 운영(2016. 8.)

□ 사업변경 내역

○ 해당없음