109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사

우리 시에서  ‘17년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

사업명	총사업비	2016년까지 집행사업비	2017년 소요사업비	2018년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
2017공주석장리 구석기축제	280	-	280	-	2017	2017	100
공주밤사8090 뮤직페스티벌	444	-	149	295	지속 사업	2017	100
웅진 백제 4대왕 숭모전 건립	7,978	171	2,073	4,534	2019	2015	40
중학동(시청~사대 부고)도시계획도로 확포장공사	9,000	0	5,000	4,000	2019	2017	35
월송지구외 연결도로(대로2-3호)개설공사	4,500	0	4,500	0	2018	2017	100
신관동 전막1길(전막교차로~코아루아파트앞)도로확포장공사	4,300	0	4,300	0	2018	2017	50
세종-공주 광역버스정보시스템 구축	1,825	34	1,781	-	2017	2015	100
신관동 공영 주차장 조성사업	2,283	-	1,858	180	2018	2017	90
도시재생선도사업	10,360	7,860	1,240	1,260	2018	2014	90
구도심 주거환경 개선사업	9,600	4,866	2,553	2,181	2018	2014	70
Again유구 만들기 사업	2,000	2,000	-	-	2017	2014	100
복합연수단지진입도로확포장공사	9,500	-	-	9,500	2019	2015	10
월송복합문화 센터 건립	12,600	700	3,880	8,720	2019	2016	40

(단위 : 백만원, %)

‣ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2016년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

2017 공주 석장리 구석기축제

담당자

문화관광과 이경진(☎840-8112)

□ 사업목적 및 필요성

○ 한국 구석기의 중심! 공주 석장리에서 구석기를 테마로 고품격 선사문화를 향유할 수 있는 교육의 장 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 5. 3. ~ 5. 7.

○ 위 치 : 공주석장리박물관 일원(공주시 금벽로 990)

○ 규 모 : 개·폐막식, 지역 예술인, 학생동아리 등 공연 참여, 어린이날 행사, 주민자치프로그램 경연대회, 체험·상설프로그램 21종 외

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 280백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	280	0	280	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	80	-	80	-	-
시군구비	200	-	200	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2017 공주석장리구석기축제 종료 및 결과보고 완료

□ 향후계획

○ 2019 공주석장리구석기축제 준비

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

공주밤사8090뮤직페스티벌

담당자

문화관광과 황규하(☎840-2056)

□ 사업목적 및 필요성

○ 세계유산 문화재를 활용한 축제 개최로 새로운 대한민국 문화관광 콘텐츠 발굴

○ 차별화된 여름축제 개발을 통한 외부 관광객 유입 및 지역 관광산업 활성화

○ 지역 식자재를 활용한 만찬 메뉴 개발로 지역 농축산물 브랜드 강화 및 홍보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 7. 21 ~ 22일(2일간)

○ 위 치 : 공주한옥마을 선화당

○ 규 모 : 2,000여명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 444백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	444	-	149	-	295
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	444	-	149	-	295
지 방 채	-	-	-	-	--
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 행사완료 (2017. 7. 22.)

□ 향후계획

○ 공주얼음축제로 행사명 변경

○ 차별화된 여름 킬러 콘텐츠로 피서철 관광객 유입을 통한 비수기 지역 경제 활성화

□ 사업변경 내역

	당초	현재
행사장소	선화당	고마 일원
행사기간	2일간	3일간
사 업 비	150백만원	295백만원

사업명

웅진 백제 4대왕 숭모전 건립

담당자

문화재과 강병열(☎840-8207)

□ 사업목적 및 필요성

○ 웅비를 펼쳤던 고대문화의 중심인 백제의 전통과 위상을 계승발전 시키고자

백제 4대왕에 대한 추모공간을 조성하여 백제문화의 긍지와 자부심 고취

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2019년

○ 위 치 : 공주시 웅진동 52번지 일원

○ 규 모 : 숭모전 건립, 체험관 증축 및 리모델링 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,978백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	7,978	171	2,073	4,534	1,200
국 비	2,839	57	530	1,772	480
시 도 비	2,020	-	279	1,381	360
시군구비	3,119	114	1,264	1,381	360
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2018. 04 : 백제오감체험관 전시설계 및 제작ㆍ설치 업체 선정

○ 2018. 05 : 숭모전 보강공사 및 백제오감체험관 실시설계용역 준공

□ 향후계획

○ 2018. 12 : 백제오감체험관 건립공사 준공

○ 2019. 06 : 백제오감체험관 전시설계 및 제작ㆍ설치 완료

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

중학동(시청~사대부고)도시계획도로확포장공사

담당자

도시정책과 정종찬(☎840-8552)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획체계적인 도시계획도로 개설을 통한 교통흐름 개선

○ 도로 확포장을 통한 교통불편 해소 및 구도심 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2019

○ 위 치 : 공주시 반죽동 ~ 봉황동 일원(중로3-14호)

○ 규 모 : L=666m, B=12m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	9,000	-	5,000	4,000	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	9,000	-	5,000	4,000	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 2018. 02월 : 보상 착수

○ 2018. 03월 : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2019. 12월 : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

사업명

월송지구외 연결도로(대로2-3호)

개설공사

담당자

도시정책과 신동석(☎840-8553)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획체계적인 도시계획도로 개설을 통한 교통흐름 개선

○ 월송지구외 연결도로(대로2-3호)와 시도1호선을 연결하여 월송동 주민

센터 앞 교통 혼잡해소 및 국도 23호선 접근성 개선으로 시민편익도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2018

○ 위 치 : 공주시 월송동 공주중앙장로교회~월송동주민센터 일원(대로2-3호)

○ 규 모 : L=164m, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,500	-	4,500	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,500	-	4,500	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2017. 10월 : 공사 착공

○ 2018. 07월 : 공사 준공

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

사업명

신관동 전막1길(전막교차로~코아루

아파트앞) 도로확포장공사

담당자

도시정책과 신동석(☎840-8553)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전막1길 도로는 특정시간대 지체가 발생하고 있고 주변 아파트 개발사업의         준공 시 교통량 증가로 인한 주민불편이 예상되어 도시계획도로 확포장

으로 교통흐름 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018

○ 위 치 : 공주시 전막교차로~코아루아파트 앞 일원(대로3-3호)

○ 규 모 : L=200m, B=14~34.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,300	-	4,300	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,300	-	4,300	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	--	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2018. 03월 : 공사 착공

○ 2018. 05월 : 지중화공사 착공

○ 2018. 06.월 : 회전교차로 설치 운영

□ 향후계획

○ 2018. 12월 : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

사업명

세종-공주 광역버스정보시스템 구축

담당자

교통과 김진영(☎840-8487)

□ 사업목적 및 필요성

○ 세종-공주 광역생활권 형성에 따른 대중교통 이용서비스 증진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2017년

○ 위 치 : 공주시 일원

○ 규 모 : 버스정보안내단말기 77개소, 키오스크 5개소, 차내단말기 67대,

센터 구축 1식 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,825백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	1,815	34	1,781	-	-
국 비	1,452	27	1,425	-	-
시 도 비	108	2	106	-	-
시군구비	255	5	250	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2017.  9. : 세종-공주 광역버스정보시스템 구축 준공

○ 2017. 10. : 버스정보시스템 확대 구축사업 발주 및 시행

○ 2017. 12. : 버스정보시스템 확대 구축사업 준공(버스정보안내단말기 4개소 추가 설치)

□ 향후계획

○ 2018. 7. ~ 10. : 읍면지역 및 신규 아파트 분양지 등 버스정보안내단말기등                       추가 설치 확대[자체재원(시비)]

□ 사업변경 내역 : 해당 없음

사업명

신관동 공영주차장 조성사업

담당자

교통과임동건(☎840-8502)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주택 밀집지역의 주차장 조성으로 주차난 완화 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 5.~ 2018. 8.

○ 위 치 : 공주시 신관동 280-14번지 외 2필지

○ 규 모 : 주차장 1개소 101면, A=2,898㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,038백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,038	-	1,858	180	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,038	-	1,858	180	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   90%)

○2017. 6. 토지 보상협의 완료

○2018. 5. 공사 착공

○2018. 8. 공사 준공 예정

□ 향후계획

○ 주차장 준공에 따른 이용객 편의증진을 위한 관리 실시

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

도시재생 선도사업

담당자

창조도시과 심효섭 (☎840-8687)

□ 사업목적 및 필요성

○ 물리적·사회적·경제적 활력 회복을 위하여 공공의 역할과 지원 강화

○ 도시의 자생적 성장기반을 확충하여 도시의 경쟁력 제고로 주민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2018년

○ 위 치 : 공주시 웅진동‧중학동‧옥룡동

○ 규 모 : 5개 대사업/ 14개 세부사업

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,360백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	10,360	7,860	1,240	1,260	-
국 비	6,054	4,854	1,200	-	-
시 도 비	1,200	960	40	200	-
시군구비	3,106	2,046	-	1,060	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  90 %)

○ 2016. 5월 : 국토부 활성화계획 변경 승인

○ 2016. 9월 : 공주문화예술촌 리모델링 완료

○ 2016. 9월 : 공주문화예술촌 리모델링 완료

○ 2017. 7월 : 공주하숙마을 준공 및 운영

○ 2017. 9월 : 공주문화예술촌 에코뮤지엄 공사 준공

웅진로 고도풍 경관개선 추진 완료

□ 향후계획

○ 2018. 09월 : 박찬호 골목길 준공

○ 2018. 12월 : 도시재생 선도사업 완료

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

구도심 주거환경개선사업

(대통지구 외3개지구 주거환경개선사업)

담당자

창조도시과 유연호 (☎840-8647)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공주시의 낙후된 강남 구도심(반죽동, 봉황동일원)의 노후·주거밀집 지역에 대한

기반시설(소방도로 및 주차장 등)을 정비하여 각종 재난에 신속 대처하고, 교    통·주차난 해소를 통해 열악한 주거환경을 개선하는데 목적이 있음

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 6월 ~ 2018년 12월

○ 위 치 : 공주시 반죽동, 봉황동 일원

○ 규 모 : 대통지구 외3개지구 주거환경개선사업

- 정비구역 지정 : L=112,940㎡

- 도로개설 : L=820m(B=6.0m), 주차장조성 : A=2,366㎡, 소공원 465㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	9,600	4,866	2,553	2,181	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	4,800	2,215	1,254	1,331	-
시군구비	4,800	2,651	1,299	850	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ `15.12. : 대통지구 외 3개지구 주거환경개선사업 지정고시

○ `16.09. : 대통, 장대지구 주거환경개선사업 착공

○ `17.02. : 큰샘A, 큰샘B지구 주거환경개선사업 착공

○ `18.04. : 장대지구 주거환경개선사업 준공

○ `18.07. : 큰샘B지구 주거환경개선사업 준공

□ 향후계획

○ `18.12. : 사업 완료

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

Again 유구 만들기 사업

담당자

정책사업과 윤석모 (☎840-8598)

□ 사업목적 및 필요성

○ 유구만의 특색있는 지역문화와 관광자원의 개발이 필요하여 문화예술,

직물산업, 전통시장을 연계한 유구섬유역사박물관 건립

□ 사업개요

○ 기 간 :  2016. 2. ∼ 2017. 12.

○ 위 치 : 유구읍 석남리 252-37번지 일원

○ 규 모 : 2,000백만원(국 1,400 도 300 시 300)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,000	2,000	-	-	-
국 비	1,400	1,400	-	-	-
시 도 비	300	300	-	-	-
시군구비	300	300	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

○ 섬유역사전시관 준공식 및 사업 완료

사업명

복합연수단지 진입도로 확포장공사

담당자

정책사업과 윤석모 (☎840-8598)

□ 사업목적 및 필요성

○ 소방방재교육연구단지 건립 등의 기회 요인을 적극 활용한 마을 주민의

생활환경 보호 및 소득창출 기회 확대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 5 ~ 2019. 12(호계리~화월리 / 1구간)

○ 위 치 : 사곡면 호계리 ~ 화월리 일원

○ 규 모 : 도로 확포장(L=1km, B=10m), 교량 2개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	9,500	-	-	2,000	7,500
국 비	4,200	-	-	1,500	2,700
시 도 비	2,000	-	-	-	2,000
시군구비	3,300	-	-	500	2,800
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10 %)

○ 2015. 5. : 지방재정투자사업 심사 완료 [1구간(1km), 95억원]

○ 2015. 7. ~ 2016. 12. : 1구간(1km) 실시설계용역 완료

○ 2016.  2. ~ 2016. 9. : 행자부 특별교부세 15억원 교부

○ 2018. 4. : 2019년도 일반농산어촌개발사업 예산신청(27억원)

○ 2018. 5. : 호계 ~ 화월 마을연결도로 공사 계약심사 완료

○ 2018. 6. : 호계 ~ 화월 마을연결도로 공사 계약의뢰(1차 화월교)

□ 향후계획

○ 2018. 7. : 농어촌도로 노선지정 신청

○ 2018. 8. : 2회 추경예산으로 편입용지 보상추진

○ 2019. 12. : 1구간 사업완료

사업명

월송복합문화센터 건립

담당자

정책사업과 김주희(☎840-8589)

□ 사업목적 및 필요성

○  우리시 강북지역은 관내 타 지역에 비하여 어린이 및 청소년 인구가 많아 어린이전용도서관과 청소년 시설에 대한 수요가 많으나, 현재 강북도서관은 주민센터와 공동으로 사용하고 있어 공간이 협소하고 접근성이 떨어져  주민수요에 상응하는 새로운 도서관 건립이 필요함

○ 월송 공공주택지구 조성공사를 시행하고 있는 한국토지주택공사로부터  근린공원부지 일부(교양시설)를 기부채납 받아 부지를 마련, 민간단체인 책 읽는 사회문화재단과 협조하여 주민의 요구를 반영한 도서관과 청소년 문화의 집을 건립하여 주민의 문화적 욕구를 충족하고 주변도시로의 어린이·청소년 인구 유출을 최소화 할 교육·문화적 환경을 조성하고자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 월송동 672번지(월송공공주택지구 내 2호 근린공원)

○ 사업기간 : 2016년∼2019년

○ 사 업 비 : 11,900백만원 (국비 5,000, 시비 6,900)

○ 사업규모 : 부지면적 6,000㎡, 연면적 4,036㎡,  지하1층 지상3층

○ 사업내용 : 복합문화센터 건립 (도서관, 청소년문화의집)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	12,600	700	3,180	6,659	2,061
국 비	5,000	-	1,350	2,159	1,491
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	6,900	-	1,830	4,500	570
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	700	700	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2016. 02. 26 : 복합문화센터 건립 확정(전략회의)

○ 2016. 03. 04 : 복합문화센터 건립 추진계획수립

○ 2016. 03. 28 : (재)책읽는사회문화재단과의 상호 협력을 위한 MOU체결

○ 2016. 04. 07 : 경제적 타당성 용역 착수

○ 2016. 05. 30 : 지방재정투자심사(충청남도, 조건부 심사)

○ 2016. 08. 04 : 경제적 타당성 용역 완료

○ 2016. 10. 26 : 공유재산 관리계획 승인

○ 2016. 11. 30 : 청소년문화의 집 건립 관련 청소년 대상 설문조사

○ 2017. 01. 17 : 건축설계용역 착수

○ 2017. 04. 14 : 부대공사 설계용역 착수

○ 2017. 08. 30 : 공공디자인 컨설팅(충남도) 및 기본계획검토(여성가족부) 완료

○ 2017. 09. 25 : BF(장애물 없는 생활환경) 예비인증 추진

○ 2018. 04.     : 신축공사에 따른 감리용역 발주

○ 2018. 05.     : 건축인허가 완료 및 공사 발주

○ 2018. 05. 29. : (재)책읽는사회문화재단 건축설계 기증식

○ 2018. 06.     : 감리용역 및 공사 착수

□ 향후계획

○ 2019. 07. : 건축 공사 완공

○ 2019. 12. : 월송복합문화센터 개관

□ 사업변경 내역

○ 당초 사업기간 : 2016년~2018년

○ 변경 사업기간 : 2016년~2019년