28	사곡,반포 농촌중심지 정비사업 조속 추진

√ 임기구분 임기내 / 임기후 √ 사업주체 국가 / 공주시 / 민간 √ 정부도움 해당없음 / 재정 / 제도 등 √ 신규여부 계속 / 신규 √ 사업시기 단기 / 중기 / 장기 √ 예산구분 예산 / 비예산 √ 이행단계 준비 / 추진 / 완료 / 지속 √ 전체 이행률 50% √ ‘19년 추진률 100%	공약개요 ❍ 사곡면 농촌중심지 활성화사업 조속 추진 - 사업기간 : 2018 ~ 2022(5개년) - 사업내용 : 기초생활기반확충(복지회관, 주차장, 체육공원) 지역경관개선(절골 탐방길, 절골 알림이) 지역역량강화(홍보, 교육, 컨설팅, 마을경영지원) ❍ 반포면 농촌중심지 활성화사업 조속 추진 - 사업기간 : 2017 ~ 2021(5개년) - 사업내용 : 기초생활기반확충(어울림 사랑방·마당, 쉼터) 지역경관개선(진입로 정비, 연지쉼터조성) 지역역량강화(홍보, 교육, 컨설팅, 마을경영지원)

☎ 주민공동체과 김세종 840-2550 / 마을만들기팀장 양현목 840-8241 / 주무관 박소은 840-8247

■ 현황 및 정책목표

❍ 현황 : 일반농산어촌개발사업 추진 체계상 기본계획 및 시행계획 수립 후 사업 추진 예정

❍ 정책목표

- 농촌지역의 정주기반 및 생활환경 개선을 통한 농촌지역 삶의 질 향상

- 농촌에 대한 기초인프라 투자 및 특화발전 도모

■ 사업개요

사곡면 농촌중심지활성화사업

❍ 사업기간 : 2018 ~ 2022 (5개년)

❍ 사 업 비 : 5,460백만원(국비3,822,  도비218, 시비1,420)

❍ 사업내용

기능유형별	세 부 내 역	비 고
기초생활기반확충	복지회관, 공동주차장, 버스승강장, 공원, 절골지킴이(CCTV)
지역경관개선	절골탐방길, 시시콜콜 수집장, 절골알림이
지역역량강화	교육, 홍보마케팅, 컨설팅, 마을경영지원

❍ 참고사항 : 공유재산 관리계획 수립 중

반포면 농촌중심지활성화사업

❍ 사업기간 : 2017 ~ 2021 (5개년)

❍ 사 업 비 : 5,940백만원(국비4,158,  도비238, 시비1,544)

❍ 사업내용

기능유형별	세 부 내 역	비 고
기초생활기반확충	어울림 사랑방, 어울림 마당, 공암2리 쉼터
지역경관개선	충현서원마실길(스토리텔링길, 진입로정비, 연지쉼터 조성)
지역역량강화	교육, 홍보마케팅, 컨설팅, 마을경영지원

❍ 참고사항 : 공유재산 관리계획 수립 완료

■ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
기본 및 시행계획 수립	건	3	2	1
공사 착공 및 사업 완료	건	2		1	1
정산 및 시설물 인계인수	건	2				1	1

■ 그동안 추진실적

❍ 연도별 사업 추진 실적

확인지표	단위	실적	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	이행률
연도별 추진률	%		100%	100%	%	%	%	50%
기본 및 시행계획 수립	건	3	2	1				100%
공사 착공 및 사업 완료	건	1		1	-			50%
정산 및 시설물 인계인수	건	-				-	-	%

■ 시민참여 실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 / 방송보도	기 타
5	-	-	-	-

❍ 사곡면 농촌중심지활성화사업 기본계획 승인 관련 주민설명회 : 2019. 01. 09

❍ 사곡면 농촌중심지활성화사업 시행계획 수립용역 착수보고회  : 2019. 06. 17.

❍ 사곡면 농촌중심지활성화사업 시행계획 수립용역 중간보고회  : 2019. 12. 11.

❍ 반포면 농촌중심지활성화사업 시행계획 승인 관련 주민설명회 : 2019. 01. 21

❍ 반포면 농촌중심지활성화사업 착공보고회 : 2019. 08. 23

■ 향후 추진계획

❍ 사업 기간 내 계획된 순기에 의하여 사업 추진 예정

추진일정(사곡면)

세부 사업명	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
기본계획 수립
시행계획 수립
공사 착공 및 사업 완료
정산 및 시설물 인계인수

추진일정(반포면)

세부 사업명	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
시행계획 수립
공사 착공 및 사업 완료
정산 및 시설물 인계인수

사업별 투자계획                                                     (단위 : 백만원)

세부 사업명	계	임기중 투자계획					임기후 투자계획
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
총 계	11,400	1,705	2,430	2,642	3,819	804
사곡면 농촌중심지활성화	5,460	554	1,405	1,463	1,234	804	-
반포면 농촌중심지활성화	5,940	1,151	1,025	1,179	2,585	-	-

■ 공약가계부                                                       (단위 : 백만원)

구분	계			2018년			2019년			2020년			2021년	2022년
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	계획
계	11,400	3,939	3,939	1,705	1,705	1,705	2,234	2,234	2,234	3,327	0	0	2,562	1,572
국비	7,980	2,758	2,758	1,194	1,194	1,194	1,564	1,564	1,564	2,328			1,793	1,101
도비	453	156	156	67	67	67	89	89	89	134			101	62
시비	2,967	1,025	1,025	444	444	444	581	581	581	865			668	409
민자	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-			-	-

■ 기대효과

❍ 농촌지역의 기초생활기반확충 및 지역경관개선사업등을 통하여 살고 싶고, 찾고 싶은 농촌정주      공간을 조성하여 농촌에 희망과 활력을 고취