27	북부 농업기계 임대사업장 설립

√ 임기구분 임기내 / 임기후 √ 사업주체 국가 / 공주시 / 민간 √ 정부도움 해당없음 / 재정 / 제도 등 √ 신규여부 계속 / 신규 √ 사업시기 단기 / 중기 / 장기 √ 예산구분 예산 / 비예산 √ 이행단계 준비 / 추진 / 완료 / 지속 √ 전체 이행률 52.5% √ ‘19년 추진률 100%	공약개요 ❍ 사업기간 : 2018 ~ 2022(5개년) ❍ 사 업 비 : 2,400백만원 ❍ 추진내용 : 원거리 북부지역(사곡, 신풍, 유구) 농업인 편의 도모를 위한 농업기계임대사업장 설립

☎ 기술보급과장 이은복 840-8920 / 농업기계팀장 백경호 840-8896 / 주무관 장원철 840-8992

■ 현황 및 정책목표

❍ 현   황

- 위    치 : 2개소[본소(센터 내/ 2009년도), 남부지소(이인면 구부내로 321/ 2014년도)]

- 보유장비 : 본소(90종 374대), 남부지소(62종 173대)

❍ 정책목표

- 임대사업 분산 운영으로 농업인 편의 도모 및 임대농기계 이용률 제고

- 지역 주산 작목에 맞는 임대농기계 구입 농업인 만족도 향상

■ 사업개요

농업기계 임대사업

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년(5개년)

❍ 사 업 비 : 2,400백만원(국비 500 ,  도비 150, 시비 1,750)

❍ 사업내용

- 농업인이 직접 농업기계를 구입하지 않고 일정기간 동안 저렴한 비용으로 임대 사용

▸ 대    상 : 관내 거주자(경작지) 농업인 중 임대관련 교육 이수자

▸ 임 대 료 : 5,000원 ~ 93,000원/1일 (내방 이용시 무료 ☞ 콩 정선기, 탈망기 등)

▸ 임대기간 : 1일 ~ 3일(단기임대)

■ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
지역선정 유관기관 단체 협의회	건	1	1
임대사업장 설치 부지 확보	건	1		1
임대사업장 설치 및 장비구입	건	1			1
임대사업 운영	건	2				1	1

■ 그동안 추진실적

❍ 북부 농업기계 임대사업소 부지 매입을 위한 설명회 개최(2019. 7. 18) : 신풍면사무소 / 25명

❍ 북부 농업기계 임대사업소 후보지 현지 심사(2019. 7. 30) : 3개소

❍ 북부 농업기계 임대사업소 부지 확정 및 소유권 이전 등기(2019. 11. 4)

❍ 북부 농업기계 임대사업소 토목 공사 발주(2019. 12. 16) 및 착공(2020. 1. 2.)

❍ 북부 농업기계 임대사업소 실시설계(건축) 용역 발주(2020. 1. 27.)

확인지표	단위	실적	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	이행률
연도별 추진률	%		100%	100%	%	%	%	52.5%
지역선정 유관기관 단체 협의회	건	1	1					100%
임대사업장 설치 부지 확보	건	1		1				100%
임대사업장 설치 및 장비구입	건				10			10%
임대사업 운영	건							%

■ 시민참여 실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 / 방송보도	기 타
2

※ 2018. 10. 30. : 북부농업기계 임대사업장 부지 선정을 위한 협의회 개최(29명)

※ 2019. 07. 18. : 북부농업기계 임대사업장 부지 매입을 위한 설명회 개최(25명)

■ 향후 추진계획

❍ 2020년 1월 ~ 3월 : 토목공사(4,490㎡) 실시 및 건축공사 실시설계

❍ 2020년 4월 ~ 7월 : 건축공사 실시 및 임대농업기계 구입

⇒ 건    축 : 농기계보관창고(825㎡), 관리동(99㎡), 야외보관시설(330㎡)

⇒ 농 기 계 : 50종 200대(트랙터, 관리기, 작업부속기 등) 사전 수요조사에 의거 구입 추진

❍   2020년 8월 : 북부농업기계 임대사업소 준공(예정)

❍   2020년 8월 :농업기계를 취급할 수 있고 지속적으로 근무할 수 있는 전문 인력 확보(3명 이상)

❍ 8월 ~ 12월 : 북부 임대사업소 운영

추진일정

세부 사업명	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
지역선정 유관기관 단체 협의회																					1
임대사업장 설치 부지 확보																					1~4
임대사업장 설치 및 장비구입																					1~4
임대사업 운영																					8

사업별 투자계획                                                     (단위 : 백만원)

세부 사업명	계	임기중 투자계획					임기후 투자계획
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
총 계	2,400		300	1,700	200	200
지역선정 유관기관 단체 협의회		-
임대사업장 설치 부지 확보	300		300
임대사업장 설치 및 장비구입	1,700			1,700
임대사업 운영	400				200	200

■ 공약가계부                                                       (단위 : 백만원)

구분	계			2018년			2019년			2020년			2021년	2022년
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	계획
계	2,400	300	300	0	0	0	300	300	300	1,700	0	0	200	200
국비	600	0	0							600
도비	180	0	0							180
시비	1,620	300	300				300	300	300	920			200	200
민자	0	0	0

■ 기대효과

❍ 임대농기계 입·출고 시간 단축으로 여유로운 농작업 등 농업인 편의 도모

❍ 농업기계 임대사업 분산 운영 및 지역 주산작목 임대농기계 구입으로 임대농기계 이용률 제고

❍ 임대농기계를 임대 사용함으로서 농기계 구입 부담 경감, 인력난 해소, 농가소득 증대 기여