10	도시재생 뉴딜사업 적극 추진

√ 임기구분 임기내 / 임기후 √ 사업주체 국가 / 공주시 / 민간 √ 정부도움 해당없음 / 재정 / 제도 등 √ 신규여부 계속 / 신규 √ 사업시기 단기 / 중기 / 장기 √ 예산구분 예산 / 비예산 √ 이행단계 준비 / 추진 / 완료 / 지속 √ 전체 이행률 30% √ ‘19년 추진률 40%	공약개요 ❍ 옥룡동을 문재인 정부의 핵심공약인 도시재생 뉴딜사업의 선도지역으로 육성하여 주거복지 제공, 도시경쟁력 강화, 공동체복원 실현

☎ 도시정책과장 윤석봉 840-8540 / 도시재생기반팀장 박지동 840-8616 / 주무관 윤희대 840-8659

■ 현황 및 정책목표

❍ 현황 : 옥룡동 버드나무골 일원은 비교적 원도심 중심부에 위치해 있으나 쇠퇴지역으로 도시재생             뉴딜사업 추진 시급

❍ 정책목표

- 지역의 계층분석을 통한 공유형 임대주택제공

- 노후화된 주거지 집수리 비용 지원

- 다양한 계층이 편안하게 보행할 수 있는 환경조성

■ 사업개요

역사를 나누고 삶을 누리는 옥룡동 마을르네상스

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2021년

❍ 사 업 비 : 33,500백만원 (국비14,900 지방비11,700 공기업4,800 민간2,100, 기투자 1,600)

※ 마중물 사업비 : 17,700백만원(국비 10,000 도비 2,000 시비 5,700)

❍ 사업내용 : 4개 영역 15개 세부사업

- 생활인프라 개선사업 (세부사업 5건)

▸공산성 어울림센터, 마을주차장 및 건축불가필지도로확보, 마을목욕탕, 안심골목길, 공유상가

- 주거지원사업 (세부사업 4건)

▸집수리 지원사업, 빈 집 정비사업, 실버청년 임대주택사업, 은개골 진입도로 정비사업

- 지역특성화사업 (세부사업 3건)

▸버드나무 공동체가로 활성화사업, 백제테마가로사업, 마을축제 특화사업

- 지역역량강화사업 (세부사업 3건)

▸주민역량강화사업, 주민공모사업, 도시재생지원센터 운영

■ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
생활인프라 개선사업	건	1				1
주거지원사업	건	1				1
지역특성화사업	건	1				1
지역역량강화사업	건	1				1

■ 그동안 추진실적

❍ 2018. 08. : 국토부 승인

❍ 2019. 01. ~ : 마중물 사업 실시설계 용역 추진 / 토지 및 지장물 보상 추진

❍ 2019. 11. : 옥룡동 주거지지원형 활성화계획 변경 용역 착수

❍ 2019. 12. : 마을주차장 및 건축불가필지 도로확보사업 공사착수

확인지표	단위	실적	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	이행률
연도별 추진률	%		%	40%	%	%	%	30%
생활인프라 개선사업	건			40%				30%
주거지원사업	건			40%				30%
지역특성화사업	건			40%				30%
지역역량강화사업	건			40%				30%

■ 시민참여 실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 / 방송보도	기 타
13	1	3	3

■ 향후 추진계획

❍ 2018. 8. ~ 2021. 사업추진(4년 사업)

- 생활인프라개선사업 추진(어울림센터 조성 및 마을주차장, 건축불가 필지 확보사업 등)

- 주거정비지원사업(집수리 지원, 빈집 정비, 임대주택 사업, 자율주택 정비사업 등)

- 지역특화사업 및 역량강화사업(버드나무 공동체가로, 백제테마가로, 마을축제, 주민역량강화,         주민공모사업 등)

- 은개골 진입도로 정비사업 : L=400m(B=12m)

. 2019. 11. : 마을주차장 및 건축불가필지 도로확보사업 공사발주

. 2019. 11. :  옥룡동 주거지지원형 활성화계획 변경 용역 착수

❍ 2021. 12. : 사업완료

추진일정

세부 사업명	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
생활인프라 개선사업
주거지원사업
지역특성화사업
지역역량강화사업

사업별 투자계획                                                     (단위 : 백만원)

세부 사업명	계	임기중 투자계획					임기후 투자계획
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
총 계	17,700	6,833	3,700	3,700	3,467	0
생활인프라 개선사업	9,900	3,833	2,000	2,000	2,067	-
주거지원사업	3,800	3,000	300	300	200	-
지역특성화사업	2,200	-	800	800	600	-
지역역량강화사업	1,800	-	600	600	600	-

■ 공약가계부                                                        (단위 : 백만원)

구분	계			2018년			2019년			2020년			2021년	2022년
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	계획
계	17,700	11,500	0	6,833	6,833	0	4,667	4,667	0	3,100	0	0	3,100	0
국비	10,000	6,600	0	4,100	4,100	-	2,500	2,500	-	1,700			1,700
도비	2,000	1,320	0	820	820	-	500	500	-	340			340
시비	5,700	3,580	0	1,913	1,913	-	1,667	1,667	-	1,060			1,060
민자	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-			-

■ 기대효과

❍ 주거복지 제공 및 공동체 복원을 통한 도시경쟁력 강화

❍ 대상지 내 기존 문화재 사업과 연계하여 포괄적인 정주환경 개선