51	이삼평 도자문화예술단지 조성

√ 임기구분 임기내 / 임기후 √ 사업주체 국가 / 공주시 / 민간 √ 정부도움 해당없음 / 재정 / 제도 등 √ 신규여부 계속 / 신규 √ 사업시기 단기 / 중기 / 장기 √ 예산구분 예산 / 비예산 √ 이행단계 준비 / 추진 / 완료 / 지속 √ 전체 이행률 50% √ ‘19년 추진률 100%	공약개요 ❍ 사업기간 : 2019. ∼ 2022 (4년) ❍ 장 소 : 반포면 학봉리 일원 ❍ 사업내용 : 타당성 검토 및 조성계획 용역, 토지매입, 이삼평 도자문화거리 조성, 도자 거점센터 및 전시관, 체험관, 도자랜드마크, 진입로 등 시설물 건축

☎ 문화체육과장 황의정 840-8230 / 문화시설기반팀장 이경희 840-2586 / 주무관 최경숙 840-2047

■ 현황 및 정책목표

❍ 현황 : 국내 3대 도요지, 철화분청사기, 일본도조 이삼평 고향 등 정통성과 역사성, 이야기 자원을         보유하고 있으나 대내·외 인지도가 미흡하고, 계룡산도예촌과 이삼평공원 등 관련 시설물도         타 지역 경쟁 도시와 비교하면 매우 열악한 실정임.

❍ 정책목표

- 경기도 이천, 전남 강진 등에 버금가는 도시로 발전 시켜나가기 위한 다각적인 사업 발굴

- 공주 도자문화 자생력 구축 및 이삼평 도자예술단지 조성

■ 사업개요

이삼평 도자문화예술단지 조성

❍ 사업기간 : 2019. ∼ 2022. (4년)

❍ 총사업비 : 용역 결과물에 의거 추후 결정 / 용역비 50백만원 본예산 상정

❍ 사업별 추진계획

- 타당성 검토 및 조성계획 용역 시행 : 2019. 3. ∼ 10.

- 토지 매입 : 2020년 ~2021년

- 지방재정투자심사의뢰 : 중앙투자심사통과 2020년

- 도시관리계획지정고시 및 실시설계 반영, 사업착공 : 2021년

- 시설물 건립 : 2021. ∼ 2022. / 이삼평 기념관, 전수관 및 공방, 체험장, 대가마, 공연장 등

■ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
조성계획 용역	식	1		1
사업 추진	식	1					1

■ 그동안 추진실적

❍ 2019. 3. : 이삼평 도자문화예술단지 조성 기본계획 수립 연구용역 발주

❍ 2019. 4. : 기본계획 수립 연구용역 착수보고회 개최 및 시민, 관계자 의견 수렴

❍ 2019. 8. : 기본계획 수립 연구용역 중간보고회 개최 및 시민, 관계자 의견 수렴

❍ 2019. 10. : 기본계획 수립 연구용역 최종보고회 개최(용역 결과 발표 및 시민, 관계자 의견 수렴

확인지표	단위	실적	2019년	2020년	2021년	2022년	이행률
연도별 추진률	%	100%	100%	%	%	%	50%
조성계획 용역	식	1	100%				100%
사업 추진	식	1					%

■ 시민참여 실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 / 방송보도	기 타
3		1

❍ 2018. 12. : 도예전문가 자문

❍ 2019. 4. : 기본계획 수립 연구용역 착수보고회(반포면 마을 주민 15명 참석 및 의견수렴)

❍ 2019. 8.~10.: 중간, 최종보고회(반포면 마을 주민 15여명 및 관계자 의견수렴)

■ 향후 추진계획

❍ 2020. ~ 2022. : 재원확보 및 사업 시행

추진일정

세부 사업명	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
조성계획 용역
사업 추진

사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

세부 사업명	계	임기중 투자계획					임기후 투자계획
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
총 계	32,150		50	17,500	5,900	8,700
조성계획 용역	50		50	0	0	0
사업 추진	32,100		0	17,500	5,900	8,700

■ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2018년			2019년			2020년			2021년	2022년
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	계획
계	32,150	50	20	0	0	0	50	50	20	17,500	0	0	5,900	8,700
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	10,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,100	6,100
시비	21,950	50	20	0	0	0	50	50	20	17,500	0	0	1,800	2,600
민자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ 기대효과

❍ 공주시가 보유한 도공 이삼평 콘텐츠와 반포면 학봉리 지역의 도자유적지를 활용해 문화와 관광이 융합된 복합문화예술 단지를 조성하여, 침체된 도자산업을 활성화하고 대한민국 대표 도자도시로서 위상 제고