47	연미산 ‘자연미술 비엔날레 전용관’ 설치

√ 임기구분 임기내 / 임기후 √ 사업주체 국가 / 공주시 / 민간 √ 정부도움 해당없음 / 재정 / 제도 등 √ 신규여부 계속 / 신규 √ 사업시기 단기 / 중기 / 장기 √ 예산구분 예산 / 비예산 √ 이행단계 준비 / 추진 / 완료 / 지속 √ 전체 이행률 37% √ ‘19년 추진률 100%	공약개요 ❍ 자연미술 비엔날레 전용관 건립 ❍ 사업기간 : 2018. 9. ~ 2021. 12 ❍ 사 업 비 : 4,663백만원(국 1,865, 시 2,798) ❍ 사업내용 - 작가, 스텝, 관람객 구역을 조성하여 작업실과 준비실, 사무실과 휴게실, 수장고, 전시실과 다목적실로 구성된 지상 2층 건물과 부속시설 신축

☎ 문화체육과장 최덕근 840-8230 / 문화시설기반팀장 김정식 840-2586 / 주무관 이대섭 840-2047

■ 현황 및 정책목표

❍ 현황 :「2014년 금강자연미술 비엔날레 건립 기본구상 및 타당성 조사 연구용역」을 하였으나 제10차 문화재위원회 천연기념물분과위원회 검토(2014. 10. 29.) 결과 용역기관에서 작성된 사업계획서의 조감도 및 평면도로 승인여부를 판단할 수 없었음

❍ 정책목표

- 시민들과 함께 자연미술을 학습하고 체험하는 장소 마련

- 연미산 ‘금강 자연미술비엔날레관’을 설치하여 대한민국 자연미술의 성지로서 자리매김

■ 사업개요

연미산‘금강 자연미술비엔날레관’ 설립

❍ 사업기간 : 2018. 9. ~ 2021. 12

❍ 사 업 비 :4,663백만원(국 1,865, 시 2,798)

❍ 사업내용

- 작가, 스텝, 관람객 구역을 조성하여 작업실과 준비실, 사무실과 휴게실, 수장고, 전시실과 다목적실로 구성된 지상 2층 건물과 부속시설 신축

■ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
자문워크숍	건	1		1
타당성조사 및 문화재 현상변경 허가 용역	건	1			1
각종 허가 변경 및 국비확보	건	1			1
자연미술비엔날레관 설립	건	1				1

■ 그동안 추진실적

❍ 2019. 1. 31. : 학술연구용역 사전심의(금강자연미술비엔날레관 기본계획 및 타당성조사 용역)

❍ 2019. 03. : 예산 확보(2019년 1회 추경, 연구용역비 60백만원)

❍ 2019. 05. 16. : 기본계획 및 타당성 조사 용역 계약 의뢰

❍ 2019. 08. 01. : 용역 계약 및 착수

❍ 2020.  1. 31. : 용역 완료

확인지표	단위	실적	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	이행률
연도별 추진률	%	0%	%	100%	%	%	%	37%
자문워크숍	건	1		1				100
타당성조사 및 문화재 현상변경 허가 용역	건	1		50				50
각종 허가 변경 및 국비확보	건	1		-				-%
자연미술비엔날레관 설립	건	1		-				-%

■ 시민참여 실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 / 방송보도	기 타
3	-	3	-	-

❍ 2019. 10. 25. : 공주문화예술진흥 시민 대토론회(지역 예술인 의견 수렴, 민간전문가 자문)

❍ 2020.  1.  3. : 기본계획 및 타당성 조사 용역 중간보고회(지역 예술인 의견 수렴, 민간전문가 자문)

❍ 2020.  2.  4. : 기본계획 및 타당성 조사 용역 최종보고회(지역 예술인 의견 수렴, 민간전문가 자문)

■ 향후 추진계획

금강 자연미술비엔날레관 건립을 위한 기본 설계 및 타당성 조사를 통해 더불어 건립 타당성 검토 후 법률적 타당성(문화재 현상변경허가 등) 및 재무적 타당성(도비 확보) 확보 후 추진

❍ 2020. 03. ~ 08. : 현상변경 허가 용역 추진

❍ 2020. 06. ~ : 공립미술관 설립타당성 사전평가 신청(문화체육관광부)

❍ 2020. 10. ~ : 예산 확보(투융자심사 등) 및 실시설계 추진

❍ 2021. 03. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

❍ 2022. ~ : 금강 자연미술 비엔날레관 운영(조례 제정, 관리 및 운영방안 협의)

추진일정

세부 사업명	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
자문워크숍
타당성조사 및 문화재 현상변경 허가 용역
각종 허가 변경 및 국비확보
자연미술비엔날레관 설립

사업별 투자계획

(단위:백만원)

세부 사업명	계	임기중 투자계획					임기후 투자계획
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
총 계	4,663		60	300	4,303
자문워크숍	-
타당성조사 및 문화재 현상변경 허가 용역	60		60
각종 허가 변경 및 국비확보	300			300
자연미술비엔날레관 설립	4,303				4,303

■ 공약가계부                                                        (단위 : 백만원)

구분	계			2018년			2019년			2020년			2021년	2022년
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	계획
계	4,663	60	0	0	0	0	60	60	0	300	0	0	4,303	0
국비	0	0	0
도비	1,865	0	0							300			1,565
시비	2,798	60	0				60	60					2,738
민자	0	0	0

■ 기대효과

❍ 지역문화시설 확충 및 문화적 소외감 해소

- 충남도내 공공미술관으로서 지역민들의 문화적 소외감 해소를 위한 공공문화 서비스 제공

❍ 지역사회 문화휴식공간 및 관광자원 발굴

- 기존 역사문화관광자원과 연계한 새로운 생태문화 관광자원 개발로 인근 지역 잠재 수요 유인