46	공주시립미술관 조성

√ 임기구분 임기내 / 임기후 √ 사업주체 국가 / 공주시 / 민간 √ 정부도움 해당없음 / 재정 / 제도 등 √ 신규여부 계속 / 신규 √ 사업시기 단기 / 중기 / 장기 √ 예산구분 예산 / 비예산 √ 이행단계 준비 / 추진 / 완료 / 지속 √ 전체 이행률 12% √ ‘19년 추진률 50%	공약개요 ❍ 충남역사박물관(2020년 인수추진)을 공주시립미술관으로 조성 실내·외 전시장으로 활용 - 건물 도색 및 방수공사, 노후건물 철거 - 시립미술관 조성 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역추진 - 타당성 조사 및 기본계획 수립에 의거 사업 추진

☎ 문화체육과장 황의정 840-8230 / 문화시설기반팀장 이경희 840-2586 / 주무관 이대섭 840-2057

■ 현황 및 정책목표

❍ 현황 : 충남역사박물관(공주시 행정재산), 중동 284-1외 1필지 13,645㎡, 건물 4동 2,185㎡

❍ 정책목표

- 충남역사박물관을 인수(2020년) 후 공주 시립미술관으로 조성 추진

- 지역내 문화예술인 작품 전시공간으로 조성 시민의 문화향유와 다양성 및 공공성 증진

■ 사업개요

타당성조사 및 기본계획수립 연구용역

❍ 사업기간 : 2019. 1월 ∼ 12월

❍ 사 업 비 : 50백만원(시비 50)

❍ 사업내용

- 시립미술관 조성을 위한 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구용역

▸ 박물관 및 미술관 진흥법 시행령 제7조의2(공립 박물관·공립미술관 설립타당성 사전평가

시설물 보강 및 주변정비, 전시자료 수집

❍ 사업기간 : 2018. 9월 ∼ 2021년

❍ 사 업 비 : 1,000백만원(시비 1,000)

※ 미술품 구입비는 추후(기본계획 수립시) 별도 산정

❍ 사업내용

- 건축물 시설보강 및 리모델링 : 1동 1,648㎡

- 주변정비사업 : 노후건물 철거, 수목정비, 편의시설 설치, 보행로 정비 등

- 전시자료 수집 : 100점 이상(문화예술인 무상기증, 유상 매수)

시립미술관 등록 및 운영

❍ 사업기간 : 2022년 ∼

❍ 사 업 비 : 100백만원(시비 100)

❍ 사업내용

- 시립미술관 등록신청(충청남도지사) / 박물관 및 미술관 진흥법

- 시립미술관 운영(학예사 1명 필수선발)

■ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
타당성 및 기본계획 용역	건	1		1
시설보강 및 주변정비	건	2	1			1
전시자료 수집	건	1				1
미술관 등록 및 운영	운영	1					1

■ 그동안 추진실적

❍ 2018. 10. : 지역 민간전문가 자문

❍ 2018. 11. : 타 지자체 공립미술관 벤치마킹(대전시립미술관, 정읍시립미술관)

❍ 2019. 03. : 충남역사문화연구원 업무 협의(당초 건립 예정지인‘충남역사박물관’이전계획 백지화)

❍ 2019. 09. 18. : 공주 시립미술관 건립 기본계획 및 타당성 조사 용역 계약 의뢰

❍ 2019. 10. 07. : 용역 계약 및 착수

❍ 2020.  1. 31. : 용역 중지(건립 대상지 확정 지연)

확인지표	단위	실적	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	이행률
연도별 추진률	%	100%	%	50%	%	%	%	12%
타당성 및 기본계획 용역	건			50%				50%
시설보강 및 주변정비	건			-				-%
전시자료 수집	건			-				-%
미술관 등록 및 운영	운영			-				-%

■ 시민참여 실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 / 방송보도	기 타
1	-	3	-	-

❍ 2018. 10. : 지역 민간전문가 자문

❍ 2018. 11. : 타 지자체 공립미술관 벤치마킹(대전시립미술관, 정읍시립미술관)

❍ 2019. 10. 25. : 공주문화예술진흥 시민 대토론회(지역 예술인 의견 수렴, 민간전문가 자문)

■ 향후 추진계획

□ 2019. 10. ~ 2020. 04. : 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구용역 시행(대상지 모색)

❍ 2020. 06. ~  : 공립미술관 설립타당성 사전평가 신청‧승인

❍ 2020. 10. ~  : 예산확보(투융자심사 등), 실시설계 추진

□ 2021. 03. ~ 12. : 공사 착공‧준공(미술품 구입)

□ 2022. ~ : 공립미술관 등록‧운영(조례 제정, 관리 및 운영방안 협의)

추진일정

세부 사업명	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
타당성 및 기본계획 용역
시설보강 및 주변정비
전시자료 수집
미술관 등록 및 운영

사업별 투자계획

세부 사업명	계	임기중 투자계획					임기후 투자계획
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
총 계	1,400	250	50		1,000	100
타당성 및 기본계획 용역	50		50
시설보강 및 주변정비	750	250			500
전시자료 수집	500				500
미술관 등록 및 운영	100					100

■ 공약가계부                                                         (단위:백만원)

구분	계			2018년			2019년			2020년			2021년	2022년
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	계획
계	1,400	50	0	0	0	0	50	50	0	250	0	0	1,000	100
국비	0	0	0
도비	0	0	0
시비	1,400	50	0				50	50		250			1,000	100
민자	0	0	0

■ 기대효과

❍ 지역의 문화·예술인  미술의 활성화로 시민들의 감성 문화 배양 및 공공성 증진

❍ 전시와 교육프로그램으로 공공 교육의 발전과 시민의 문화 향유 증진