45	유휴 공공시설에 시민과 문화예술인이 공유하는 ‘예술인회관’ 설립

√ 임기구분 임기내 / 임기후 √ 사업주체 국가 / 공주시 / 민간 √ 정부도움 해당없음 / 재정 / 제도 등 √ 신규여부 계속 / 신규 √ 사업시기 단기 / 중기 / 장기 √ 예산구분 예산 / 비예산 √ 이행단계 준비 / 추진 / 완료 / 지속 √ 전체 이행률 50% √ ‘19년 추진률 100%	공약개요 ❍ 유휴시설을 이용한 “문화예술인 회관” 설립 - 연습실 2실, 사무실 1실, 회의실 겸 휴게실 1실

☎ 문화체육과장 황의정 840-8230 / 문화시설기반팀장 이경희 840-2586 / 주무관 이대섭 840-2057

■ 현황 및 정책목표

❍ 현황 : 공주문예회관, 공주문화원, 고마 등 문화예술인들의 공연 및 문화예술작품 활동 지원
상설 전시관 운영 중

❍ 정책목표

- 지역 예술인들이 예술 활동을 마음껏 영위할 수 있는 공간 마련

- 지역 시민과 관광객들의 관람 접근성이 뛰어난 곳으로 위치적 이점을 이용한 지역문화예술 진흥

■ 사업개요

예술인회관 설립

❍ 사업기간 : 2018. 9. ~ 2021. 12.

❍ 사 업 비 : 800백만원(시비/중기적 확보)

❍ 사업내용

- 기존 유휴 공공시설을 이용하면 안전진단 및 리모델링을 통하여 연습실 1실, 사무실 1실,
예술전문도서관을 구비한 예술인회관 설립

■ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
기본실시설계 및 안전진단	건			1				%
리모델링 및 보강공사	건				1			%

■ 그동안 추진실적

❍ 2019. 01. 07. : 문화예술 정책 간담회(지역 예술인 의견 수렴, 민간전문가 자문)

❍ 2019. 01. 29. : 의원간담회(리모델링 공사비 관련 협의)

❍ 2019. 02. 07. : 현안조정회의(내부 공간배치 안, 진행상황 점검).

❍ 2019. 03. 05. : 예술전문 작은도서관 조성 관련 업무협의(평생교육과)

❍ 2019. 03. 06. ~ 03. 20. : 정밀안전진단 용역감독 공무원 지정 및 설계내역 검토

❍ 2019. 04. 12. : 정밀안전진단 용역 착수

❍ 2019. 06. 10. : 정밀안전진단 용역 준공(진단결과:B등급)

❍ 2019. 07. 24. : 예술인회관 리모델링 공사 실시설계 용역 제안공모 공고 의뢰

❍ 2019. 08. 12. : 제안공모 공고 ⇒	유찰

❍ 2019. 08. 21. : 실시설계 용역 (변경) 계약 의뢰

- 기존 : 제안공모 방식 ⇒ 변경 : 일반입찰 방식

❍ 2019. 09. 26. : 실시설계 용역 공고(조달청 나라장터) ⇒ 유찰(무응찰)

❍ 2019. 10. 07. : 실시설계 용역 재공고(조달청 나라장터) ⇒ 유찰(무응찰)

❍ 2019. 10. 23. : 실시설계 용역 계약 및 착수

❍ 2019. 12. 19. : 공공디자인 심의(자문) 신청

❍ 2019. 12. 19. : 공공디자인 심의(자문) 조치계획서 제출

확인지표	단위	실적	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	이행률
연도별 추진률	%		%	100%	%	%	%	50%
기본실시설계 및 안전진단	건	1		1				100%
리모델링 및 보강공사	건							-%

■ 시민참여 실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 / 방송보도	기 타
1	-	1	-	-

❍ 2019. 01. 07. : 문화예술정책 간담회(지역 예술인 의견 수렴, 민간전문가 자문)

❍ 2019. 10. 25. : 공주문화예술진흥 시민 대토론회(지역 예술인 의견 수렴, 민간전문가 자문)

■ 향후 추진계획

❍ 2019. 10.~2020. 02. : 실시설계 완료

❍ 2020. 02.~06. : 예술인회관 리모델링 공사 완료

추진일정

세부 사업명	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
기본실시설계 및 안전진단
리모델링 및 보강공사

사업별 투자계획

(단위:백만원)

세부 사업명	계	임기중 투자계획					임기후 투자계획
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
총 계	800	0	50	750	0	0
기본실시설계 및 안전진단	50		50
리모델링 및 보강공사	750			750

■ 공약가계부                                                       (단위:백만원)

구분	계			2018년			2019년			2020년			2021년	2022년
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	계획
계	800	800	21	0	0	0	800	800	21	0	0	0	0	0
국비	0	0	0
도비	0	0	0
시비	800	800	21				800	800	21
민자	0	0	0

■ 기대효과

❍ 지역 예술인들의 예술 활동을 보장하고 연중 자유롭게 문화 공연연습을 통하여 시민들에게는 문화예술향유의 기회를 제공하고 관광객에게는 볼거리를 제공함.