38	백제왕도 핵심유적 복원정비사업과 연계하여 역사․관광정책 재정비

√ 임기구분 임기내 / 임기후 √ 사업주체 국가 / 공주시 / 민간 √ 정부도움 해당없음 / 재정 / 제도 등 √ 신규여부 계속 / 신규 √ 사업시기 단기 / 중기 / 장기 √ 예산구분 예산 / 비예산 √ 이행단계 준비 / 추진 / 완료 / 지속 √ 전체 이행률 35% √ ‘19년 추진률 100%	공약개요 ❍ 백제왕도 핵심유적 복원정비사업과 연계하여 고도육성, 역사도시 조성, 세계유산 등 정책을 종합 재정비

☎ 문화재과 강석광 840-8201 / 백제왕도팀장 고정우 840-8381 / 담당자 이수정 840-8378

■ 현황 및 정책목표

❍ 현황 : 고도육성사업 : 고도 골격 핵심유적 복원 등 13개 사업 / 1,843억 / 2012~2021

역사도시조성사업 : 시가지 경관개선사업 등 35개 사업 / 3,695억 / 2009~2030

고도육성사업 별도 예산 계정 없어 계획 대비 예산 지원 미비. 일부 사업 차질

❍ 정책목표

- 고도육성, 역사도시 조성, 세계유산 사업 등을 백제왕도 핵심유적 보존․관리사업에 최대 반영

추진

■ 사업개요

❍ 사업기간 : 2017 ~ 2038

❍ 사 업 비 : 327,803백만원(국비 229,462,  도비 49,171, 시비 49,170)

❍ 사업내용

- 공산성 : 토지매입, 왕궁 유적 복원, 방문자센터 건립 등

- 송산리고분군 : 고분군 재조사, 방문자센터 리모델링 등

- 정지산 유적 : 토지매입, 고증 연구, 유적 보호시설 조성 등

- 고마나루 : 토지매입, 발굴조사, 고증 연구 등

- 대통사지 : 토지매입, 발굴조사, 고증 연구 등

- 수촌리 고분군 : 토지매입, 유적 보호각 건립, 체험시설 리모델링 등

■ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
공산성 보존관리사업	건	5	1	1	1	1	1
송산리고분군 보존관리사업	건	5	1	1	1	1	1
정지산 유적 보존관리사업	건	4		1	1	1	1
고마나루 보존관리사업	건	5	1	1	1	1	1
대통사지 보존관리사업	건	4		1	1	1	1
수촌리고분군 보존관리사업	건	5	1	1	1	1	1

■ 그동안 추진실적

❍ 2018. 10월 : 백제왕도 핵심유적 보존관리 시행계획 주민 공청회 개최

❍ 2018. 12월 : 백제왕도 핵심유적 보존관리 시행계획 수립 완료

❍ 2019. 1월 ~ : 백제왕도 핵심유적 보존관리 사업 및 고도육성사업, 역사도시사업, 세계유산 사업추진 중

확인지표	단위	실적	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	이행률
연도별 추진률	%		100%	100%	%	%	%	35%
공산성 보존관리사업	5건		1	1				40%
송산리고분군 보존관리사업	5건		1	1				40%
정지산 유적 보존관리사업	4건			1				25%
고마나루 보존관리사업	5건		1	1				40%
대통사지 보존관리사업	4건			1				25%
수촌리고분군 보존관리사업	5건		1	1				40%

■ 시민참여 실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 / 방송보도	기 타
1		24

❍ 백제왕도 핵심유적 보존관리 시행계획 주민공청회(2018. 10월)

❍ 보존관리 사업 추진 시 전문가 자문회의 개최(2019 ~ 22년 매년 6개 유적 사업 추진 시 실시)

■ 향후 추진계획

❍ 2019 ~ 2038 : 백제왕도 핵심유적 보존관리 시행계획 의거 연차별 사업 추진

세부 사업명	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
공산성 보존관리사업
송산리고분군 보존관리사업
정지산 유적 보존관리사업
고마나루 보존관리사업
대통사지 보존관리사업
수촌리고분군 보존관리사업

사업별 투자계획

세부 사업명	계	임기중 투자계획					임기후 투자계획
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
총 계	327,800	5,900	13,700	13,700	13,700	13,900	266,900
공산성 보존관리사업	165,300	2,900	5,600	5,600	5,600	5,800	139,800
송산리고분군 보존관리사업	60,000	2,300	3,400	3,400	3,400	3,400	44,100
정지산 유적 보존관리사업	9,700		800	800	800	800	6,500
고마나루 보존관리사업	23,800	40	300	300	300	300	22,560
대통사지 보존관리사업	37,000		2,000	2,000	2,000	2,000	29,000
수촌리고분군 보존관리사업	32,000	660	1,600	1,600	1,600	1,600	24,940

■ 공약가계부                                                         (단위 : 백만원)

구분	계			2018년			2019년			2020년			2021년	2022년
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	계획
계	60,900	29,627	7,125	5,900	5,735	4,041	13,700	7,610	3,084	13,700	16,282	0	13,700	13,900
국비	42,630	20,339.4	4,533	4,130	3,615	2,375	9,590	5,327	2158	9,590	11,397.4		9,590	9,730
도비	9,135	4,643.3	1,296	885	1,060	833	2,055	1,141	463	2,055	2,442.3		2,055	2,085
시비	9,135	4,644.3	1,296	885	1,060	833	2,055	1,142	463	2,055	2,442.3		2,055	2,085
민자	0	0	0

■ 기대효과

❍ 웅진백제 왕도로서의 본질적 가치와 핵심유적을 합리적으로 보존․관리

❍ 백제의 실체와 가치에 관한 배움과 발견의 장 제공

❍ 백제 왕도로서의 정체성 확립을 통해 명실상부한 역사․관광도시로서 발돋움