97

공공와이파이 존 확대 구축

완료(지속)

√ 임기구분 임기내 / 임기후 √ 사업주체 국가 / 공주시 / 민간 √ 정부도움 해당없음 / 재정 / 제도 등 √ 신규여부 계속 / 신규 √ 사업시기 단기 / 중기 / 장기 √ 예산구분 예산 / 비예산 √ 이행단계 준비 / 추진 / 완료 / 지속 √ 전체 이행률 100% √ ‘19년 추진률 100%	공약개요 ❍ 공공와이파이 존 확대 구축(총 93개소 확대) - 주민들의 정보접근 기회확대 - 시민 및 관광객 통신비 절감

☎ 행정지원과  최인종 840-2060 / 통신팀장 안기수 840-8116 / 주무관 오창섭 840-8120

■ 현황 및 정책목표

❍ 현황 : 73개소 (매칭펀드 방식 52개소, 통신사자체구축후 개방18개소, 자체구축 3개소)

❍ 정책목표

- 공공장소 및 관광지에 공공와이파이를 확대 구축하여 시민 및 관광객의 원활한 인터넷 접속환경 조성

■ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019년~2022년

❍ 사 업 비 : 435백만원(시비)

❍ 사업내용

- 2019년 산성시장 내 40개소, 마곡사, 신원사 등 관광지에 20개소 공공와이파이 설치

- 2020년~2022년 공공와이파이 요청 접수시 현장확인 후 설치추진(연10개소)

■ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
공공와이파이 추가 설치	개소	90		60	10	10	10

■ 그동안 추진실적

❍ 공주시 공공와이파이 구축공사 : 5개소 20대 설치

- 2019년 공주시 공공와이파이 구축공사 추진계획 수립(2019년 3월)

- 실시설계 및 일상감사, 계약심사, 보안성검토 (2019년 4월~6월)

- 도급공사 계약(2019.7.9.), 관급자재 계약(2019년 7월 / 9월)

- 공공와이파이 구축공사 준공 (2019.11.13.)

- 사업비 : 금242백만원(시비)

- 설치장소 : 산성시장, 마곡사 주차장, 마곡사 야외무대, 신원사, 신원사 버스정류장

❍ 시내버스 공공와이파이 설치완료 : 63대 모두 설치

- 상반기 20대(4월), 하반기 43대(9월) 설치

- 사업방식 : 전담사업자(통신사)가 설치 및 유지보수 운영, 과기부·도·시 매칭으로 월정료 납부 (공주시 부담금 연13백만원, 자치단체간부담금)

❍ 문체부 관광지 무료와이파이 설치 : 16개소 59대 설치

- 공모신청(4월), 선정(6월), 공사(6월~11월), 준공(11월)

- 사업방식 : 통신사에서 설치 및 운영, 설치비는 문체부·도·시·통신사 매칭, 회선료는 시에서 부담

- 사업비 : 금328백만원(국12%, 도15%, 시33%, 통신사40%) / 공주시 부담금 금108백만원

- 설치장소 : 산성시장, 산성정류소~금강교 남단 주차장, 황새바위 성지, 중동 가구점길 및 중동 먹자골목, 풀꽃문학관, 마곡사 경내, 수촌리 고분군, 동학사 입구

❍ 시청사 공공와이파이 설치 : 1개소 28대 설치

- 계획수립 및 실시설계, 보안성검토 (2019년 8월)

- 도급공사 계약(2019.9.18.), 관급자재 계약(2019.9.30.)

- 시청사 공공와이파이 설치공사 준공 (2019.10.18.)

- 사업비 : 금76백만원(시비)

- 설치장소 : 시청사 본관동, 별관1동, 2동 복도

❍ 공주시 공공와이파이 구축공사(2차) : 4개소 13대 설치

- 계획수립 및 실시설계, 착공 (2019년 11월)

- 공공와이파이 구축공사 준공 (2019.12.9.)

- 사업비 : 금36백만원

- 설치장소 : 보건소, 치매안심센터, 농업기술센터, 문예회관, 시의회 본회의장

❍ 과기부 무선인터넷 인프라 구축

- 수요조사 제출(3월), 설치대상지 확정(10월)

- 사업방식 : 통신사에서 설치 및 운영, 설치비는 과기부·통신사 부담, 회선료는 시에서 부담

- 설치예정지 : 시내버스 정류장, 보건지소, 공공도서관에 118개소 120대 설치

- 사업기간 연기 (‘19년 12월 ⇒ ’20년 상반기)

확인지표	단위	실적	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	이행률
연도별 추진률	%		0%	100%	0%	0%	0%	100%
공공와이파이 설치개소	90개소	60		90				100%

■ 시민참여 실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 / 방송보도	기 타
			3	1

❍ 각 부서 및 읍면동을 통한 설치대상지 수요조사 : 1회(‘18년 8월)

❍ 공공와이파이 설치 언론보도 : 2회(‘19년 5월,  ’19년 7월,  ‘19년 9월)

■ 향후 추진계획

❍ 공주시 공공와이파이 설치

- 2020년 공공와이파이 10개소 10대 설치

- 2021년~2022년 : 20개소 20대 (연10개소 10대)

❍ 과기부 무선인터넷 인프라 구축

- 2020년 상반기 : (‘19년 사업수량) 118개소 120대 설치

- 2020년 하반기 : 33개소 111대 설치 (신관동 버스정류장 ~ 흑수골길)

■ 추진일정

세부 사업명	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
설치대상지 수요조사
공공와이파이 설치

■ 사업별 투자계획

(단위: 백만원)

세부 사업명	계	임기중 투자계획					임기후 투자계획
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
총 계	475	0	295	60	60	60
공공와이파이 설치	435	0	285	50	50	50
공공와이파이 공공요금	40	0	10	10	10	10

■ 공약가계부                                                        (단위 : 백만원)

구분	계			2018년			2019년			2020년			2021년	2022년
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	계획
계	475	617	473	0	0	0	295	493	473	60	124	0	60	60
국비	0	0	0
도비	0	0	0
시비	475	617	473				295	493	473	60	124	0	60	60
민자	0	0	0

■ 기대효과

❍ 공공장소 및 관광지 공공와이파이 확대 구축으로 시민과 관광객의 원활한 인터넷 접속환경

조성 및 통신비 절감