90	광역상수도망 확대 추진

√ 임기구분 임기내 / 임기후 √ 사업주체 국가 / 공주시 / 민간 √ 정부도움 해당없음 / 재정 / 제도 등 √ 신규여부 계속 / 신규 √ 사업시기 단기 / 중기 / 장기 √ 예산구분 예산 / 비예산 √ 이행단계 준비 / 추진 / 완료 / 지속 √ 전체 이행률 44% √ ‘19년 추진률 95%	공약개요 ❍ 광역상수도 미 공급지역 조기 공급 추진 - 현재 상습적인 물 부족 지역인 유구읍까지 광역상수도망 확장사업 조기 완공을 추진(장기적으로 유구읍 상수원보호 구역 해제 추진) - 미 공급 지역 조기에 광역상수도 공급 추진해 83%(공주시 2016년 기준)인 상수도 보급률을 전국 평균인 96%(2016년 기준)까지 달성 추진

☎ 상하수도과장 황도연 840-8601 / 상수도팀장 남상봉 840-8611 / 주무관 강동균 840-8612

■ 현황 및 정책목표

❍ 현황 : 동지역, 유구읍, 계룡면, 반포면, 우성면, 사곡면 상수도 현재 공급 中

→ 상수도 보급률 : ‵16년(83%),  ‵17년(85%),  ‵18년(87%)

❍ 정책목표

- 상수도 미공급 지역의 조속한 사업추진을 통한 상수도 조기 공급 추진

- 급수구역 확충을 통한 상수도 보급률 제고

■ 사업개요

신풍 농어촌지방상수도 확충사업

❍ 사업기간 : 2015 ~ 2021

❍ 사 업 비 : 42,253백만원(국비 24,844, 도비 4,259, 시비 6,389, 기타 6,761)

❍ 사업내용 : 송배수관 17.3km, 급배수관 136.7km, 배수지 1개소, 가압장 9개소

4개면 농어촌지방상수도 확충사업

❍ 사업기간 : 2017 ~ 2022

❍ 사업구간 : 정안, 의당, 이인, 탄천

❍ 사 업 비 : 25,405백만원(국비 17,784, 도비 3,048, 시비 4,573)

❍ 사업내용 : 송배수 및 급수관리 119.8km

※ 총사업비 및 사업기간 변경 예정

신풍~유구간 비상연계관로 설치공사

❍ 사업기간 : 2017 ~ 2020

❍ 사 업 비 : 3,000백만원(국비 2,100, 도비 450, 시비 450)

❍ 사업내용 : 비상연계 관로설치 L=6.6kmm

■ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
상수도 보급률	%	96	87	90	92	94	96

■ 그동안 추진실적

신풍 농어촌지방상수도 확충사업

❍ 사업착공 : (1단계) 2016. 07. / (2단계) 2018. 10.

❍ 공정율(2019. 12월 현재) : (1단계) 90% / (2단계) 23%

4개면 농어촌지방상수도 확충사업

❍ 용역착수 : 2017. 06.

❍ 공정율(2019. 12월 현재) : 70%

신풍~유구간 비상연계관로 설치공사

❍ 사업착공 : 2019. 06.

❍ 공정율(2019. 12월 현재) : 65%

확인지표	단위	실적	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	이행률
연도별 추진률	%	-	100%	95%	%	%	%	44%
상수도 보급률	%	-	87	87%	-	-	-	44%

■ 시민참여 실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 / 방송보도	기 타
3	-	-	3	-

❍ 주민설명회

- 2015. 03 : 설계추진 설명 및 주민의견 수렴

- 2016. 10 : 지역주민 대상 사업설명회

- 2018. 12 ~ 2019. 01 : 급수관로 공사에 따른 마을순회 사업설명회

❍ 언론보도

- 2015. 04 : 신풍면 상수도 공사 예산 확보

- 2017. 07 : 신풍면 상수도 공사 추가 예산 확보

- 2018. 06 : 신풍면 2단계 상수도 확충사업 본격 추진

■ 향후 추진계획

❍ 신풍 농어촌지방상수도 확충사업

- 2020년 : (신풍) 공사 완료 일부 지역 우선 공급 (청양) 4개면 지역 상수도 공급

- 2022년 : 신풍 전역 지방상수도 공급 완료

❍ 4개면 농어촌지방상수도 확충사업

- 2020년 사업 발주

❍ 신풍~유구간 비상연계관로 설치공사

- 2020년 6월까지 사업 완료 및 상수도 공급

추진일정

세부 사업명	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
신풍 농어촌지방상수도
4개면 농어촌지방상수도
신풍~유구간 비상연계관로

사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

세부 사업명	계	임기중 투자계획					임기후 투자계획
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
총 계	61,779	7,437	17,362	16,660	15,210	5,110
신풍 농어촌지방상수도	35,279	7,167	7,912	10,100	10,100	-
4개면 농어촌지방상수도	23,500	170	8,000	5,110	5,110	5,110
신풍~유구간 비상연계관로	3,000	100	1,450	1,450	-	-

■ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2018년			2019년			2020년			2021년	2022년
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	계획
계	61,779	22,325	16,259	7,437	6,088	6,088	17,362	11,302	10,171	16,660	4,935	0	15,210	5,110
국비	41,063	6,279	5,905	2,544	2,544	2,544	12,635	3,735	3,361	11,660	0		10,647	3,577
도비	7,254	5,501	1,230	604	545	545	2,212	761	685	2,000	4,195		1,825	613
시비	12,272	7,155	6,073	3,099	2,999	2,999	2,515	3,416	3,074	3,000	740		2,738	920
민자	1,190	3,390	3,051	1,190	0	0		3,390	3,051		0

■ 기대효과

❍ 안전하게 먹을 수 있는 용수공급을 통한 시민 행복증진 도모

❍ 농촌지역 지하수 고갈과 오염에 따른 식수 걱정 해소