88	송선농공단지교차로~송선교차로 도로확장 조기추진

√ 임기구분 임기내 / 임기후 √ 사업주체 국가 / 공주시 / 민간 √ 정부도움 해당없음 / 재정 / 제도 등 √ 신규여부 계속 / 신규 √ 사업시기 단기 / 중기 / 장기 √ 예산구분 예산 / 비예산 √ 이행단계 준비 / 추진 / 완료 / 지속 √ 전체 이행률 62% √ ‘19년 추진률 50%	공약개요 - 위 치 : 금흥동 고향칼국수 ~ 충남도 종합건설사업소 앞 - 노 선 명 : 도시계획도로 중로1-46호선 - 사 업 량 : L=442m, B=24m (2차로 ⇒ 4차로) - 사 업 비 : 4,000백만원(시비) - 사업기간 : 2019 ~ 2021년 ※ 공주BRT 1단계 노선 확정 시 6차로 변경 필요

☎ 도로과장 이기산 840-8553 / 도로2팀장 김만수 840-8551 / 주무관 김혜진 840-8553

■ 현황 및 정책목표

❍ 현황 : 송선농공단지교차로 ~ 송선교차로 2차선 도로

❍ 정책목표

- 공주 ~ 세종시 도로 확·포장공사와 연결하기 위해 도로 확장 추진 (2차로 ⇒ 4차로)

■ 사업개요

송선농공단지교차로~송선교차로 도로확장

❍ 사업기간 : 2019 ~ 2021년

❍ 사 업 비 : 4,000백만원(시비)

❍ 사업내용

- 도시계획도로(중로1-46호) 확․포장

▸ L=442m, B=24m

▸ 2차로 ⇒ 4차로

■ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
지방재정투자심사	건	1	1
중기지방재정계획	건	1	1
토지 및 지장물 보상	건	1		1
사업 착공 및 준공	건	1				1

■ 그동안 추진실적

❍ 2017. 12. : 실시설계용역 완료

❍ 2018. 03. : 토지 및 지장물 보상협의 착수

❍ 2018. 09. : 중기지방재정계획 반영 및 지방재정투자심사(2018년 3회추경)

❍ 2019. 05. : 소규모 환경영향평가 용역 착수

❍ 2019. 06. : 한전 통신주 등 지중화사업 추진 협의

❍ 2019. 08. : 한전 지중화사업 추진 협의(2차) 보완서 제출

❍ 2019. 11. : 한전 및 통신선로 지중화 사업 확정

확인지표	단위	실적	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	이행률
연도별 추진률	%		100%	50%				62%
지방재정투자심사	건	1	1					100%
중기지방재정계획	건	1	1					100%
토지 및 지장물 보상(31건)	건			50%				50%
사업 착공 및 준공	건							%

■ 시민참여 실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 / 방송보도	기 타

❍

■ 향후 추진계획

❍ 2020. 02. : 한전지중화사업 협약서 체결 및 소규모 재해영향평가 용역 완료

❍ 2020. 03. : 실시계획인가 고시

❍ 2020. 04. : 사업 착공

❍ 2021. 12. : 사업 준공

추진일정

세부 사업명	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
토지 및 지장물 보상협의
중기지방재정계획
지방재정투자심사
사업 착공 및 준공

사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

세부 사업명	계	임기중 투자계획					임기후 투자계획
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
총 계	4,000	1,800	1,000	1,200
토지 및 지장물 보상협의	2,800	1,800	1,000
사업 착공 및 준공	1,200			1,200

■ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2018년			2019년			2020년			2021년	2022년
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	계획
계	4,000	2,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,000	1,000	0	1,200	0	0	0	0
국비	0	0	0
도비	0	0	0
시비	4,000	2,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,000	1000		1,200
민자	0	0	0

■ 기대효과

❍ 행복도시 ~ 공주2구간 도로건설공사 준공(2021년) 시기에 맞춰 도로 확·포장 공사를 완료하여        교통 불편해소 및 지역균형 발전 도모