87-1	의당길（전막~의당농협) 4차선 확장(1단계)

√ 임기구분 임기내 / 임기후 √ 사업주체 국가 / 공주시 / 민간 √ 정부도움 해당없음 / 재정 / 제도 등 √ 신규여부 계속 / 신규 √ 사업시기 단기 / 중기 / 장기 √ 예산구분 예산 / 비예산 √ 이행단계 준비 / 추진 / 완료 / 지속 √ 전체 이행률 50% √ ‘19년 추진률 66%	공약개요 - 위 치 : 신관동 전막 ~ 제3대대 앞 - 노 선 명 : 도시계획도로 대로3-3호선 - 사 업 량 : L=940m, B=25m (2차로 ⇒ 4차로) - 사 업 비 : 10,000백만원(시비) - 사업기간 : 2019년 ~ 2022년

☎ 도로과장 이기산 840-8553 / 도로2팀장 김만수 840-8551 / 주무관 김혜진 840-8553

■ 현황 및 정책목표

❍ 현황 : 의당길(전막 ~ 의당농협) 2차선 도로

❍ 정책목표

- 주변아파트 건립 및 교통량 증가로 상습 정체가 발생하는 의당길 확장 추진(2차로⇒4차로)

■ 사업개요

의당길(전막~공주IC 연결도로) 4차선 확장

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년

❍ 사 업 비 : 10,000백만원(도비 1,400 / 시비 8,600)

❍ 사업내용

- 도시계획도로(대로3-3호) 확․포장

▸ L=940m, B=25m

▸ 2차로 ⇒ 4차로

▸ 교량가설 L=48.2m, B=26m(4차로 / 2,800), 교량가설 1/2비용 도비 부담

■ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
실시설계용역	건	1		1
지방재정투자심사	건	1		1
토지 및 지장물 보상	건	1		1
사업 착공 및 준공	건	1					1

■ 그동안 추진실적

❍ 2018. 09. : 중기지방재정계획 반영

❍ 2018. 10. : 실시설계용역 발주

❍ 2019. 05. : 도시관리계획 결정(변경) 용역 발주

❍ 2019. 06. : 주민설명회(신관동행정복지센터)

❍ 2019. 07. : 지방재정투자심사 의뢰

❍ 2019. 11. : 도시관리계획 결정(변경) 입안(충청남도)

❍ 2019. 12. : 실시설계인가 신청

확인지표	단위	실적	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	이행률
연도별 추진률	%			66%	%	%	%	50
실시설계용역	1건	1		1				100%
지방재정투자심사	건	1		1				100%
토지 및 지장물 보상	1건							%
사업 착공 및 준공	건							%

■ 시민참여 실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 / 방송보도	기 타
1

■ 향후 추진계획

❍ 2020. 03. : 도시관리계획 결정(변경) 승인 및 실시설계인가 고시

❍ 2020. 03. : 4차선 확장공사 착수

❍ 2021. 06. : 4차선 확장공사 준공

추진일정

세부 사업명	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
실시설계용역
지방재정투자심사
토지 및 지장물 보상협의
사업 착공 및 준공

사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

세부 사업명	계	임기중 투자계획					임기후 투자계획
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
총 계	10,000		300	4,500	5,200
실시설계용역	300		300
토지 및 지장물 보상협의	3,500			3,500
사업 착공 및 준공	6,200			1,000	5,200

■ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2018년			2019년			2020년			2021년	2022년
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	계획
계	10,000	300	300	0	0	0	300	300	300	4,500	0	0	5,200	0
국비	0	0	0
도비	1,400	0	0										1,400
시비	8,600	300	300				300	300	300	4,500			3,800
민자	0	0	0

■ 기대효과

❍ 행복도시 ~ 공주2구간 도로건설공사 준공(2021년) 시기에 맞춰 주변 아파트 준공으로 상습정체가

발생하고 있는 의당길(전막~의당농협)의 4차선 확장으로 도로교통 서비스 향상 및 정주의욕 고취

87-2	의당길(전막~의당농협) 4차선 확장(2단계)

√ 임기구분 임기내 / 임기후 √ 사업주체 국가 / 공주시 / 민간 √ 정부도움 해당없음 / 재정 / 제도 등 √ 신규여부 계속 / 신규 √ 사업시기 단기 / 중기 / 장기 √ 예산구분 예산 / 비예산 √ 이행단계 준비 / 추진 / 완료 / 지속 √ 전체 이행률 0% √ ‘19년 추진률 0%	공약개요 ❍ 사업기간 : 2020 ~ 2022 ❍ 사 업 비 : 12,000백만원(시비 12,000) ❍ 사업내용 : 도로확장 L=1.8km(2차선→4차선)

☎ 도로과장 김대환 840-8560 / 도로1팀장 강환구 840-8386 / 주무관 허재민 840-8387

■ 현황 및 정책목표

❍ 현황

❍ 정책목표

- 상습정체구간 전막~의당농협 간 도로를 확포장하여 교통 흐름을 개선

■ 사업개요

시도37호(공주IC연결도로~의당농협) 확포장 사업

❍ 사업기간 : 2020 ~ 2022

❍ 사 업 비 : 12,000백만원(시비12,000)

❍ 사업내용

- 도로확장 L=1.8km(2차선→4차선)

■ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
실시설계용역	건	1			1
관련법 협의	건	1			1
편입토지 보상 및 사업완료	건	1					1

■ 그동안 추진실적

확인지표	단위	실적	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	이행률
연도별 추진률	%		%	%	%	%	%	%
실시설계용역	건							%
관련법 협의	건							%
편입토지 보상 및 사업시행	건							%

■ 시민참여 실적

(단위 : 횟수)

주민설명회	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 / 방송보도	기 타

❍

■ 향후 추진계획

❍ 2019 ~ 2021 : 1구간(신관119안전센터~공주IC연결도로) 추진

❍ 2020.  1. ~ 2020. 12. : 실시설계용역 추진

❍ 2021.  1. ~ 2021.  2. : 관련법 협의

❍ 2021.  3 : 사업착공

❍ 2022. 12 : 사업준공

추진일정

세부 사업명	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
실시설계용역
관련법 협의
편입토지 보상 및 사업완료

사업별 투자계획                                                  (단위 : 백만원)

세부 사업명	계	임기중 투자계획(백만원)					임기후 투자계획
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
총 계	12,000			400	5,800	5,800
실시설계용역	400			400
관련법 협의
편입토지 보상 및 사업완료	11,600				5,800	5,800

■ 공약가계부

구분	계			2018년			2019년			2020년			2021년	2022년
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	계획
계	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	5,800	5,800
국비	0	0	0
도비	0	0	0
시비	12,000	0	0							400			5,800	5,800
민자	0	0	0

■ 기대효과

❍ 행복도시 ~ 공주(2구간) 도로건설공사 개통 예정(2019년)에 따른 도로의 연속성 확보를 통한         교통체증 개선

❍ 주변지역(금흥동, 월송지구)의 발생 교통량을 고려한 4차선 확장을 통해 체계적인 교통망 구축

❍ 상습정체구간 전막~의당농협 간 도로를 확포장하여 교통흐름 개선 및 교통안전 확보