86	금암교(공주IC) ~ 목천교차로 4차선 확장

√ 임기구분 임기내 / 임기후 √ 사업주체 국가 / 공주시 / 민간 √ 정부도움 해당없음 / 재정 / 제도 등 √ 신규여부 계속 / 신규 √ 사업시기 단기 / 중기 / 장기 √ 예산구분 예산 / 비예산 √ 이행단계 준비 / 추진 / 완료 / 지속 √ 전체 이행률 67% √ ‘19년 추진률 100%	공약개요 ❍ 사업기간 : 2019 ~ 2021 ❍ 사 업 비 : 11,000백만원(시비 11,000) ❍ 사업내용 : 도로확장 L=1.6km(2차선→4차선)

☎ 도로과장 이기산 840-8560 / 도로1팀장 강환구 840-8386 / 주무관 허재민 840-8387

■ 현황 및 정책목표

❍ 현황 : 대전~당진간 고속도로 개통으로 공주IC를 이용하는 물류차량 및 관광객 증가

❍ 정책목표

- 금암교(공주IC) ~ 목천교차로 기존 2차선 구간을 4차선으로 확장하여 교통흐름을 개선하고      교통안전 확보 추진

■ 사업개요

금암교(공주IC) ~ 목천교차로 확포장 사업

❍ 사업기간 : 2019 ~ 2021

❍ 사 업 비 :  11,000백만원(시비11,000)

❍ 사업내용

- 도로확장 L=1.6km(2차선→4차선)

■ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
실시설계용역	건	1		1
관련법 협의	건	1		1
편입토지 보상 및 사업완료	건	2			1	1

■ 그동안 추진실적

❍ 2018년 2회추경 실시설계용역비 3억원 확보

❍ 2018. 12 : 실시설계용역 착수

❍ 2019.  5 : 주민설명회(신관 공공하수처리장 세미나실)

❍ 2019. 12 : 분할측량 및 교통, 재해영향평가용역 완료

❍ 2019. 12 : 실시설계용역 완료

확인지표	단위	실적	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	이행률
연도별 추진률	%		%	100%	%	%	%	67%
실시설계용역	건	1		1				100%
관련법 협의	건	1		1				100%
편입토지 보상 및 사업완료	건							0%

■ 시민참여 실적

(단위 : 횟수)

주민설명회	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 / 방송보도	기 타
1

■ 향후 추진계획

❍ 2019. 12 ~ 2020.3 : 관련법 협의 및 편입토지 보상

❍ 2020. 4 : 사업 착공

❍ 2021. 12 : 사업 준공

추진일정

세부 사업명	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
실시설계용역
관련법 협의
편입토지 보상 및 사업완료

사업별 투자계획                                                  (단위 : 백만원)

세부 사업명	계	임기중 투자계획(백만원)					임기후 투자계획
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
총 계	11,000	300	2,700	4,000	4,000
실시설계용역	300	300
관련법 협의
편입토지 보상 및 사업완료	10,700		2,700	4,000	4,000

■ 공약가계부                                                        (단위 : 백만원)

구분	계			2018년			2019년			2020년			2021년	2022년
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	계획
계	11,000	1,500	300	300	300	300	1,200	1,200	0	5,500	0	0	4,000	0
국비	0	0	0
도비	5,300	600	0				600	600		2,700			2,000
시비	5,700	900	300	300	300	300	600	600		2,800			2,000
민자	0	0	0

■ 기대효과

❍ 행복도시 ~ 공주(2구간) 도로건설공사 개통 예정(2019년)에 따른 도로의 연속성 확보를 통한         교통체증 개선

❍ 주변지역(금흥동, 월송지구)의 발생 교통량을 고려한 4차선 확장을 통해 체계적인 교통망 구축