5	원도심 허브센터 및 청년 창업공간 조성

√ 임기구분 임기내 / 임기후 √ 사업주체 국가 / 공주시 / 민간 √ 정부도움 해당없음 / 재정 / 제도 등 √ 신규여부 계속 / 신규 √ 사업시기 단기 / 중기 / 장기 √ 예산구분 예산 / 비예산 √ 이행단계 준비 / 추진 / 완료 / 지속 √ 전체 이행률 76% √ ‘22년 추진율 76%	공약개요 ❍ 마을 플랫폼 조성 - 마을어울림 플랫폼, 제민천 컬쳐라운지 ❍ 청년창업 허브공간 제공 - 창업혁신 플랫폼

☎ 도시재생과장 윤석봉 840-8910 / 도시재생기반팀장 강동균 840-8616 / 주무관 김세훈 840-8127

■ 현황 및 정책목표

❍ 현황 : 원도심에 중심공간 및 청년들을 위한 허브공간이 부재하여 활력이 없음

❍ 정책목표

- 역사문화도시 정체성 강화

- 창업지원 및 관람시설을 조성하여 원도심 활성화를 위한 시너지 효과 창출

■ 사업개요

창의 플랫폼 조성사업

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2023년

❍ 사 업 비 : 7,500백만원 (국비 3,900 도비 780, 시비 2,820)

❍ 사업내용

- 마을어울림 플랫폼 사업(구 아카데미극장)

▸1층 : 마을주차장 및 사업지역 내 관광문화시설 접근성 제고로 주민편의 제공

▸2층 : 주민ㆍ상인ㆍ지역 중고생 대상 교육공간, 다목적실 등 주민을 위한 창의공간 제공

- 공주 컬쳐라운지 플램폼 조성사업(공주문화원)

- 창업혁신 플랫폼 조성사업(청소년문화센터)

▸프리마켓, 청년창업제품 전시관 등 지역주민의 지역경제 활성화 도모

▸공방카페 및 예술카페, 문학카페 등 다양한 창업 아이템 교육, 컨설팅, 디자인 관련 지원

▸기존 상업지구가 형성하고 있던 사업영역을 다양한 연령층이 찾아와 즐길 수 있도록 물리적        환경 및 서비스 개선에 대한 교육 및 훈련 제공

■ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
마을어울림플랫폼 조성사업	건	1			1
공주 컬처라운지 조성사업	건	1				1
제민천 창업혁신 플랫폼 조성사업	건	1				1

■ 그동안 추진실적

❍ 도시재생 뉴딜사업(중심시가지형) 사업추진

⇒ 2019. 10. : 제민천 프롬나드조성 교통영향분석 용역 발주 및 착수

⇒ 2020. 01. : 공공건축물 사전검토 (건축도시공간연구소)

⇒ 2020. 02. : 중학동 활성화계획 승인(충남도)

⇒ 2020. 05. : 건축기획수립용역 착수

⇒ 2020. 07. : 공공건축심의 (충남도)

⇒ 2020. 11. : 건축설계 공모 추진(나태주문학창작플랫폼)

⇒ 2020. 12. : 건축설계 공모 추진(마을어울림플랫폼)

⇒ 2020. 01. : 공주 야행 골목길 활성화 및 제민천프롬나드 조성 사업 착수

⇒ 2021. 02. : 나태주문학창작플랫폼 실시설계 착수

⇒ 2021. 03. : 마을어울림플랫폼 실시설계 착수

⇒ 2021. 04. : 제민천역사문화광장 실시설계 완료

⇒ 2021. 04. : 루치아 및 나태주골목길 상징화 조성사업 완료

⇒ 2021. 06. : 공주컬처라운지플랫폼 실시설계 용역 착수

⇒ 2021. 08. : 공주 야행 골목길 활성화 및 제민천프롬나드 조성 사업 주민설명회 개최

확인지표	단위	실적	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	이행률
연도별 추진율	%		%	40%	50%	76%	76%	76%
마을어울림플랫폼 조성사업	건			40%	50%	80%	80%	80%
공주 컬처라운지 사업	건			40%	50%	80%	80%	80%
제민천 창업혁신 플랫폼 조성사업	건			40%	50%	70%	70%	70%

■ 시민참여 실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 / 방송보도	기 타
6			2

❍ 도시재생뉴딜사업 공모신청을 위한 공청회 개최 : 1회(‘19년 1월)

❍ 원도심 활성화를 위한 도시재생뉴딜사업 정책톡톡 토론회 개최 : 1회(‘19년 5월)

❍ 사업설명 및 의견수렴을 위한 주민설명회 실시 : 3회(‘21년 3월)

❍ 중학동 도시재생 정책톡톡 개최 : 1회(‘21년 5월)

■ 향후 추진계획

❍ 2022.  4. : 공주컬처라운지플랫폼 공사 착공

❍ 2022.  4. : 공주 야행 골목길 활성화 사업 완료

❍ 2022.  6. : 제민천프롬나드 조성사업 완료

❍ 2022.  8. : 마을어울림플랫폼, 나태주문학창작플랫폼 공사 착공

❍ 2022.  8. : 역사문화광장 조성사업 공사 완료

❍ 2023.  8. : 나태주문학창작플랫폼 준공

추진일정

세부 사업명	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
마을어울림플랫폼 조성사업
공주 컬처라운지 사업
창업혁신 플랫폼 조성사업

사업별 투자계획                                                      (단위 : 백만원)

세부 사업명	계	임기중 투자계획					임기후 투자계획
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
총 계	10,200	0	3,200	2,900	3,080	1,020	0
마을어울림플랫폼 조성사업	3,000	-	1,000	1,000	1,000		-
공주 컬처라운지 사업	3,600	-	1,100	900	1,200	400	-
창업혁신 플랫폼 조성사업	3,600	-	1,100	1,000	880	620	-

■ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2018년 ~ 2019년			2020년			2021년			2022년
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	7,500	6,724	1,648	3,200	3,200	40	2,900	0	0	1,150	3,080	1,608	250	444	0
국비	3,900	3,900	1,005	1,920	1,920	40	1,740	0	0	240	1,848	965	0	132
도비	780	780	193	384	384	0	348	0	0	48	370	193	0	26
시비	2,820	2,044	450	896	896	0	812	0	0	862	862	450	250	286
민자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 2021년 활성화계획 변경에 따라 재원별 계획 및 확보 금액 변경

■ 기대효과

❍ 건물의 보수, 개선을 통하여 지역 우범지대 제거 및 노후주거지역 환경 개선

❍ 근대 건축물의 전략적 활용을 통한 주거가치 상승 및 골목상권 활성화 기대