9

남공주산단 조기 조성 및 활성화

완료(지속)

√ 임기구분 임기내 / 임기후 √ 사업주체 국가 / 공주시 / 민간 √ 정부도움 해당없음 / 재정 / 제도 등 √ 신규여부 계속 / 신규 √ 사업시기 단기 / 중기 / 장기 √ 예산구분 예산 / 비예산 √ 이행단계 준비 / 추진 / 완료 / 지속 √ 전체 이행률 100% √ ‘22년 추진율 100%	공약개요 ❍ 현재 조성중인 남공주산단의 조기에 완공하고, 기업을 적극적으로 유치하여 공주 지역경제 발전의 중심지역으로 육성

☎ 경제과장 이상률 840-8280 / 기업유치팀장 오재경 840-8296 / 주무관 윤승석 840-8294

■ 현황 및 정책목표

❏ 현황

□ 위    치 : 충남 공주시 검상동 산7-2번지 일원

□ 면    적 : 731,905㎡ / 산업시설 522,552㎡(71%)

□ 사 업 비 : 총1,162억원(기반시설 276억원, 단지조성 886억원)

□ 사업기간 : 2014년 ~ 2023년

□ 시 행 사 : 민관합동개발(공주시+계룡건설산업(주))

□ 추진경위

- 2014. 9월 : 산업단지 개발계획 승인

- 2015. 5월 : 환경입지 컨설팅(81만㎡ / 금강유역환경청)

- 2017. 9월 : 산업단지 투자협약(공주시/솔브레인/계룡건설)

- 2018. 1월 : 환경영향평가 협의요청 / 사경사 제척 및 전면 재검토

- 2018. 3월 : 국비사업 착공(진입도로 63억원, 공업용수 62억원)

- 2018. 7월 : 지자체 투자프로젝트 간담회(규제개혁) 참석 / 대한상공회의소

- 2019. 1월 : 환경영향평가 협의완료

- 2019. 4월 : 환경영향평가 협의내용을 반영한 지정계획서 작성

- 2019. 7월 : 남공주 일반산업단지계획 재협의(안) 관련법 협의의견 제출

- 2019. 9월 : 남공주 일반산업단지계획심의 의결(조건부 의결)

- 2019.10월 : 남공주 일반산업단지계획 지정(변경) 승인 고시

❍ 정책목표

- 남공주 일반산업단지계획 지정(변경) 승인(완료)

- 남공주산단의 조속한 착공으로 우량기업 유치

남공주산단 조성사업

❍ 사업기간 : 2014년 ~ 2023년(9년간)

❍ 사 업 비 : 886억원(민자 886억원)

❍ 사업내용 : 산업단지 조성 731,905㎡ / 산업시설 522,552㎡(71%)

남공주산단 공업용수

❍ 사업기간 : 2015년 ~ 2021년(7년간)

❍ 사 업 비 : 6,397백만원(국비 6,397백만원)

❍ 사업내용 : 용수관로 L=8.47km, D300mm, 배수지 3,000톤/일

- 2017. 12. : 실시설계 완료

- 2018. 12. : 공업용수 공급사업 1차분 준공

- 2019.  3. : 공업용수 공급사업 2차분 및 3차분 착공

- 2019. 12. : 공업용수 공급사업 2차분 준공 및 4차분 계약

- 2021. 12. : 공업용수 공급사업 준공 및 통수

남공주산단 진입도로

❍ 사업기간 : 2014년 ~ 2021년(7년간)

❍ 사 업 비 : 6,226백만원(국비 6,226백만원)

❍ 사업내용 : 진입도로 L=0.38km, B=20m, 접속도로 L=0.56km

- 2017. 12. : 실시설계 완료

- 2018.  5. : 편입용지 보상 완료

- 2019.  8. : 진입도로 착공

- 2021. 12. : 진입도로 준공

남공주산단 폐수처리시설

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2021년(3년간)

❍ 사 업 비 : 15,000백만원(국비 15,000백만원)

❍ 사업내용 : 폐수처리장 2,700톤/일

- 2019. 12. : 폐수처리시설 기본계획 수립

- 2020.  3. : 실시설계 완료

- 2020.  6. : 폐수처리시설 착공

- 2022. 12. : 폐수처리시설 시운전 및 준공

■ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
기반시설 추진	건	1	1
산업단지 지정(변경) 승인	건	1		1
산업단지 착공 및 추진	건	1		1

■ 그동안 추진실적

❍ 2018.  3월 ~ 2019. 9월 : 남공주산단 기반시설(공업용수, 진입도로) 착공 및 추진

❍ 2019. 10월 : 남공주 일반산업단지계획 지정(변경) 승인 고시

❍ 2020.  6월 : 남공주 일반산업단지 조성사업 착공

❍ 2021.  5월 : 남공주 일반산업단지 조성사업 및 기반시설 추진

❍ 2022.  2월 : 조성사업 토공사 및 옹벽공사 추진 중 / 전체 공정률 65%

확인지표	단위	실적	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	이행률
연도별 추진율	%		100%	100%	100%	100%	지속	100%
기반시설 추진	건	4	1	1	1	1		100%
산업단지 지정(변경) 승인	건	1		1				100%
산업단지 착공 및 추진	건	3		1	1	1	1	100%

■ 시민참여 실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 / 방송보도	기 타
1

❍ 환경영향평가 초안 주민설명회 개최 : 1회(‘17년 7월)

■ 향후 추진계획

❍ 2022.  4. : 조성사업 지속 추진

❍ 2023. 12. : 산업단지 및 기반시설 준공

추진일정

세부 사업명	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
지정(변경) 승인
산업단지 조성
기반시설(용수, 도로, 폐수) 추진
기업유치 활동

사업별 투자계획                                                     (단위 : 백만원)

세부 사업명	계	임기중 투자계획					임기후 투자계획
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
총 계	116,223	4,661	34,500	40,137	36,925
산업단지 조성	88,600		29,500	29,500	29,600
공업용수 공급사업	6,397	3,760	-	2,637
진입도로 개설사업	6,226	901	2,000	2,000	1,325
폐수처리시설 건설	15,000		3,000	6,000	6,000

■ 공약가계부                                                        (단위 : 백만원)

구분	계			2018년 ~ 2019년			2020년			2021년			2022년
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	116,223	94,061	60,814	39,161	16,058	16,058	40,137	22,048	21,249	36,925	24,527	23,507	0	31,428	0
국비	27,623	12,752	5,673	9,661	1,798	1,798	10,637	749	749	7,325	3,577	3,126	0	6,628	0
도비	0	4,859	3,760	0	3760	3760	0	799	0	0	0	0	0	300	0
시비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
민자	88,600	76,450	51,381	29,500	10,500	10,500	29,500	20,500	20,500	29,600	20,950	20,381	0	24,500	0

■ 기대효과

❍ 산업용지 적기 공급 및 우량기업 유치를 통한 지역경제 활성화

❍ 일자리 창출을 통한 세수확보 및 유입인구 증가

❍ 기반시설 사업비를 국비로 확보하여 재정부담 잠소 및 분양가 인하효과(167천원/평)