10

도시재생 뉴딜사업 적극 추진

완료(지속)

√ 임기구분 임기내 / 임기후 √ 사업주체 국가 / 공주시 / 민간 √ 정부도움 해당없음 / 재정 / 제도 등 √ 신규여부 계속 / 신규 √ 사업시기 단기 / 중기 / 장기 √ 예산구분 예산 / 비예산 √ 이행단계 준비 / 추진 / 완료 / 지속 √ 전체 이행률 100% √ ‘22년 추진율 100%	공약개요 ❍ 옥룡동을 문재인 정부의 핵심공약인 도시재생 뉴딜사업의 선도지역으로 육성하여 주거복지 제공, 도시경쟁력 강화, 공동체복원 실현

☎ 도시재생과장 윤석봉 840-8910 / 도시재생기반팀장 강동균 840-8616 / 주무관 신수지 840-8659

■ 현황 및 정책목표

❍ 현황 : 옥룡동 버드나무골 일원은 비교적 원도심 중심부에 위치해 있으나 쇠퇴지역으로 도시재생             뉴딜사업 추진 시급

❍ 정책목표

- 지역의 계층분석을 통한 공유형 임대주택제공

- 노후화된 주거지 집수리 비용 지원

- 다양한 계층이 편안하게 보행할 수 있는 환경조성

■ 사업개요

역사를 나누고 삶을 누리는 옥룡동 마을르네상스

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2021년

❍ 사 업 비 : 33,500백만원 (국비14,900 지방비11,700 공기업4,800 민간2,100, 기투자 1,600)

※ 마중물 사업비 : 17,700백만원(국비 10,000 도비 2,000 시비 5,700)

❍ 사업내용 : 4개 영역 13개 세부사업

- 생활인프라 개선사업 (세부사업 5건)

▸공산성 어울림센터, 마을주차장 및 건축불가필지도로확보, 마을목욕탕, 안심골목길, 공유상가

- 주거지원사업 (세부사업 2건)

▸집수리 지원사업, 은개골 진입도로 정비사업

- 지역특성화사업 (세부사업 3건)

▸버드나무 공동체가로 활성화사업, 백제테마가로사업, 마을축제 특화사업

- 지역역량강화사업 (세부사업 3건)

▸주민역량강화사업, 주민공모사업, 도시재생지원센터 운영

■ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
생활인프라 개선사업	건	1				1
주거지원사업	건	1				1
지역특성화사업	건	1				1
지역역량강화사업	건	1				1

■ 그동안 추진실적

구 분	추진실적
생활인프라개선사업	공산성어울림센터 조성사업(마을목욕탕, 공유상가 포함) 착공 마을주차장 및 건축불가필지도로 확보 : 완료 안심골목길 조성사업 : 완료
주거지원사업	집수리 지원사업 : 총 92개소/완료(54개소), 추진 중(38개소) 은개골 진입도로 정비사업 : 보상완료 및 착공
지역특성화사업	버드나무 및 백제테마가로 활성화사업 : 제작․설치 용역 착수(착공) 마을축제 특화사업 : 2회 / 사업완료
지역역량강화사업	주민역량강화사업 : 1회 / 사업완료 주민공모사업 : 8건 / 완료 도시재생지원센터 운영 : 완료 후 지속추진

❍ 2018.  8. : 국토부 승인

❍ 2019.  1. ~ : 마중물 사업 실시설계 용역 추진 / 토지 및 지장물 보상 추진

❍ 2019. 11. : 옥룡동 주거지지원형 활성화계획 변경 용역 착수

❍ 2019. 12. : 마을주차장 및 건축불가필지 도로확보사업 공사착수

❍ 2020.  5. : 옥룡동 주거지지원형 활성화계획 변경 승인 (국토부)

❍ 2020.  6. : 2020년도 집수리 지원사업 추진(57개소)

❍ 2020.  9. : 문화재 현상변경 허가(은개골 진입도로 확포장사업)

❍ 2020. 11. : 공산성 어울림센터 조성사업 건축설계공모 완료 및 실시설계용역 착수

❍ 2020. 12. : 마을주차장 및 건축불가필지 도로확보사업 완료

❍ 2020. 12. : 은개길 진입도로 정비사업 보상 협의 추진

❍ 2020. 12. : 백제테마 및 버드나무 가로활성화 사업 제작․설치 용역 추진

❍ 2021.  6. : 범죄예방디자인 설계 및 안심골목길 조성사업 완료

❍ 2021.  6. : 옥룡동 주민역량강화사업 추진(맞춤형 원도심 활성화사업)

❍ 2021.  7. : 백제테마 및 버드나무 가로활성화 사업 용역 주민대표 설명회 개최

❍ 2021.  9. : 2021년도 집수리 지원사업 추진(35개소)

확인지표	단위	실적	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	이행률
연도별 추진율	%		%	40%	50%	70%	100%	100%
생활인프라 개선사업	건			40%	50%	70%	100%	100%
주거지원사업	건			40%	50%	65%	100%	100%
지역특성화사업	건			40%	50%	65%	100%	100%
지역역량강화사업	건			40%	50%	80%	100%	100%

■ 시민참여 실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 / 방송보도	기 타
13	1	3	3

■ 향후 추진계획

❍ 2022. 02. : 주민공동이용시설 운영 역량강화사업 추진

❍ 2022. 02. : 공산성어울림센터 조성사업 공사 착수

❍ 2022. 06. : 은개길 진입도로 정비사업 완료

❍ 2022. 10. : 백제테마 및 버드나무 가로활성화 사업 완료

❍ 2022. 12. : 공산성어울림센터 조성사업 완료

❍ 2022. 12. : 옥룡지구사업 완료

추진일정

세부 사업명	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
생활인프라 개선사업
주거지원사업
지역특성화사업
지역역량강화사업

사업별 투자계획                                                     (단위 : 백만원)

세부 사업명	계	임기중 투자계획					임기후 투자계획
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
총 계	17,700	6,833	3,700	3,700	3,467	0
생활인프라 개선사업	9,900	3,833	2,000	2,000	2,067	-
주거지원사업	3,800	3,000	300	300	200	-
지역특성화사업	2,200	-	800	800	600	-
지역역량강화사업	1,800	-	600	600	600	-

■ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2018년 ~ 2019년			2020년			2021년			2022년
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	17,700	22,700	11,733	10,533	11,500	5,461	3,700	3,100	2,164	3,467	3,100	4,108	0	5,000	0
국비	10,000	10,000	8,501	6,600	6,600	5,200	1,700	1,700	836	1,700	1,700	2,465	0	0
도비	2,000	2,000	956	1,320	1,320	123	340	340	340	340	340	493	0	0
시비	5,700	10,700	2,276	2,613	3,580	138	1,660	1,060	988	1,427	1,060	1,150	0	5,000
민자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ 기대효과

❍ 주거복지 제공 및 공동체 복원을 통한 도시경쟁력 강화

❍ 대상지 내 기존 문화재 사업과 연계하여 포괄적인 정주환경 개선