11

원도심 ‘근현대 역사문화권역’ 조성 및 제민천 활성화

완료(지속)

√ 임기구분 임기내 / 임기후 √ 사업주체 국가 / 공주시 / 민간 √ 정부도움 해당없음 / 재정 / 제도 등 √ 신규여부 계속 / 신규 √ 사업시기 단기 / 중기 / 장기 √ 예산구분 예산 / 비예산 √ 이행단계 준비 / 추진 / 완료 / 지속 √ 전체 이행률 100% √ ‘22년 추진율 100%	공약개요 ❍ 원도심 ‘근현대 역사문화권역’ 조성 ❍ 원도심 ‘역사문화 올레길’ 프로그램 개발 ❍ 원도심 내 역사문화권역에 조망시설 설치

☎ 도시재생과장 윤석봉 840-8910 / 도시재생기반팀장 강동균 840-8616 / 주무관 김태혁 840-8658

■ 현황 및 정책목표

❍ 현황 : 대상지는 원도심의 쇠퇴지역으로 경제기반 상실, 근린 생활환경 열악

❍ 정책목표

- 지역주민 및 외부관광객을 위한 문화예술 장소 제공

- 지역주민과 외부관광객 양방향 교류의 장소적, 경험적 상징성을 부각

■ 사업개요

문화 인프라 구축사업

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2023년

❍ 사 업 비 : 6,400백만원 (국비4,200 도비660 시비1,540)

❍ 사업내용

- 제민천 역사문화 공원조성사업

▸제민천 역사문화광장(시간이 정지된 공원)을 활용하여 다양한 이벤트와 축제를 위한 상징적인

공원 조성

▸창업 및 문화프리마켓, 야시장, 오픈카페 조성 지원, 야간시설물 설치

▸청소년 문화센터와 공주문화원 건물 2개를 리모델링하여 창의플랫폼 사업 거점장소로 조성

- 거니는 역사문화길 활성화사업

▸공주 근대역사문화 테마거리, 1단계 보행자전용 도로조성, 조형물 등 가로시설물 설치

▸보행자 중심 가로경관 조성 : LED 조명, 휴게공간, 종합정보 안내시스템 앱 개발 등

- 제민천 프롬나드 조성사업

▸제민천 걷기 좋은 길 조성 : 보행 특화거리 조성, 제민천 안내 및 홍보프로그램 운영

▸다양한 이벤트 공간, 노천카페 등 동적가로 조성, 야간경관 특화

▸제민천 좌측(제민천1길)을 2단계 보행자전용도로, 추후 우측(제민천3길) 보행전용도로 조성 계획

■ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
제민천 역사문화 공원조성사업	건	1					1
거니는 역사문화길 활성화사업	건	1					1
제민천 프롬나드 조성사업	건	1					1

■ 그동안 추진실적

❍ 2019.  7. : 제민천 프롬나드 조성 지중화사업 신청 ⇒ 한전

❍ 도시재생 뉴딜사업(중심시가지형) 사업 추진

⇒ 2019. 10. : 제민천 프롬나드조성 교통영향분석 용역 발주 및 착수

❍ 2020.  6. : 제민천 프롬나드조성 교통영향분석 용역 완료

❍ 2020. 11. : 제민천역사문화광장 조성사업 실시설계 착수

❍ 2020. 12. : 제민천 프롬나드 조성사업 우선협상대상자 선정

❍ 2021.  1. : 제민천 프롬나드 조성사업 착수

❍ 2021.  7. : 제민천역사문화광장 조성사업 실시설계 완료

❍ 2021.  8. : 지중화 사업 착수 (한전, 통신사)

❍ 2021. 12. : 제민천역사문화광장 조성사업 공사 착수

확인지표	단위	실적	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	이행률
연도별 추진율	%			30%	40%	100%	지속	100%
제민천 역사문화 공원조성사업	건			30%	40%	100%		100%
거니는 역사문화길 활성화사업	건			30%	40%	100%		100%
제민천 프롬나드 조성사업	건			30%	40%	100%		100%

■ 시민참여 실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 / 방송보도	기 타
2

■ 향후 추진계획

❍ 2022.  6. : 제민천 프롬나드 조성사업 완료

❍ 2022.  8. : 제민천역사문화광장 조성사업 공사 완료

❍ 2022. 11. : 지중화 사업 준공 (한전, 통신사)

추진일정

세부 사업명	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
제민천 역사문화공원 조성
거니는 역사문화길 활성화
제민천 프롬나드 조성

사업별 투자계획                                                     (단위 : 백만원)

세부 사업명	계	임기중 투자계획					임기후 투자계획
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
총 계	6,400		1,600	1,500	2,310	990
제민천 역사문화 공원조성사업	2,800		1,600	800	400
거니는 역사문화길 활성화사업	1,600			300	900	400
제민천 프롬나드 조성사업	2,000			400	1,010	590

■ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2018년 ~ 2019년			2020년			2021년			2022년
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	6,400	4,900	1,315	1,600	1,600	0	1,500	0	0	2,310	2,310	1,315	990	990	0
국비	4,200	3,300	789	1,000	1,000	0	900	0	0	1,500	1,500	789	800	800
도비	430	330	158	100	100	0	100	0	0	200	200	158	30	30
시비	1,770	1,270	368	500	500	0	500	0	0	610	610	368	160	160
민자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ 기대효과

❍ 역사도시 공주의 상징적인 탐방거점으로 역사문화지구와 공주문화시설간 보행자 전용 탐방루트      구축으로 문화관광 네트워크 확대

❍ 주민참여 사업발굴을 통한 지역민의 자긍심 향상

❍ 역량강화를 통해 주변 상권회복과 더불어 관광인프라 구축에 기여

❍ 문화인프라 조성으로 다양한 수요 충족 및 탐방수요 증대 기대