12-1

공주대, 공주교대 주변 대학촌 형성 지원(기반시설)

완료

√ 임기구분 임기내 / 임기후 √ 사업주체 국가 / 공주시 / 민간 √ 정부도움 해당없음 / 재정 / 제도 등 √ 신규여부 계속 / 신규 √ 사업시기 단기 / 중기 / 장기 √ 예산구분 예산 / 비예산 √ 이행단계 준비 / 추진 / 완료 / 지속 √ 전체 이행률 100% √ ‘22년 추진율 -%	공약개요 ❍ 공주교대 주변 대학촌 형성 지원 - 위 치 : 공주시 중학동 공주교대 앞 - 노 선 명 : 도시계획도로 소로3-71호 - 사 업 량 : L=150m, B=6m - 사 업 비 : 1,500백만원(시비) - 사업기간 : 2018 ~ 2020년

☎ 도로과장 김영준 840-8560 / 도시계획도로팀장 정종찬 840-8551 / 주무관 조창근 840-8552

■ 현황 및 정책목표

❍ 현황 : 공주교대앞 제민천변 도로가 미개설 되어 차량교행 불편 및 지역 낙후도 증가

❍ 정책목표

- 공주교육대학교 주변 대학생들의 대학촌 형성 지원을 위하여 도시계획도로(소로3-71호) 개설

- 쾌적한 도로환경 조성으로 활력이 넘치는 대학촌 분위기 조성

■ 사업개요

중학동(소로3-71호) 도시계획도로개설사업

❍ 사업기간 : 2018. 09. ~ 2020. 12.

❍ 사 업 비 : 1,500백만원(시비)

❍ 사업내용 : 도시계획도로(소로3-71호) 개설

▸ 위    치 : 공주시 중학동 협동이용원 일원(공주교대 앞 제민천변 도로)

▸ 노 선 명 : 도시계획도로 소로3-71호

▸ 사 업 량 : L=150m, B=6m

▸ 사 업 비 : 1,500백만원(시비) [보상비 1,100백만원, 공사비 400백만원]

■ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	실적	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
실시설계	1건			1
실시계획 인가	건			1
편입토지, 지장물 보상 착수	1건			1
공사 발주	건				1
공사 완료	건				1

■ 그동안 추진실적

❍ 2018.  9. : 실시설계용역 발주

❍ 2018. 11. : 지적 분할측량 발주

❍ 2019.  2. : 실시설계용역 완료

❍ 2019.  4. : 보상계획 열람공고, 편입토지 등 보상 착수

❍ 2020.  4. : 공사 발주

❍ 2020. 10. : 공사 완료

확인지표	단위	실적	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	이행률
연도별 추진율	%		-	100%	100%	%	%	100%
실시설계	건	1		1				100%
실시계획 인가	건	1		1				100%
편입토지, 지장물 보상 착수	건	1		1				100%
공사 발주	건	1			1			100%
공사 완료	건	1			1			100%

■ 시민참여 실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 / 방송보도	기 타
1

■ 향후 추진계획

❍ 해당 없음

추진일정

중학동(소로3-71호) 도시계획도로개설사업	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
실시설계용역
실시계획 인가고시
보상계획 열람공고
편입용지 보상
공사 추진

사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

세부 사업명	계	임기중 투자계획					임기후 투자계획
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
총 계	1,500	30	1,100	370
실시설계용역	30	30
보상비	1,100		1,100
공사비	370			370

■ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2018년 ~ 2019년			2020년			2021년			2022년
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	1,500	1,233	1,044	1,130	1,233	791	370	0	253	0	0	0	0	0	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
시비	1,500	1,233	1,044	1,130	1,233	791	370	0	253	0			0
민자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0

■ 기대효과

❍ 미개설 도시계획도로 개설을 통한 지역주민 숙원사업 해소

❍ 쾌적한 가로환경 조성을 통한 대학촌 분위기 조성 도모

❍ 낙후된 구도심 정주여건 개선을 통한 지역 균형발전 도모

12-2

공주대, 공주교대 주변 대학촌 형성 지원(예술행사 지원)

완료(지속)

√ 임기구분 임기내 / 임기후 √ 사업주체 국가 / 공주시 / 민간 √ 정부도움 해당없음 / 재정 / 제도 등 √ 신규여부 계속 / 신규 √ 사업시기 단기 / 중기 / 장기 √ 예산구분 예산 / 비예산 √ 이행단계 준비 / 추진 / 완료 / 지속 √ 전체 이행률 100% √ ‘22년 추진율 -%	공약개요 ❍ 사업기간 : 2019 ~ 2022 ❍ 사 업 비 : 90백만원(시비) ❍ 사업내용 - 공주대, 신관동 주변의 야외무대 운영(연2회-8회운영) - 공주대 야외무대 문화가 있는날 운영 - 찾아가는 예술공연, 야외 영화상영 등 대학로 활성화 유도

☎ 문화체육과장 양희진 840-8230 / 문화예술팀장 김은수 840-2536 / 담당자 윤정문 840-2583

■ 현황 및 정책목표

❍ 현황

- 공주교육대학교 주변 시설 : 공주문화예술촌, 공주하숙마을, 풀꽃문학관, 시간이 정지된 음악공원 등

- 공주대학교 주변 시설 : 신관동 야외무대, 영화관 등

❍ 정책목표

- 대학생들이 재능을 선보일 동아리, 밴드 등 문화예술 활동을 하는 개인 또는 단체에게 무대에        설 수 있는 기회 등을 주고 문화적 욕구를 충족시키기 위함

■ 사업개요

대학촌 형성 지원

❍ 사업기간 : 2019 ~ 2022

❍ 사 업 비 : 90백만원(시비)

❍ 사업내용

- 공주대, 신관동 주변의 야외무대 운영(연2회 ~ 8회)

- 공주대 야외무대 문화가 있는 날 운영(클래식공연, 연극 등)

- 찾아가는 예술공연, 찾아가는 영화상영 (공주시) 등 공주대, 공주교대 주변 활성화 추진

- 공주대, 공주교대 기반시설 확충 후 예술동아리 작은 공연 지원

■ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
예술행사 지원	건	연8회		연8회	연8회	연8회	연8회

■ 그동안 추진실적

❍ 2019. : 신관동 야외무대 운영(연 3회)

❍ 2019. : 신관동 야외무대 이용 공연(8회)

❍ 2020. : 신관동 야외무대 운영(연 3회)

❍ 2020. : 시민과 함께하는 버스킹 공연(신관동 대학로 27회)

❍ 2021. : 시민과 함께하는 버스킹 공연(신관동 대학로 25회)

확인지표	단위	실적	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	이행률
연도별 추진율	100%		%	100%	100%	100%	지속	100%
예술행사 지원	건	63		11	27	25	-	100%

■ 시민참여 실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 / 방송보도	기 타
-	-	-	-	-

■ 향후 추진계획

❍ 2019. 1 ~ 2022. 12 : 야외무대 등 예술행사 지원 보조금 지급 및 문화가 있는 날 운영

※ 2022년 2분기부터 추진 예정

추진일정

세부 사업명	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
예술행사 지원(문화체육과)

사업별 투자계획

(단위:백만원)

세부 사업명	계	임기중 투자계획					임기후 투자계획
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
총 계	90		20	20	25	25
예술행사 지원	90		20	20	25	25

■ 공약가계부

(단위: 백만원)

구분	계			2018년 ~ 2019년			2020년			2021년			2022년
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	90	90	65	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	90	90	65	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	0
민자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ 기대효과

❍ 문화행사 상시 지원으로 활력 넘치는 대학촌 형성