13	동현지구 스마트 창조도시 조성

√ 임기구분 임기내 / 임기후 √ 사업주체 국가 / 공주시 / 민간 √ 정부도움 해당없음 / 재정 / 제도 등 √ 신규여부 계속 / 신규 √ 사업시기 단기 / 중기 / 장기 √ 예산구분 예산 / 비예산 √ 이행단계 준비 / 추진 / 완료 / 지속 √ 전체 이행률 69% √ ‘22년 추진율 25%	공약개요 ❍ 행복도시(세종시) 성장을 공주 발전으로 유도하는 전략으로 공주시내 상권과 긴밀히 연계되는 지식기반 신산업단지와 전원형 주거단지가 복합된 미래지향적 창조도시 조성 - 위 치 : 공주시 일원(세종시 연접지역 포함) - 사업내용 : 도시관리계획(지구단위계획 등) 결정 - 사 업 비 : 42,000백만원(시비) - 사업기간 : 2018년 ~ 2024년

☎ 도시정책과장 이영행 840-8540 / 도시계획팀장 고영석 840-8546 / 주무관 권성오 840-8547

도시개발팀장 김대웅 840-8041 / 주무관 한승석 840-8508

■ 현황 및 정책목표

❍ 현황 : 세종특별자치시 출범에 따른 인구유출이 가속화됨에 따라 인구유출을 방지하고 상생 발전을             위한 도시관리계획 필요

❍ 정책목표

- 공주 ~ 세종간 상생발전을 위한 지역행복생활권 기본구상 마련

- 스마트 창조도시개발 사업을 위한 세부 추진계획 수립

■ 사업개요

스마트 창조도시 조성사업(공공청사 부지조성공사)

❍ 사업기간 : 2018. 09. ~ 2024. 12.

❍ 사 업 비 : 42,000백만원(시비)

❍ 사업내용

- 입지 타당성 조사 및 기본구상

- 도시관리계획(지구단위계획구역지정 및 계획수립 등) 수립

스마트창조 도시조성을 위한 민간사업 개발 유도

❍ 사업기간 : 2020. 07. ~

❍ 사업내용

-  “스마트창조 도시조성” 민간사업 개발 유도 및 행정 지원

■ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
타당성 조사 및 기본구상	건	1		1
도시관리계획 수립	건	1			1
공공청사 부지조성 착공	건	1				1
민간사업 개발 유도	건	1					1

■ 그동안 추진실적

❍ 2018.  9. : 스마트창조 도시조성을 위한 입지타당성 및 도시관리계획수립용역 발주

❍ 2018. 11. : 스마트창조 도시조성을 위한 입지타당성 및 도시관리계획수립용역 착수

❍ 2019.  2. : 스마트창조 도시조성을 위한 입지타당성 및 도시관리계획수립용역 착수 보고

❍ 2019.  4. : 스마트창조 도시조성을 위한 입지타당성 및 도시관리계획수립용역 중간 보고(1차)

❍ 2019.  7. : 스마트창조 도시조성을 위한 입지타당성 및 도시관리계획수립용역 중간 보고(2차)

❍ 2019.  7. 26. : 단계별 사업추진 방법에 따른 관리방안 및 타당성 검토

❍ 2019.  9. 23. : 중간보고(기본구상[안] 보고)

❍ 2019. 11.  8. : 주민설명회 개최

❍ 2020.  1. : 기본 및 실시설계용역 발주

❍ 2020.  2. : 소규모 환경영향평가용역 발주

❍ 2020.  3. : 설계용역 착수(토목, 환경, 지반조사, 문화재)

❍ 2020.  4. : 재해영향평가용역 발주

❍ 2020.  5. : 청사부지 가용지 분석 검토

❍ 2020.  6. : 도시관리계획(공공청사) 결정(변경) 입안 검토보고

❍ 2020.  7. : 총사업비 변경 관련 현안사항 검토보고, 환경입지컨설팅에 따른 토지이용계획 변경 검토보고

건강보험심사평가원 교육연수원 부지선정 제안서 제출

❍ 2020.  8. : 건강보험심사평가원 교육연수원 부지답사

❍ 2020.  9. : 공주시 도시계획위원회 심의(공공청사 도시관리계획 결정)

건강보험심사평가원 교육연수원 발표자료 제출, 최종 PPT발표, 결과발표(평창군 선정)

❍ 2020. 10. : 공주시 도시관리계획(도시계획시설 : 공공청사, 도로, 유수지, 공공공지) 결정(변경) 및

지형도면 고시

❍ 2020. 12. : 보상업무 계획 열람공고, 기본 및 실시설계 경제성검토(설계VE) 용역 실시

❍ 2021.  1. : 감정평가 의뢰 및 보상업무 추진

❍ 2021.  3. : 1차 감정금액 공문 송부 및 협의취득 진행(3.25 ~ 4.23.)

❍ 2021.  4. : 암발파(특허)선정에 따른 자문 시행, 암발파(특허)공법 기술제안서 접수

❍ 2021.  5. : 2차 감정금액 공문 송부 및 협의취득 진행(5.10 ~ 5.28.)

❍ 2021.  6. : 무연분묘 개장용역 착수, 전략환경영향평가용역 착수

❍ 2021.  7. : 암발파(특허) 공법 선정 완료

❍ 2021.  8. ~ 12. : 실시계획인가 협의, 보상업무 추진

❍ 2022.  1. ~  3. : 전략환경영향평가 초안검토, 유연분묘 및 토지보상 추진 / 사업대상지 보상 80% 완료

확인지표	단위	실적	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	이행률
연도별 추진율	%		%	100%	100%	70%	25%	69%
타당성 조사 및 기본구상	건			100%				100%
도시관리계획 수립	건				100%			100%
공공청사 부지조성 착공	건					70%	75%	75%
민간사업 개발 유도	건						-	%

※ 민간사업은 적극적 행정지원 등을 통한 개발사업 유도

■ 시민참여 실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 / 방송보도	기 타
1

■ 향후 추진계획

❍ 2022. 03. ~  : 전략환경영향평가 접수, 보상업무 추진

❍ 2022. 07. ~  : 공사발주 및 착공 추진

※ 향후 행정절차(관련실과 협의, 보상업무 지연 등) 이행과정에서 변경될 수 있음.

세부 사업명	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
타당성 조사 및 기본구상
도시관리계획 수립
공공청사 부지조성 착공
민간사업 개발 유도

사업별 투자계획                                                      (단위 : 백만원)

세부 사업명	계	임기중 투자계획(백만원)					임기후 투자계획
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
총 계	42,000	300	200	300	15,000	10,000	16,200
타당성 조사 및 기본구상	50	50	-	-	-	-	-
도시관리계획 수립	450	250	200	-	-	-	-
공공청사 부지조성 착공	41,500	-	-	300	15,000	10,000	16,200
민간사업 개발 유도		-	-	-	-	-	-

■ 공약가계부

(단위: 백만원)

구분	계			2018년 ~ 2019년			2020년			2021년			2022년
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	25,800	23,380	17,888	500	500	500	300	380	347	15,000	19,000	17,037	10,000	3,500	4
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	25,800	23,380	17,888	500	500	500	300	380	347	15,000	19,000	17,037	10,000	3,500	4
민자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ 기대효과

❍ 동현동 일원에 공공기관 이전부지 확보 및 전원형 주거가 복합된 미래지향적 창조도시를 조성함으로써 세종시 주변지역에 행정도시 기능을 분담하고 상생발전을 위한 신성장 거점 네트워크를 구축