28	사곡, 반포 농촌중심지 정비사업 조속 추진

√ 임기구분 임기내 / 임기후 √ 사업주체 국가 / 공주시 / 민간 √ 정부도움 해당없음 / 재정 / 제도 등 √ 신규여부 계속 / 신규 √ 사업시기 단기 / 중기 / 장기 √ 예산구분 예산 / 비예산 √ 이행단계 준비 / 추진 / 완료 / 지속 √ 전체 이행률 80% √ ‘22년 추진율 -%	공약개요 ❍ 사곡면 농촌중심지 활성화사업 조속 추진 - 사업기간 : 2018 ~ 2022(5개년) - 사업내용 : 기초생활기반확충(복지회관, 주차장, 체육공원) 지역경관개선(절골 탐방길, 절골 알림이) 지역역량강화(홍보, 교육, 컨설팅, 마을경영지원) ❍ 반포면 농촌중심지 활성화사업 조속 추진 - 사업기간 : 2017 ~ 2021(5개년) - 사업내용 : 기초생활기반확충(어울림 사랑방·마당, 쉼터) 지역경관개선(진입로 정비, 연지쉼터조성) 지역역량강화(홍보, 교육, 컨설팅, 마을경영지원)

☎ 주민공동체과장 이용호 840-8730 /농촌활성화팀장 이준영 840-8241 / 주무관 권순현 840-8249

■ 현황 및 정책목표

❍ 현황 : 일반농산어촌개발사업 추진 체계상 기본계획 및 시행계획 수립 후 사업 추진 예정

❍ 정책목표

- 농촌지역의 정주기반 및 생활환경 개선을 통한 농촌지역 삶의 질 향상

- 농촌에 대한 기초인프라 투자 및 특화발전 도모

■ 사업개요

사곡면 농촌중심지활성화사업

❍ 사업기간 : 2018 ~ 2022 (5개년)

❍ 사 업 비 : 5,460백만원(국비3,822,  도비218, 시비1,420)

❍ 사업내용

기능유형별	세 부 내 역	비 고
기초생활기반확충	복지회관, 공동주차장, 버스승강장, 공원, 절골지킴이(CCTV)
지역경관개선	절골탐방길, 시시콜콜 수집장, 절골알림이
지역역량강화	교육, 홍보마케팅, 컨설팅, 마을경영지원

❍ 참고사항 : 공유재산 관리계획 수립 중

반포면 농촌중심지활성화사업

❍ 사업기간 : 2017 ~ 2021 (5개년)

❍ 사 업 비 : 5,940백만원(국비4,158,  도비238, 시비1,544)

❍ 사업내용

기능유형별	세 부 내 역	비 고
기초생활기반확충	어울림 사랑방, 어울림 마당, 공암2리 쉼터
지역경관개선	충현서원마실길(스토리텔링길, 진입로정비, 연지쉼터 조성)
지역역량강화	교육, 홍보마케팅, 컨설팅, 마을경영지원

❍ 참고사항 : 공유재산 관리계획 수립 완료

■ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
기본 및 시행계획 수립	건	3	2	1
공사 착공 및 사업 완료	건	2		1	1
정산 및 시설물 인계인수	건	2				1	1

■ 그동안 추진실적

❍ 연도별 사업 추진 실적

확인지표	단위	실적	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	이행률
연도별 추진율	%		100%	100%	%	80%	%	80%
기본 및 시행계획 수립	건	4	2	1		1		100%
공사 착공 및 사업 완료	건	2		1		1		100%
정산 및 시설물 인계인수	건					40%		40%

❍ 반포면 농촌중심지활성화사업의 경우 H/W사업은 완료되었으나, 코로나19확산 및 원활한 운영·관리 방안 모색을 위하여 지역역량강화 사업계획 변경(기간연장 등)

■ 시민참여 실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 / 방송보도	기 타
5	-	-	1	1

❍ 사곡면 농촌중심지활성화사업 기본계획 승인 관련 주민설명회 : 2019. 01. 09

❍ 사곡면 농촌중심지활성화사업 시행계획 수립용역 착수보고회  : 2019. 06. 17.

❍ 사곡면 농촌중심지활성화사업 시행계획 승인 및 고시 : 2021. 07. 12.

❍ 사곡면 농촌중심지활성화사업 H/W사업 공사 착공 : 2021. 11. 12.

❍ 반포면 농촌중심지활성화사업 시행계획 승인 관련 주민설명회 : 2019. 01. 21.

❍ 반포면 농촌중심지활성화사업 착공보고회 : 2019. 08. 23.

❍ 반포면 농촌중심지활성화사업 반포문화센터 준공식 : 2021. 12. 3.

■ 향후 추진계획

❍ 2022.11. 사곡면 농촌중심지활성화사업 H/W 공사 준공

❍ 2022. 6. 사곡면 농촌중심지활성화사업 준공 및 시설물 인수인계 완료

추진일정(사곡면)

세부 사업명	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
기본계획 수립
시행계획 수립
공사 착공 및 사업 완료
정산 및 시설물 인계인수

추진일정(반포면)

세부 사업명	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
시행계획 수립
공사 착공 및 사업 완료
정산 및 시설물 인계인수

사업별 투자계획                                                     (단위 : 백만원)

세부 사업명	계	임기중 투자계획					임기후 투자계획
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
총 계	11,400	1,705	2,430	2,642	3,819	804
사곡면 농촌중심지활성화	5,460	554	1,405	1,463	1,234	804	-
반포면 농촌중심지활성화	5,940	1,151	1,025	1,179	2,585	-	-

■ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2018년 ~ 2019년			2020년			2021년			2022년
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	11,400	11,479	10,135	4,135	3,939	3,939	2,642	3,328	3,328	3,819	2,868	2,868	804	1,344	0
국비	7,980	8,035	7,094	2,893	2,758	2,758	1,849	2,328	2,328	2,674	2,008	2,008	564	941	0
도비	456	462	405	165	156	156	107	134	134	152	115	115	32	57	0
시비	2,964	2,982	2,636	1,077	1,025	1,025	686	866	866	993	745	745	208	346	0
민자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ 기대효과

❍ 농촌지역의 기초생활기반확충 및 지역경관개선사업등을 통하여 살고 싶고, 찾고 싶은 농촌정주      공간을 조성하여 농촌에 희망과 활력을 고취